	팔거천 재해예방사업
	담당자 : 건설과 김태진(☎665-2614)

Ⅰ		사업목적

□ 강북지역 도심을 통과하는 팔거천의 치수·이수·환경기능 증진 및 홍수예방과 더불어 주민들에게 청정한 하천공간 제공 및 쾌적한 도시 환경을 조성코자 함.

Ⅱ		사업개요

□ 위    치: 대구광역시 북구 읍내동 ~ 태전동(동천교~매남교)

□ 사업기간: 2015.1월 ~ 2022.12월

□ 사업내용: 하천정비 L=3.2km

□ 사 업 비: 25,493백만원(국비27%, 시비48%, 구비25%)

Ⅲ		추진상황

□ 고향의 강 사업선정 기본계획 수립(국토부): ’11. 6.

□ 실시설계용역 착수: ’15. 5.

□ 주민설명회 개최(1차): ’16. 5.

□ 실시설계(안) 부산지방국토관리청 협의완료: ’16. 6.

□ 주민설명회 개최(2차): ’16. 9.

□ 설계경제성 검토 등 행정절차 이행: ’16. 12. ~ ’17. 8.

□ 공사착공: ’17. 10.

□ 1차 공사 완료: ’17. 10. ~ ’18. 8.

□ 2차 공사 완료: ’18. 5. ~ ’19. 4.

□ 3차 공사 완료: ’19. 4. ~ ’20. 1.

□ 4차 공사 완료: ’20. 1. ~ ’21. 1.

□ 5차 공사 시공 중: ’21. 1. ~ ’22. 3.

Ⅳ		기대효과

□ 치수·이수·환경기능 증진 및 홍수예방, 청정한 하천공간 제공

Ⅴ		위치도(조감도) 및 현장사진 등 관련사진

팔거교

거동교

대동교

동천교

구암교

태전교

매남교

팔거천구간

L=8.1㎞

2단계 생태하천 조성사업

- 연장(팔거지구) : 1.1㎞

- 구  간 : [거동교 ~ 동천교]

- 사업비 : 63억원

- 2009.10.~2014. 7.(준공)

1단계 수해상습지개선사업

- 연장(학정지구) : 1.9㎞

- 구  간 : 시경계 ~ 거동교

- 사업비 : 102억원

- 2011.2.24.(준공)

매천지구 하천정비

- 연  장 : L=0.9㎞(2009년)

- 구  간 : [매남교 ~ 매천교]

3단계 재해예방사업

- 연  장 : 3.2㎞

- 구  간 : [동천교 ~ 매남교]

- 사업비 : 254억원

- 2015년 ~ 2020년

팔달교

팔거지구 지방하천 정비사업

- 연  장 : L=1.0㎞

- 구  간 : [매천교~팔달교]

매천교

운암교

동천교