민선7기 구청장 공약사업 종합 실천 계획

주민과의 약속인 공약사업을 민선7기 구정 운영의 방향의 근간으로 설정하고 공약사업 이행에 만전을 기하고자 종합 실천 계획을 수립함

Ⅰ		공약사업 추진 방향

구민과의 약속사항 이행으로 현장행정 실천 및 구정운영의 신뢰성 확보

연차별 추진 목표 달성을 위해 공약 사업별 체계적인 관리 실시

민선6기 추진 중 공약에 대해 연속성을 유지하여 추진

공약 이행 상황 점검 및 결과 공개로 구민의 알권리 보장

Ⅱ		공약사업 선정

공약사업 수집 과정

공약사업 선정을 위한 단계별 검토

공약사업 대상 목록 선정	➡	부서별 사전검토	➡	공약사업 세부추진계획 수합	➡	공약사업 이행평가단 구성	➡	민선7기 공약사업 확정

❍ 공약사업 대상 목록 선정

- 기    간 : 2018. 6월

- 방    법 : 공약대상 목록(안) 보고

- 검토사항 : 민선7기 공약사업 대상 선정

❍ 부서별 검토 의견 구청장 보고

- 기    간 : 2018. 7월

- 방    법 : 공약사업(안) 부서별 검토

- 검토사항 : 사업 추진 가능성, 재원대책, 기대효과 등

❍ 부서별 세부 추진계획 수립

- 기    간 : 2018. 8월

- 검토사항 : 사업개요, 연도별 투자계획 및 추진계획 등

❍ 공약이행 평가단 구성

- 구성시기 : 2018. 10월

- 구성인원 : 전문가 6명, 주민대표 5명

❍ 민선7기 공약사항 확정

- 부서별 세부실천계획 수합 후 종합실천 계획 수립

- 민선7기 공약사업 확정

Ⅲ		공약사업 목록

추진목표

계	임기 내 완료 (지속추진)	임기 내 완료	임기 내 기반조성	임기 내 착수
47	19	18	7	3

공약사업 목록

번호	공 약 사 업		추진 부서	비 고
Ⅰ	도시 속 자연을 즐길 수 있는 녹색도시
1-1	동화천, 팔거천 생태하천 복원		건설과	임기 내 완료
	1-1-1	동화천 재해예방 사업
	1-1-2	팔거천 재해예방 사업
1-2	서리지 수변공원 관광메카 조성		공원녹지과	임기 내 기반조성
1-3	금호강과 하중도 친수적 문화 휴식 공간 조성		관광자원개발과	임기 내 기반조성
1-4	북구 둘레길 및 테마형 맨발산책로 조성		공원녹지과	임기 내 완료
Ⅱ	역사 문화가 어우러질 도심재생
2-1	칠곡3지구 문화예술거리 조성		관광자원개발과	임기 내 완료
2-2	구암동 고분군 및 팔거산성 개발 -고대역사문화 체험특구-		관광자원개발과	임기 내 기반조성
2-3	전통문화 체험과 역사교육을 통한 선조들의 지혜 향유		관광자원개발과	임기 내 완료 (지속추진)
2-4	도심재생 뉴딜사업 및 도시재생 공모사업 실시 -침산1동 도심재생 뉴딜 사업-		도시재생과	임기 내 완료
2-5	대구 근대산업유산 개발		관광자원개발과
	2-5-1	대구 근대산업유산 관광자원화		임기 내 기반조성
	2-5-2	옥산로 테마거리 조성		임기 내 완료
2-6	태전동 운전면허시험장 이전		기획조정실	임기 내 착수

번호	공 약 사 업			추진 부서	비 고
Ⅲ	사고 없이 안전한 도시
3-1	자전거도로 정비를 통한 친환경적 교통체계 구축			건설과	임기 내 완료
3-2	복현동, 고성동 정비사업			건축주택과	임기 내 완료
	3-2-1	복현동 주거환경개선 사업
	3-2-2	고성동 주택재건축 사업
3-3	태전 화물자동차 공영차고지 조성사업			교통과	임기 내 완료
3-4	사회, 자연재난 선제적 대응체계 구축			도시안전과	임기 내 완료 (지속추진)
	3-4-1	사회재난 선제적 대응체계 구축
	3-4-2	자연재난 선제적 대응체계 구축
3-5	교통약자 보행환경 개선 사업			교통과	임기 내 완료 (지속추진)
Ⅳ	경제도시 북구
4-1	안경산업 메카 조성 지원			일자리경제과	임기 내 완료
4-2	금호워터폴리스 조성틀 구축			건설과	임기 내 기반조성
4-3	도청이전터 활용 -경제·행정 융복합 타운 건립 기반 구축-			기획조정실	임기 내 기반조성
4-4	유통단지 활성화 및 도시철도 엑스코선 추진
	4-4-1		유통단지 활성화를 위한 엑스코 확장	일자리경제과	임기 내 완료
	4-4-2		도시철도 엑스코선 추진	건설과	임기 내 착수
4-5	중소 벤처기업 육성 지원			일자리경제과	임기 내 완료 (지속추진)
4-6	제3산업단지 재생사업 지속 추진			일자리경제과	임기 내 기반조성
4-7	농수산물 도매시장 현대화			일자리경제과	임기 내 착수
Ⅴ	행복한 노후 도시
5-1	인생이모작(Re-Start) 프로그램 운영			평생교육과	임기 내 완료 (지속추진)
5-2	보훈회관, 노인종합복지관 건립			주민행복과	임기 내 완료
5-3	치매안심센터 건립 운영			건강증진과	임기 내 완료
5-4	노년 취약층 지원사업 실시 -청소년 바른 일자리 사업-			주민행복과	임기 내 완료 (지속추진)

번호	공 약 사 업	추진 부서	비 고
Ⅵ	미래를 책임질 명품 교육 도시
6-1	청소년 문화의집 건립	평생교육과	임기 내 완료
6-2	구민의 건강을 업그레이드할 체육프로그램 운영	문화체육과	임기 내 완료 (지속추진)
6-3	진로 진학센터 설립 운영	평생교육과	임기 내 완료 (지속추진)
6-4	보육의 공공성 실현 -국·공립 어린이집 확충-	가족복지과	임기 내 완료 (지속추진)
6-5	교육국제화 특구 운영	평생교육과	임기 내 완료 (지속추진)
Ⅶ	엄마와 아이들을 위한 특별한 약속
7-1	금호강 가족 오토캠핑장 조성	관광자원개발과	임기 내 완료
7-2	구암서원 가족 캠프 운영	관광자원개발과	임기 내 완료 (지속추진)
7-3	엄마와 함께하는 안전체험 순회 교육	도시안전과	임기 내 완료 (지속추진)
7-4	어린이보호구역, 생활안전 CCTV 설치 확충	정보통신과	임기 내 완료 (지속추진)
7-5	어린이보호구역 횡단보도 안전강화 및 통행환경 개선	교통과	임기 내 완료 (지속추진)
7-6	엄마와 함께하는 스포츠 활동 -고성동 다목적 실내체육관 건립-	기획조정실	임기 내 완료
7-7	유아 장난감 도서관 운영	가족복지과	임기 내 완료
7-8	어린이 급식 관리 지원센터 운영	위생과	임기 내 완료 (지속추진)
7-9	교육경비 보조금 지급	평생교육과	임기 내 완료 (지속추진)
7-10	학교 급식 안전먹거리 지원	평생교육과	임기 내 완료 (지속추진)
7-11	영·유아 및 청소년 교육·문화 프로그램 운영 -북구청소년 회관-	평생교육과	임기 내 완료 (지속추진)

Ⅳ		공약사업 개요

추진기간 : 민선7기 임기 내(2018. 7월 ~ 2022. 6월)

공약 대상사업 : 7개 분야 42개 사업

구분		도시 속 자연을 즐길 수 있는 녹색도시	역사 문화가 어우러질 도심재생	사고 없이 안전한 도시	경제 도시 북구	행복한 노후 도시	미래를 책임질 명품 교육 도시	엄마와 아이들을 위한 특별한 약속
계	42	4	6	5	7	4	5	11

분야별 세부사업 : 7개 분야 47개 세부 사업

국별 분야별	계	기획 조정실	도시재생 추진단	행정국	복지국	도시국	보건소
계	47	3	14	2	11	15	2
도시 속 자연을 즐길 수 있는 녹색 도시	5		1			4
역사 문화가 어우러질 도심재생	7	1	6
사고 없이 안전한 도시	7					7
경제 도시 북구	8	1	5			2
행복한 노후 도시	4				3		1
미래를 책임질 명품 교육 도시	5			1	4
엄마와 아이들을 위한 특별한 약속	11	1	2	1	4	2	1

세부사업 추진부서

구 분	계	기획조정실	일자리경제과	관광자원개발과	도시재생과	문화체육과	정보통신과	주민행복과	가족복지과	평생교육과	도시안전과	공원녹지과	건축주택과	건설과	교통과	건강증진과	위생과
계(건)	47	3	5	8	1	1	1	2	2	7	3	2	2	5	3	1	1

Ⅴ		공약사업 예산 현황

사업 예산 총액 : 1조 1,677억 원

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
	1,167,724	71,052	222,163	204,019	349,092	98,300	88,178	134,920
국비	584,560	29,185	39,558	137,469	212,577	45,062	46,655	74,054
시비	511,482	29,670	83,716	48,456	120,571	43,868	36,657	148,544
구비	65,072	11,622	9,314	14,579	11,569	7,875	4,291	5,822
기타	6,610	575	89,575	3,515	4,375	1,495	575	-93,500

※ 엑스코 제2전시장 확장공사 사업비 935억은 사업준공 후 도시공사에 분할 상환

재원 구성비

❍ 국비 : 50.1%, 시비 : 43.8%, 구비 : 5.6%, 기타 : 0.5%

분야별 소요예산

(단위 : 백만원)

연도별 분야별	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	1,167,724	71,052	222,163	204,019	349,092	98,300	88,178	134,920
도시 속 자연을 즐길 수 있는 녹색도시	76,915	13,645	12,617	20,153	18,324	4,106	8,070
역사 문화가 어우러질 도심재생	98,491	2,103	9,637	8,043	9,902	12,384	3,962	52,460
사고 없이 안전한 도시	46,572	220	2,227	963	23,356	9,903	9,903
경제도시 북구	873,011	46,130	184,855	148,519	284,119	65,359	62,359	81,670
행복한 노후 도시	7,460	647	1,363	4,670	210	215	220	135
미래를 책임질 명품 교육 도시	25,598	3,674	5,266	6,518	5,064	3,166	1,255	655
엄마와 아이들을 위한 특별한 약속	39,677	4,633	6,198	15,153	8,117	3,167	2,409

사업별 소요예산

(단위 : 백만원)

분야	공약(사업)명		추 진 부 서		소 요 예 산
					계	국비	시비	구비	기타
	총 계				1,167,724	584,560	511,482	65,072	6,610
도시 속 자연을 즐길 수 있는 녹색도시	소 계				76,915	31,362	28,324	17,229
	1-1-1	동화천 재해예방 사업	건설과		14,700	7,350	3,675	3,675
	1-1-2	팔거천 재해예방 사업			23,792	11,896	5,948	5,948
	1-2	서리지 수변공원 관광메카 조성	공원 녹지과		18,959	7,084	4,685	7,190
	1-3	금호강과 하중도 친수적 문화 휴식 공간 조성	관광자원 개발과		17,800	4,200	13,600
	1-4	북구 둘레길 및 테마형 맨발 산책로 조성	공원 녹지과		1,664	832	416	416
역사 문화가 어우러질 도심재생	소 계				98,491	53,699	29,387	12,845	2,560
	2-1	칠곡3지구 문화예술거리 조성	관광자원 개발과		3,000	1,000	1,000	1,000
	2-2	구암동 고분군 및 팔거산성 개발	관광자원 개발과		46,510	31,546	14,369	595
	2-3	전통문화 체험과 역사교육을 통한 선조들의 지혜 향유	관광자원 개발과		663	221	113	329
	2-4	도심재생 뉴딜사업 및 도시재생 공모사업 실시	도시 재생과		22,560	10,000	5,000	5,000	2,560
	2-5-1	대구 근대산업유산 관광자원화	관광자원 개발과		22,058	10,932	5,355	5,771
	2-5-2	옥산로 테마거리 조성			3,700		3,550	150
	2-6	태전동 운전면허시험장 이전	기획 조정실
사고 없이 안전한 도시	소 계				46,572	35,013	8,016	3,543
	3-1	자전거도로 정비를 통한 친환경적 교통체계 구축		건설과	400	200	200
	3-2-1	복현동 주거환경개선 사업		건축 주택과	13,933	13,613	192	128
	3-2-2	고성동 주택재건축 사업
	3-3	태전 화물자동차 공영차고지 조성사업		교통과	30,000	21,000	6,000	3,000
	3-4-1	사회재난 선제적 대응체계 구축		도시 안전과	200	200
	3-4-2	자연재난 선제적 대응체계 구축			1,319		904	415
	3-5	교통약자 보행 환경 개선 사업		교통과	720		720

분야	공약(사업)명		추 진 부 서		소 요 예 산
					계	국비	시비	구비	기타
경제도시 북구	소 계				873,011	443,155	421,009	5,397	3,450
	4-1	안경산업 메카 조성 지원	일자리 경제과		43,334	11,855	22,709	5,320	3,450
	4-2	금호워터폴리스 조성틀 구축	건설과		107,600	54,100	53,500
	4-3	도청이전터 활용	기획 조정실		228,500	225,200	3,300
	4-4-1	유통단지활성화를 위한 엑스코 확장	일자리 경제과		189,500		189,500
	4-4-2	도시철도 엑스코선 추진	건설과
	4-5	중소 벤처기업 육성 지원	일자리 경제과		77			77
	4-6	제3산업단지 재생사업 지속 추진	일자리 경제과		304,000	152,000	152,000
	4-7	농수산물 도매시장 현대화	일자리 경제과
행복한 노후 도시	소 계				7,460	1,430	1,528	3,902	600
	5-1	인생 이모작(Re-Start) 프로그램 운영	평생 교육과		735			735
	5-2	보훈회관, 노인종합복지관 건립	주민 행복과		5,065	500	1,365	2,600	600
	5-3	치매안심센터 건립 운영	건강 증진과		1,163	930	163	70
	5-4	노년 취약층 지원 사업 실시	주민 행복과		497			497
미래를 책임질 명품 교육 도시	소 계				25,598	8,534	4,493	12,571
	6-1	청소년 문화의 집 건립		평생 교육과	8,224	5,064		3,160
	6-2	구민의 건강을 업그레이드할 체육프로그램 운영		문화 체육과	3,930	1,122	582	2,226
	6-3	진로 진학센터 설립 운영		평생 교육과	1,706		1,200	506
	6-4	보육의 공공성 실현		가족 복지과	6,765	2,348	1,915	2,502
	6-5	교육국제화 특구 운영		평생 교육과	4,973		796	4,177

분야	공약(사업)명		추 진 부 서	소 요 예 산
				계	국비	시비	구비	기타
엄마와 아이들을 위한 특별한 약속	소 계			39,677	11,367	18,725	9,585
	7-1	금호강 가족 오토캠핑장 조성	관광자원 개발과	1,000	500	250	250
	7-2	구암서원 가족캠프 운영	관광자원 개발과	135	65	35	35
	7-3	엄마와 함께하는 안전체험 순회 교육	도시 안전과	40			40
	7-4	어린이보호구역, 생활안전 CCTV 설치 확충	정보 통신과	5,268	2,044	2,457	767
	7-5	어린이보호구역 횡단보도 안전강화 및 통행환경 개선	교통과	1,510	800	450	260
	7-6	엄마와 함께하는 스포츠 활동	기획 조정실	19,000	5,700	13,300
	7-7	유아 장난감 도서관 운영	가족 복지과	550			550
	7-8	어린이 급식 관리 지원센터 운영	위생과	3,500	1,750	875	875
	7-9	교육경비 보조금 지급	평생 교육과	5,450			5,450
	7-10	학교 급식 안전먹거리 지원	평생 교육과	2,208		1,104	1,104
	7-11	영·유아 및 청소년 교육·문화 프로그램 운영	평생 교육과	1,016	508	254	254

Ⅵ		연차별 추진계획

임기 내 추진계획

계	완료 지속추진	임기 내 완료	임기 내 기반조성	임기 내 착수
47	19(●)	18(★)	7(▲)	3(▼)

연차별 추진계획

분야	사 업 명		추 진 계 획
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
도시 속 자연을 즐길 수 있는 녹색도시	★ 1-1-1	동화천 재해 예방 사업	실시설계 완료 및 공사 착공	공사 시행	공사 준공 【임기 내 완료】
	★ 1-1-2	팔거천 재해 예방 사업	1차 공사 완료	2차 공사 완료	공사 준공 【임기 내 완료】
	▲ 1-2	서리지 주변 관광메카 조성	1단계 공사 완료	2단계 공사 착공	2단계 공사 완공 짚라인 설치비확보	짚라인 설치	야영장 설치 환경문화사업 공모 【임기 내 기반조성】
	▲ 1-3	금호강과 하중도 친수적 문화휴식 공간조성	하중도개발 점용허가 협의 역사∙문화∙관광 자원화사업 기본계획수립	신천 수변공원 실시설계 수립 하중도 전망대 등 공사 착공	침산낙조 체험 마당 및 신천 수변생태공원 설계 용역	하중도 전망대 등 공사 준공	침산낙조 체험마당 및 신천 수변생태공원 공사 착공 【임기 내 기반조성】
	★ 1-4	북구 둘레길 및 테마형 맨발산책로 조성	명봉산, 연암 맨발산책로 및 둘레길 조성	운암지 맨발 산책로 및 둘레길 조성	화담산 맨발산책로 및 둘레길 조성	금호사수지구 맨발산책로 및 둘레길 조성	태복산, 서리지 맨발산책로 조성 【임기 내 완료】
역사 문화가 어우러질 도심재생	★ 2-1	칠곡3지구 문화예술거리 조성	실시 설계용역	디자인거리 공감마당 조성 셉테드시스템 등 공사완료 【임기 내 완료】
	▲ 2-2	구암동 고분군 및 팔거산성 개발	구암동 고분군 누리길 조성 및1호분 복원정비 공사 팔거산성 시굴 조사 용역	구암동 고분군 5호분 발굴조사 용역 역사문화거리 조성공사	구암동 고분군 56호분 복원 정비공사	구암동 고분군 100호분 발굴 조사 용역	팔거산성 발굴조사 용역 【임기 내 기반조성】
	● 2-3	전통문화 체험과 역사 교육을 통한 선조들의 지혜 향유	칠곡향교 「선조들 숨결 仁의 감동」 체험 프로그램 운영 구암서원 「서원 빗장을열다」 체험 프로그램 운영 【임기 내 완료】 【지속 추진】

분야	사 업 명		추 진 계 획
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
역사 문화가 어우러질 도심재생	★ 2-4	도심재생 뉴딜사업 및 도시재생 공모사업 실시	사업 기본계획 수립	공사 시행 자연과 어울린 행복마을 - Eco 클러스트 및 주차장 조성 등 어디서나 안전한 안심마을 - 안심가로 조성 등 함께하고 나누는 공동체 마을 - 마을쉼터 및 복합커뮤니티 센터 조성 등			공사 준공 【임기 내 완료】
	▲ 2-5-1	대구근대 산업유산 관광자원화	대구 근대산업관광 아카이브 작업 및 콘텐츠 개발 연구 용역	대구 북구 관광 종합개발계획 연구 용역	산업관광 콘텐츠개발 사업 공모	대구 근대 산업유산 아카이브 구입	대구 근대 산업유산 팸투어 【임기 내 기반조성】
	★ 2-5-2	옥산로 테마거리 조성	기본 및 실시설계 용역	스포츠거리, 스토리담장, 스마트글라스, 미디어 박스, 테마공간 조성, BAY형 공간 조성 등 옥산로 테마거리 조성 공사 시행			공사 준공 콘텐츠 활성화 【임기 내 완료】
	▼ 2-6	태전동 운전면허 시험장 이전	면허시험장 이전 건의∙협의 채널 구축∙운영		이전 방안 연구 용역 실시		운전면허 시험장 이전 합의 【임기 내 착수】
사고 없이 안전한 도시	★ 3-1	자전거도로 정비를 통한 친환경적 교통체계 구축	실시설계 및 공사 착공	공사 준공 【임기 내 완료】
	★ 3-2-1	복현동 주거환경개선 사업	정비구역지정	사업시행계획인가	착공 지구주민 및 일반분양	골조공사	준공인가 고시 【임기 내 완료】
	★ 3-2-2	고성동 주택재건축 사업	분양 및 공사 주진	공사 시행	준공인가 고시 【임기 내 완료】
	★ 3-3	태전 화물자동차 공영차고지 조성사업	재정투자심사 및 기본계획 용역	도시관리 계획변경 기본 및 실시 설계 용역	토지감정 및 보상	공사착공	공사준공 【임기 내 완료】
	● 3-4-1	사회재난 선제적 대응 체계 구축	재난현장 표준화 매뉴얼 및 가이드라인 제작 【임기 내 완료】 【지속 추진】
	● 3-4-2	자연재난 선제적 대응 체계 구축	자연재난 표준행동 매뉴얼정비 폭염 및 지진 대응체계 구축 【임기 내 완료】 【지속 추진】
	● 3-5	교통약자 보행환경 개선 사업	횡단보도 집중조명 설치 고원식 횡단보도 설치 및 이면도로 정비 등 【임기 내 완료】 【지속 추진】

분야	사 업 명		추 진 계 획
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
경제도시 북구	★ 4-1	안경산업 메카 조성 지원	국제안경전 개최 해외시장 개척 아이빌 지원	안경테표면처리 센터 착공	안경테표면처리 센터 준공 【임기 내 완료】
	▲ 4-2	금호워터 폴리스 조성틀 구축	예비타당성 심사 통과 실시 설계 용역 실시		공사 착공	공사 시행 【임기 내 기반조성】
	▲ 4-3	도청 이전터 활용	부지매입 계약 체결	부지매입비 확보 경북도청 후적지 개발 용역		부지매입 완료 및 무상양여	후적지 개발 설계 【임기 내 기반조성】
	★ 4-4-1	유통단지 활성화를 위한 엑스코 확장	제2전시장 확장 실시설계	실시설계 및 건축공사 발주	건축공사 실시	시설 완료 및 시험운영 【임기 내 완료】
	▼ 4-4-2	도시철도 엑스코선 추진	예비타당성 조사 재신청				【임기 내 착수】
	● 4-5	중소 벤처기업 육성 지원	북구 창업보육센터 운영 중소기업 경영∙기술교육 실시 기업경영지원단 운영 및 지원 【임기 내 완료】 【지속 추진】
	▲ 4-6	제3산업단지 재생사업 지속추진	기반시설(1단계) 사업 공사계약 노후산업 단지 재생사업 활성화 방안 연구 용역	기반시설(1단계) 사업 시행 전략사업구역 사업시행자 지정 및 사업 시행		기반시설(2단계) 사업 및 전략 사업 시행 【임기 내 기반조성】
	▼ 4-7	농수산물 도매시장 현대화	공모사업 신청 시설현대화사업 T/F팀 구성	농수산물 도매시장 현대화 사업 기본 및 실시계획 수립		세부사업 시행 등 공사 착공 【임기 내 착수】
행복한 노후 도시	● 5-1	인생 이모작 프로그램 운영	학습형 일자리 창출 자격증 취득 프로그램 운영 행복북구 Leader's 평생대학원 운영 행복학습센터 프로그램 운영 【임기 내 완료】 【지속 추진】
	★ 5-2	보훈회관 노인종합 복지관 건립	공사계약 및 착공	공사 준공 【임기 내 완료】
	★ 5-3	치매안심센터 건립 운영	공사 계약	공사 착공 및 준공 【임기 내 완료】
	● 5-4	노년 취약층 지원사업 실시	노년 취약층 지원 사업 실시 -청소년 바른 일자리 지원 사업- 【임기 내 완료】 【지속 추진】
미래를 책임질 명품 교육 도시	★ 6-1	청소년 문화의집 건립	설계용역 실시	공사 착공	공사 준공 【임기 내 완료】
	● 6-2	구민의 건강을 업그레이드할 체육 프로그램운영	생활체육 활성화를 위한 프로그램 운영 생활체육 참여 확산 사업 대불스포츠 클럽 운영 활성화 지원 【임기 내 완료】 【지속 추진】

분야	사 업 명		추 진 계 획
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
미래를 책임질 명품 교육 도시	● 6-3	진로∙진학 지원센터 설립 운영	문화예술체험, 전문기관 연계 자유학년제 진로체험 찾아가는 진로체험, 진로진학 1:1 상담, On/Off Line 자기소개서 코칭 학부모∙자녀 상담, 진로∙진학 특강 지원 【임기 내 완료】 【지속 추진】
	● 6-4	보육의 공공성 실현	국공립 어린이집 확충(임기 내 목표 : 18개소) 【임기 내 완료】 【지속 추진】
	● 6-5	교육국제화 특구 운영	지역주민 외국어 교육 프로그램 개발 운영 글로벌 창의 인재육성 프로그램 운영 【임기 내 완료】 【지속 추진】
엄마와 아이들을 위한 특별한 약속	★ 7-1	금호강 가족 오토캠핑장 조성	공사 계약 및 착공	공사 준공	오토 캠핑장 운영 【임기 내 완료】
	● 7-2	구암서원 가족 캠프 운영	구암서원 가족캠프 운영 묵향에 마음을 담다, 달빛 어우러짐, 선비의 삶 나를 찾는다 등 【임기 내 완료】 【지속 추진】
	● 7-3	엄마와 함께하는 안전체험 순회교육	안전체험 순회교육, 시뮬레이션 소화 교육 지속 실시 【임기 내 완료】 【지속 추진】
	● 7-4	어린이보호구역, 생활안전 CCTV 설치	생활 안전 및 어린이 보호 CCTV 설치(임기 내 목표 : 145대) 【임기 내 완료】 【지속 추진】
	● 7-5	어린이 보호구역 횡단보도 안전강화 및 통행환경 개선	초등학교 주변 단속 CCTV 설치 어린이보호구역 안전시설 확충 및 정비 【임기 내 완료】 【지속 추진】
	★ 7-6	엄마와 함께하는 스포츠 활동	설계용역 완료 조경공사 착공	건축공사 착공	공사 준공 및 시설 운영 【임기 내 완료】
	★ 7-7	유아 장난감 도서관 운영		유아 장난감 도서관 조성	유아 장난감 도서관 운영 【임기 내 완료】
	● 7-8	어린이 급식 관리 지원센터 운영	어린이 급식관리 지원 센터 운영(2개소) 【임기 내 완료】 【지속 추진】
	● 7-9	교육경비 보조금 지급	초∙중∙고 교육경비 보조금 지원 【임기 내 완료】 【지속 추진】
	● 7-10	학교급식 안전먹거리 지원	관내 초등학교 우수식재료비 구입비 지원 【임기 내 완료】 【지속 추진】
	● 7-11	영∙유아 및 청소년 교육∙문화 프로그램운영	북구 청소년 회관 청소년 방과후 아카데미, 영유아 프로그램, 청소년 프로그램 운영 【임기 내 완료】 【지속 추진】

Ⅶ		공약이행률 확인지표

분야	공약사업명		확 인 지 표
도시 속 자연을 즐길 수 있는 녹색도시	1-1-1	동화천 재해예방 사업	사업 공정률
	1-1-2	팔거천 재해예방 사업
	1-2	서리지 수변공원 관광메카 조성	사업 공정률 공모사업 선정 여부
	1-3	금호강과 하중도 친수적 문화 휴식 공간 조성	사업 공정률 사업추진을 위한 관련기관(대구시, 부산국토관리청) 협의 편의시설 설치 및 각종 행사 추진 실적
	1-4	북구 둘레길 및 테마형 맨발 산책로 조성	둘레길 및 맨발산책로 사업 공정률 편의시설 설치률
역사 문화가 어우러질 도심재생	2-1	칠곡3지구 문화예술거리 조성	주민아카데미 운영 및 주민공청회 개최 사업공정률
	2-2	구암동 고분군 및 팔거산성 개발	국가사적 지정 고분군 발굴조사, 복원 정비 공사 사업 추진율
	2-3	전통문화 체험과 역사교육을 통한 선조들의 지혜 향유	칠곡향교, 구암서원 전통 프로그램 운영 실적
	2-4	도심재생 뉴딜사업 및 도시재생 공모사업 실시	침산동 도심재생 사업 공정률 도심재생 사업 공모 신청 선정
	2-5-1	대구 근대산업유산 관광자원화	정부 공모사업 선정 및 국비확보 근대산업관광 아카이브 작업 및 관광트레일 조성률
	2-5-2	옥산로 테마거리 조성	테마 거리 조성률 콘텐츠 활성화
	2-6	태전동 운전면허시험장 이전	면허시험장 이전건의 협의채널 구축∙운영 이전방안 연구 용역 및 이전 합의 도출
사고 없이 안전한 도시	3-1	자전거도로 정비를 통한 친환경적 교통체계 구축	사업 공정률
	3-2-1	복현동 주거환경개선 사업	사업 공정률
	3-2-2	고성동 주택재건축 사업	사업 공정률
	3-3	태전 화물자동차 공영차고지 조성사업	토지감정 및 보상 사업 공정률
	3-4-1	사회재난 선제적 대응체계 구축	사회재난 대응 매뉴얼 및 프로그램 구축
	3-4-2	자연재난 선제적 대응체계 구축	자연재난 대응 매뉴얼 및 프로그램 구축
	3-5	교통약자 보행환경 개선 사업	사업 공정률
경제도시 북구	4-1	안경산업 메카 조성지원	안경테 표면처리센터 사업공정률 대구 국제안경전 개최 및 각종 지원정책 추진 실적 안경거리 유지보수 실적
	4-2	금호워터폴리스 조성틀 구축	사업 공정률
	4-3	도청이전터 활용	부지매입 완료 및 무상양여 여부 후적지 개발 사업 진도율
	4-4-1	유통단지 활성화를 위한 엑스코 확장	엑스코 제2전시장 확장 사업 공정률

분야	공약사업명		확 인 지 표
경제도시 북구	4-4-2	도시철도 엑스코선 추진	예비타당성 조사 통과 및 사업 추진 결정
	4-5	중소 벤처기업 육성 지원	창업보육센터, 기업경영지원단 운영 실적
	4-6	제3산업단지 재생사업 지속 추진	단지내 기반시설 조성률
	4-7	농수산물 도매시장 현대화	공모사업 선정 여부 및 사업 공정률
행복한 노후 도시	5-1	인생 이모작(Re-Start) 프로그램 운영	학습형 일자리 창출 자격증 취득 프로그램 운영 실적 행복북구 Leader's 평생대학원 운영 실적 행복학습센터(자격증 취득) 프로그램 운영 실적
	5-2	보훈회관, 노인종합복지관 건립	사업 공정률
	5-3	치매안심센터 건립 운영	사업 공정률
	5-4	노년 취약층 지원사업 실시	노년 취약층 방문 및 지원실적
미래를 책임질 명품 교육 도시	6-1	청소년 문화의집 건립	사업 공정률
	6-2	구민의 건강을 업그레이드할 체육프로그램 운영	생활체육 활성화 프로그램 운영 실적 대불스포츠 클럽 운영 활성화 지원 실적
	6-3	진로 진학센터 운영	진로 체험프로그램, 진로 진학프로그램 운영 실적
	6-4	보육의 공공성 실현	국공립 어린이집 확충 목표 달성(임기 내 18개소)
	6-5	교육국제화 특구 운영	글로벌 창의 인재육성 프로그램 운영 실적
엄마와 아이들을 위한 특별한 약속	7-1	금호강 가족 오토캠핑장 조성	사업 공정률
	7-2	구암서원 가족 캠프 운영	프로그램 운영 실적
	7-3	엄마와 함께하는 안전체험 순회 교육	안전체험 순회 교육 실적
	7-4	어린이보호구역, 생활안전 CCTV설치 확충	CCTV 설치 목표 달성(임기 내 145대)
	7-5	어린이보호구역 횡단보도 안전강화 및 통행환경 개선	통행환경 개선사업 실적
	7-6	엄마와 함께하는 스포츠 활동	다목적 실내체육관 건립 공정률
	7-7	유아 장난감 도서관 운영	장난감 도서관 설립 추진율
	7-8	어린이 급식 관리 지원센터 운영	어린이 급식 관리 지원센터 운영 실적
	7-9	교육경비 보조금 지급	관내 초∙중∙고 교육경비 지원 실적
	7-10	학교 급식 안전먹거리 지원	식재료 구입비 지원 실적
	7-11	영∙유아 및 청소년 교육∙문화 프로그램 운영	북구 청소년회관 프로그램운영 실적

Ⅷ		공약사업 관리

공약사업 추진상황 관리

❍ 총괄부서(기획조정실)

- 공약 사업별 새올행정시스템 등록 확인

- 공약 추진상황 종합점검 및 결과 공개(홈페이지) : 반기 1회

- 매니페스토 공약이행 평가 대비

❍ 추진부서

- 사업별 추진상황 새올시스템 입력 : 분기별 1회 이상

- 사업별 추진상황 자체점검 : 수시

- 공약사업 수정 ․ 변경은 사유 및 근거 서류를 첨부하여 구청장에게
보고 후 변경

공약사업 이행 평가

❍ 자체평가 보고회

- 시 기 : 반기별 1회

- 방 법 : 추진계획(이행률 확인지표)대비 실적 평가

- 추진실적 제출 : 반기말 기준 익월 15일 까지

❍ 공약이행 평가단 회의 개최

- 시 기 : 반기별 1회

- 방 법 : 민선7기 공약이행 평가단 회의 및 공약 사업 현장 확인

❍ 외부평가 참여

- 한국매니페스토실천본부 주관 전국 시군구청장 공약이행 및 정보공개 평가

민선7기

구청장 공약사업별 세부추진계획

Ⅰ	도시 속 자연을 즐길 수 있는 녹색 도시

관리번호	1-1-1	공약명	동화천 재해예방사업
사업구분	임기 내 완료	추진부서	건설과장 홍승용 / 팀장 이상운 / 주무관 김부식(☎665-2614)

□ 추진목표

○ 치수 · 이수 · 생태 기능 증진

○ 지속적인 하천 유지용수 공급으로 기본 생태계 보호와 생물의 다양성 확보

○ 주민 여가를 즐길 수 있는 친수 공간 제공

□ 사업개요

○ 사업위치 : 북구 동 · 서변동 일원

○ 규    모 : 하천정비 3.42km, 유지용수 1.4km

○ 사업기간 : 2017. 1월 ~ 2020. 12월

○ 총사업비 : 14,700백만원

□ 현재 추진 상황

○ 2017.  3월 : 용역착수

○ 2017.  8월 : 주민설명회 개최(1차)

○ 2017.  9월 : 계획(안) 작성

○ 2017. 10월 : 주민설명회 개최(2차)

○ 2018.  2월 : 지방청협의(최종안) 및 최종설계 검토

○ 2018.  5월 : 총사업비 결정[14,700백만원(국50%/시25%/구25%)]

○ 2018.  7월 : 주민설명회 개최(3차)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
계	14,700	300	1,200	6,600	6,600	-	-	-
국비	7,350	150	600	3,300	3,300	-	-	-
시비	3,675	75	300	1,650	1,650	-	-	-
구비	3,675	75	300	1,650	1,650	-	-	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진
임기내	2018년	실시설계 완료 및 공사 착공	20
	2019년	동화천 재해예방사업 공사 시행	60
	2020년	동화천 재해예방사업 공사 준공	100
	2021년
	2022년
임 기 후

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 매칭펀드 방식(구비25% 확보)으로 추진됨에 따라 구비 미확보 시 사업추진이 어려움

○ 대  책

- 차질 없는 구비(25%) 확보 필요

□ 기대효과

○ 도심하천의 치수, 이수 기능의 증진으로 홍수예방

○ 하천 유지수 공급으로 다양한 생물이 서식하는 생태하천 조성

○ 주민들에게 여가를 즐길 수 있는 친수 공간 제공과 더불어, 아름다운 하천을 조성

관리번호	1-1-2	공약명	팔거천 재해예방사업
사업구분	임기 내 완료	추진부서	건설과장 홍승용 / 팀장 이상운 / 주무관 김부식(☎665-2614)

□ 추진목표

○ 치수 · 이수 · 생태 기능 증진

○ 지속적인 하천 유지용수 공급으로 기본 생태계 보호와 생물의 다양성 확보

○ 주민 여가를 즐길 수 있는 친수 공간 제공

□ 사업개요

○ 사업위치 : 대구광역시 북구 읍내동 ~ 태전동(대동교 ~ 매남교)

○ 규    모 : 하천정비 3.2km, 유지용수 관로 매설 7.46km

○ 사업기간 : 2015. 1월 ~ 2020. 12월

○ 총사업비 : 23,792백만원

□ 현재 추진 상황

○ 2011. 6월 : 고향의 강 사업 대상 선정(국토교통부 기본계획 수립)

○ 2015. 5월 : 실시설계 용역 착수

○ 2016. 5월 : 주민설명회(1차) 개최

○ 2016. 9월 : 주민설명회(2차) 개최

○ 2016. 12월 ~ 2017. 8월 : 설계경제성 검토 등 관련 행정절차 이행

○ 2017. 8월 : 조달청 계약 요청(2017. 10. 13. : 개찰)

○ 2017. 10. 31. : 공사(1차) 착공

○ 2018.  5. 15. : 공사(2차) 착공

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
계	23,792	4,124	3,800	8,000	7,868	-	-	-
국비	11,896	2,062	1,900	4,000	3,934	-	-	-
시비	5,948	1,031	950	2,000	1,967	-	-	-
구비	5,948	1,031	950	2,000	1,967	-	-	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진
임기내	2018년	팔거천 재해예방사업 1차공사 완료	20
	2019년	팔거천 재해예방사업 2차공사 완료	50
	2020년	팔거천 재해예방사업 공사 준공	100
	2021년
	2022년
임 기 후

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 매칭펀드 방식(구비25% 확보)으로 추진됨에 따라 구비 미확보 시 사업추진이 어려움

○ 대  책

- 차질 없는 구비(25%) 확보 필요

□ 기대효과

○ 도심하천의 치수, 이수 기능의 증진으로 홍수예방

○ 하천 유지수 공급으로 다양한 생물이 서식하는 생태하천 조성

○ 주민들에게 여가를 즐길 수 있는 친수 공간 제공과 더불어, 아름다운 하천을 조성

관리번호	1-2	공약명	서리지 수변공원 관광메카 조성
사업구분	임기 내 기반조성	추진부서	공원녹지과장 이재수 / 공원팀장 김선혜 / 주무관 김정욱(☎665-2864)

□ 추진목표

○ 서리지 일원에 도심 친수공간 조성 및 생태녹지 공간 확충으로 시민들에게 힐링 및 생태 체험 장소를 제공

○ 현재 추진중인 서리지 수변생태공원 조성사업과 연계하여 시너지 효과를 낼 수 있는 모험시설과 가족체험형 시설 도입을 위해 국가 공모사업을 추진하여 서리지 수변생태공원을 활성화 하고자 함

□ 사업개요

<서리지 수변생태공원 조성>

○ 위    치 : 대구 북구 동호동 73번지 서리지 일원

○ 사업규모 : A=89,673㎡

- 산책로, 가드닝체험장, 암석원, 잔디마당, 숲놀이터, 생태숲, 수변데크 조성 등

○ 사업기간 : 2015년 ~ 2020년(1단계 2015∼2018, 2단계 2019 ∼ 2020)

○ 총사업비 : 12,959백만원(국비 2,629/ 시비 4,190/ 구비 6,140)

<서리지 수변생태공원 활성화(관광메카 조성)>

○ 위    치 : 대구 북구 동호동 71-1번지 및 56번지 일원

○ 사업규모 : 짚라인(L=350m정도), 야영장(A=10,000㎡정도)

○ 사업기간 : 짚라인(2019년 ∼ 2021년), 야영장(2021년 이후)

○ 총사업비 : 6,000백만원(국비 4,455 / 시비 495 / 구비 1,050)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
계	18,959	8,901	2,458	800	800	1,050	4,950	-
국비	7,084	1,200	1,029	-	400	-	4,455	-
시비	4,685	2,761	1,029	-	400	-	495	-
구비	7,190	4,940	400	800	-	1,050	-	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 2022년 49.5억은 국가 공모사업 선정 후 예산확보 가능

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진		기본구상용역 시행(서리지 수변생태공원 활성화)
임기내	2018년	1단계 수변생태공원 기반시설 공사 완료	30
	2019년	2단계 공사 착공 및 준공 수변데크 및 관찰 전망대 조성, 초화류 식재	60
	2020년
	2021년	짚라인 설치 / 야영장 설치를 위한 도시관리계획 (변경)결정 용역 실시	90
	2022년	환경문화 공모사업 응모(야영장 설치)	100
임 기 후

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 짚라인 및 야영장 사업비 미확보

- 야영장 조성 부지 확보를 위해 도시관리계획 변경 후 사업 시행 가능

○ 대  책

- 중앙정부 공모사업에 신청하여 사업비 확보 후 추진

- 도시관리계획 변경 결정 추진

□ 기대효과

○ 서리지 수변생태공원 활성화를 통해 서리지가 대구의 대표적인 관광명소로
자리매김

○ 휴일 확대, 가족단위 관광에 따른 정부의 관광 활성화 정책에 부응

○ 모험·체험 등 청소년들에 대한 무한한 도전정신 부여

관리번호	1-3	공약명	금호강과 하중도 친수적 문화휴식 공간조성
사업구분	임기 내 기반조성	추진부서	관광자원개발과장 고진호 / 금호강개발팀장 서송학 / 주무관 박창희(☎665-2254)

□ 추진목표

○ 휴식과 충전의 자연 친화적인 공간 조성

○ 친환경 생태정책이 공존하는 새로운 금호강변 어메니티 구축

○ 사람과 새로운 문화를 끌어오는 차별화된 공간 조성

□ 사업개요

○ 사업면적 : A=245,000㎡

○ 사업기간 : 2018년 ∼ 2022년

○ 총사업비 : 178억원

○ 사업내용

- 하중도 개발 : 진입보도교, 전망대, 진출입로, 상징조형물, 조명등,
편의시설 설치 및 주차장 확충 등

- 신천프로젝트 : 신천수변생태공원, 침산낙조체험마당

□ 현재 추진 상황

○ 신천개발 기본계획 수립 : 2016. 11월

○ 금호강 하중도 명소화사업 기본계획 수립 : 2017. 9월

○ 하중도 단위사업별 하천점용허가 : 부산지방국토관리청과 협의중

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
재원별	17,800	-	4,903	4,497	2,800	2,800	2,800	-
국비	4,200	-	-	-	1,400	1,400	1,400	-
시비	13,600	-	4,903	4,497	1,400	1,400	1,400	-
구비	-	-	-	-	-	-	-	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진		기본계획 수립
임기내	2018년	· 하중도개발 단위사업별 하천점용허가 : 협의중(부산국토청) · 신천 역사 · 문화 관광자원화사업(침산낙조체험마당) 기본계획수립 용역	20
	2019년	· 신천 수변생태공원 실시설계 수립(용역비 2억 정도) · 하중도 진출입로, 보도교, 전망대 등 공사 착공	40
	2020년	· 침산낙조 체험마당 및 신천 수변생태공원 설계 용역	50
	2021년	· 하중도 진출입로, 보도교, 전망대 등 공사 준공	80
	2022년	· 침산낙조 체험마당 및 신천 수변생태공원 공사 착공	100
임 기 후		· 침산낙조 체험마당 및 신천 수변생태공원 공사 준공

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 신천개발 프로젝트의 경우 재원조달이 관건이며, 하중도의 경우 부산 지방국토관리청 하천점용 허가 관련 협의가 최우선 과제임

○ 대  책

- 금호강 북구 르네상스 시대를 맞이하여 휴식과 충전을 위한 자연친화적 수변공간 조성을 위하여 재원확보에 최선을 다하고, 또한 하천점용 허가 기준에 맞도록 실시설계 용역시 부산국토청과 원활한 협의가 요구됨

□ 기대효과

○ 산업근대화 시대의 부정의 대명사에서 희망의 아이콘으로 북구 금호강 르네상스를 맞이하여 주민과 관광객들에게 자연친화적 휴식공간 및 볼거리 제공

관리번호	1-4	공약명	북구 둘레길 및 테마형 맨발산책로 조성
사업구분	임기 내 완료	추진부서	공원녹지과장 이재수 / 산림휴양팀장 박지은 / 주무관 김재수(☎665-4422)

□ 추진목표

○ 도심지 근교의 생활권을 중심으로 한 산림휴양체험 공간을 조성하여, 주민들의 건강증진에 기여하고 건전한 여가공간으로 제공

○ 숲, 그늘, 바람 등 자연의 풍경과 소리를 담아 친자연적으로 조성

□ 사업개요

○ 사업규모

- 둘레길 조성 및 관리 : 46.5km(함지산 등 5개소)

- 테마형 맨발산책로 조성 : 4.8km(명봉산 등 8개 코스)

○ 사업기간 : 2017년 ∼ 2022년

○ 총사업비 : 1,664백만원

○ 사업내용

- 둘레길 조성 및 관리 : 목재계단, 데크로드, 노후시설물 정비, 안내판 등

- 맨발산책로 조성 : 마사토길, 황토볼, 세족장, 지압보도, 쉼터 등

□ 현재 추진 상황

○ 2017. 8월 ~ 2018. 8월 : 명봉산, 침산 ‧ 연암공원 맨발산책로 조성

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
계	1,664	320	256	256	256	256	320	-
국비	832	160	128	128	128	128	160	-
시비	416	80	64	64	64	64	80	-
구비	416	80	64	64	64	64	80	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진		명봉산(무병장수길) 맨발산책로 조성(1차) 및 둘레길 조성 등
임기내	2018년	명봉산, 침산(건강백세길), 연암(건강선비길) 맨발산책로 및 둘레길 조성 등	30
	2019년	운암지(삼천갑자 동방삭길) 맨발산책로 및 둘레길 조성 등	45
	2020년	화담산(십장생길) 맨발산책로 및 둘레길 조성 등	60
	2021년	금호사수지구(이팔청춘길) 맨발산책로 및 둘레길 조성	75
	2022년	태복산(백세장수길), 서리지(만수무강길) 맨발산책로 및 둘레길 조성	100
임 기 후		-

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 조성되는 부지는 대부분 사유지로 토지소유자의 동의가 어려움

○ 대  책

- 소유자에 대하여 사업취지를 충분히 설명하고 동의 해 줄 것을 설득

- 부 동의 시 우회로 선정 및 동의 가능한 대상지를 우선 추진

□ 기대효과

○ 산림과 숲을 활용한 다목적 산림휴양기능 제공

○ 건전한 산림휴양문화 확산 및 이용자 만족도 제고

○ 특별한 장비나 경제적 비용이 들지 않는 가장 안전한 유산소 운동을 통한
주민들의 건강증진에 기여

Ⅱ	역사 문화가 어우러질 도심재생

관리번호	2-1	공약명	칠곡3지구 문화예술거리 조성
사업구분	임기 내 완료	추진부서	관광자원개발과장 고진호 / 관광진흥팀장 권태승 / 주무관 이원익(☎665-4322)

□ 추진목표

○ 칠곡3지구 중심상업지구 일대를 지역특성을 고려한 통합적 문화예술 거리로
조성하여 침체된 지역 상권 활성화에 기여

○ 오랫동안 방치되어 범죄발생률이 지속적으로 증가하고 있는 보행자 전용도로에
대한 거리환경개선을 통한 범죄예방과 테마거리 조성

□ 사업개요

○ 사업구간 : 칠곡3지구 중심상업지구 보행자전용도로

○ 사업규모 : B=12m, L=720m

○ 사업기간 : 2017년 ~ 2019년

○ 소요예산 : 30억원 정도

○ 거 리 명 : Blue Velvet Street(블루벨벳 거리)

□ 현재 추진 상황

○ 2016. 11월 ~ 2017. 1월 : 문화예술거리 기본구상 연구용역

○ 2017.  6월 : 제1차 추가경정예산 편성(구비 10억원)

○ 2017. 9. 12. : 문화예술거리 조성 주민설명회 개최

○ 2017. 9. 29. : 행정안전부 특별교부세 10억 확보

○ 2018. 4월 ~ 10월 : 기본 및 실시설계 용역

○ 2018. 7월 ~ 8월 : 주민아카데미 운영(5회)

□ 연도별 투자계획                                    (단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
재원별	3,000	2,000	1,000	-	-	-	-	-
국비(특교세)	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-
시비(특교금)	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-
구비	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진		◦ 칠곡3지구 문화예술거리 조성 기본구상 용역(2017년)
임기내	2018년	◦ 기본 및 실시설계 용역(진행중)	30
	2019년	◦디자인거리, 공감마당 조성, 셉테드시스템 도입, 가로간판 정비, 경관가로조명 ◦동천육교 랜드마크, 문화커뮤니티센터, 휴게시설, 키오스크 시스템	100
	2020년
	2021년
	2022년
임 기 후

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 대구시 최초 주민주도 경관협정 사업으로 추진하고 있으며, 경관협정에 대한 주민들의 관심 필요

○ 대  책

- 주민아카데미 운영 및 주민공청회 개최로 거리조성과 경과협정에 대한 주민들의 관심을 증대시킴

□ 기대효과

○ 지역 상업지구 주변을 문화와 감성의 예술거리 브랜드화하여 새로운 젊음의 거리 조성을 통한 상가활성화

관리번호	2-2	공약명	구암동 고분군 및 팔거산성 개발 -고대역사문화 체험특구-
사업구분	임기 내 기반조성	추진부서	관광자원개발과장 고진호 / 관광진흥팀장 권태승 / 주무관 최한태(☎665-4326)

□ 추진목표

○ 구암동 고분군 및 팔거산성의 보존정비를 통한 역사교육의 장으로 활용

○ 탐방로 정비, 고분전시관 설치 등을 통해 도심 속 내 고대역사문화체험 공간마련

○ 지역의 역사 ‧ 문화 분야의 교육과 체험산업 육성을 통한 서비스산업 활성화

□ 사업개요

○ 구암동고분군 ․ 팔거산성 종합정비

- 면적 : 428,509㎡

- 1 ․ 5 ․ 100호분 발굴조사, 팔거산성 시굴조사, 역사문화거리 조성

- 전시관 ․ 박물관 신축, 탐방로 및 탐방안내소 설치

○ 고대역사문화 체험특구 추진

- 면적 : 593,194㎡

- 고대역사 유적지 정비 ․ 복원, 체험공간 조성

- 고대역사 문화상권 활성화, 공감프로그램 개발

□ 현재 추진 상황

○ 고대역사문화 체험 특구 지정(중소벤처기업부) : ′17. 12. 12.

○ 국가지정문화재(사적) 지정(문화재청)         : ′18. 8. 7.

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
재원별	46,510	-	2,235	1,000	2,030	6,300	3,750	31,195
국비	31,546	-	1,000	700	1,211	3,610	2,625	22,400
시비	14,369	-	685	300	774	2,690	1,125	8,795
구비	595	-	550	-	45	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진
임기내	2018년	구암동고분군 누리길 조성공사(탐방로 조성 및 탐방안내소 설치) 구암동고분군 1호분 복원정비공사 팔거산성 시굴조사용역 문화유산탐방해설사 시범운영(지속)	20
	2019년	구암동고분군 5호분 발굴조사용역 역사문화거리 조성공사 운암지 먹거리타운 팜플렛 제작	40
	2020년	구암동고분군 56호분 복원정비공사	60
	2021년	구암동고분군 100호분 발굴조사용역	80
	2022년	팔거산성 발굴조사용역	100
임 기 후		팔거산성 복원정비공사 고분전시관(박물관), 야외전시관 및 체험학습장 조성

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 구암동고분군 내 대부분의 필지가 사유지이므로 연차적으로 문화재보수정비예산을 통해 사유지 매입이 병행 추진되어야 함.

○ 대  책

- 문화재청 문화재보수정비 국고보조사업(국비 : 시비 = 7 : 3)으로 매도의사가 있는 필지부터 우선적 매입 추진 예정

□ 기대효과

○ 구암동고분군 일대 국가사적 및 고대역사문화 체험특구 지정에 따른 역사적 가치 재조명과 관광자원화를 통한 지역경제 활성화에 기여

관리번호	2-3	공약명	전통문화체험과 역사교육을 통한 선조들의 지혜 향유
사업구분	임기 내 완료 (지속추진)	추진부서	관광자원개발과장 고진호/ 관광진흥팀장 권태승/ 주무관 김은경(☎665-4324)

□ 추진목표

○ 향교·서원문화재 활용이 최대의 보존이라는 새로운 가치관으로 정신 문화재의 본래 가치와 진정성을 계승, 현대적으로 재창조

○ 향교·서원문화재를 지역 사회의 대표 문화재 활용자원으로 육성, 자립적·지속적·체계적 활용체제 확립 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 칠곡향교 : “선조들 숨결 ‘仁’의 감동”, 전통문화체험관 운영

- 사 업 비 : 75,000천원(계속)

- 사업내용 : 칠곡향교에서 즐기는 '禮, 초 ‧ 중학생 인성교실, 장계향
인성교실, ‘藝’의 향연 예술마당, 영남 선비문화 싸롱

○ 구암서원 : “서원! 빗장을 열다”

- 사 업 비 : 37,000천원(계속)

- 사업내용 : 선비의 삶 나를 찾는다, 묵향이 머무니 악이 울린다

□ 현재 추진 상황

○ 칠곡향교

- 장계향 인성교실 : 4회 100명 / 영남선비문화싸롱 : 8회 250명

- 칠곡향교에서 즐기는 禮(청소년) : 4회 170명

○ 구암서원

- 선비의 삶, 나를 찾는다 : 5회 240명 / 묵향에 마음을 담다 : 8회 445명

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	663	103	112	112	112	112	112
국비	221	36	37	37	37	37	37
시비	113	18	19	19	19	19	19
구비	329	49	56	56	56	56	56

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진		2016년, 2017년 향교·서원문화재활용사업 시행
임기내	2018년	❍ 선조들 숨결 ‘仁’의 감동(칠곡향교) - 영남선비문화싸롱 : 4월~5월, 9월~10월 (8회, 시민 40명 이상) - 칠곡향교에서 즐기는‘禮’ : 3월~12월 (8회, 초·중학생40명 이상) - 초·중학생 인성교실 : 7. 23. ~ 7. 28. (6일, 중학생 60명 이상) - 장계향 인성교실 : 3월, 9월 (8회, 시민 40명 이상) -‘藝’의 향연 예술마당 : 음악회 10월 중 / 전시회 10월 중 ❍ 서원 빗장을 열다(구암서원) - 선비의 삶, 나를 찾는다 : 3월 ~ 7월 (10회, 초·중학생 20명 이상) - 묵향이 머무니, 악이 울린다 : 5월 ~ 10월 (5회, 시민 20명 이상)	100
	2019년	❍ 선조들 숨결 ‘仁’의 감동(칠곡향교) - 영남선비문화싸롱 : 4월~5월, 10월~12월 (16회, 시민40명) - 칠곡향교에서 즐기는‘禮’ : 3월~11월 (6회, 초·중학생40명) - 향교에서 배우는 인성교실 : 7월중 (6일, 중학생 60명) - 장계향 인성교실 : 3월~4월, 9월~10월 (10회, 학부모 40명) - 우리동네 유교문화유산 알기 탐방 : 3월~5월 (5회, 주민 40명) ❍ 서원 빗장을 열다(구암서원) - 유유상종(儒留相從) : 3월~12월 (10회, 외국인 25인 이상) - 연비다담(鳶飛茶談) : 6월~10월 (5회, 외국인, 가족25인 이상) - 구암야연(龜巖夜宴) : 3월~12월 (10회, 시민 50~150인 이상)	100
	2020년	“ ※ 세부 프로그램은 수행기관 사정상 변경될 수 있음	100
	2021년	“ ※ 세부 프로그램은 수행기관 사정상 변경될 수 있음	100
	2022년	“ ※ 세부 프로그램은 수행기관 사정상 변경될 수 있음	100
임 기 후

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 사업추진을 위한 예산확보 공모를 매년 신청해야하는 번거로움 있음

○ 대  책

- 지방자치단체 공모사업 적극적 응모 및 지원으로 예산 확보

- 문화재 활용사업의 자립적 · 지속적 · 체계적 활용체계 확립 위해 사업의 적극 추진

□ 기대효과

○ 선비정신을 배움으로써 문화유산의 소중함을 깨닫고 올바른 가치관 확립과
정서 순화에 이바지

○ 전통강학공간으로서의 역할 회복으로 ‘문화재’의 이미지 제고

관리번호	2-4	공약명	도시재생뉴딜사업 및 공모사업 실시 -침산1동 도시재생 뉴딜사업-
사업구분	임기 내 완료	추진부서	도시재생과장 김도훈 / 팀장 이백우 / 주무관 박철현(☎665-2622)

□ 추진목표

○ 산업단지의 배후주거지로서 주거기능 강화

○ 주민공동체 회복으로 마을활력 증진

○ 침산공원 등과 연계한 친환경 녹색마을 구현

□ 사업개요

○ 사업면적 : A=106,766㎡

○ 사업기간 : 2018년 ∼ 2021년

○ 총사업비 : 226억원

○ 사업내용

자연과 어울린 “행복마을 조성”

· Eco클러스트 및 Eco주차장 조성

· 유니버셜 연계가로, 어울거리, 그린노을길 조성

어디서나 안전한 “안심마을”

· 도시계획도로 및 안심가로 조성

· 빈집정비 및 집수리 사업

함께하고 나누는 “공동체 마을”

· 복합임대주택 건립

· 마을쉼터 및 복합커뮤니티센터 조성

□ 현재 추진 상황

○ 2017. 12. 14. : 도시재생뉴딜사업 선정

○ 2018.  1. 23. : 도시재생 선도 지역 지정을 위한 공청회

○ 2018.  4. 24. : 도시재생 선도 지역 지정

○ 2018.  7. 13. : 사업실현 가능성 및 타당성 평가(국토부)

○ 2018.  8월 중 : 침산1동 도시재생활성화계획 심의(도시재생특위)

○ 2018.  9월 중 : 예산 교부 및 사업시행

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
계	22,560	-	6,122	6,161	5,705	4,572	-	-
국비	10,000	-	3,195	2,640	2,364	1,801	-	-
시비	5,000	-	1,945	855	1,162	1,038	-	-
구비	5,000	-	982	1,826	1,379	813	-	-
민간 (공공기관,민간,기금)	2,560	-	-	840	800	920	-	-

□ 세부추진계획

구분	세부사업	2018				2019				2020				2021
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
임기내	집수리 사업
					수요 조사	실시 설계		사업 시행
	노후·불량건축물 정비사업
					의견 수렴	계획 수립		사업 시행
	Eco주차장 조성사업
				토지 매입	계획 수립		시행								완공
	어울거리 조성사업
								사업 계획	토지 매수	시행					완공
	그린노을길 조성사업
						주민 협의	시설 계획		시행						완공
	Eco클러스트 조성사업
				주민 협의		운영방식협의			사업 인가	시행
	행복나눔 가로조성사업
					토지 매수	계획 수립	시행		완공
	공동체마을 쉼터조성
					토지 매수	계획 수립		시행					완공
	유니버셜 가로조성
				주민 협의	가로 디자인	사업 계획	시행		완공
	침산안심 가로조성
			의견 수렴	계획 수립	사업 인가	시행											완공
	복합 커뮤니티센터
				운영 계획	토지 매수	시설 계획		시행						완공

구분	세부사업	2018				2019				2020				2021
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Eco클러스트 운영
				주민 협의	교육 협약		조합 육성							운영 관리
	나눔마을 건강교실
					의견 수렴	운영							장비 구축
	나눔공방 운영
					의견 수렴	운영 계획					장비 구축	조합 결성
	도시재생대학 운영
				의견 수렴	운영
	현장지원센터 운영
			조직 구성	운영
	주민공모사업
			의견 수렴		공모 선정	사업 시행
	행복나눔주택
					토지 매수	계획 수립		사업 인가	시행						완공

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

뉴딜사업 선정 후 도시재생특위에 의한 도시재생 활성화계획 승인 시 까지 사업비가 확정·교부되지 않아 사업추진을 위한 토지 보상이 이루어지지 못하여 당초 계획된 사업부지와 사업비가 변경될 수 있어 사업계획에 따른 원활한 추진이 곤란한 점이 있음

○ 대  책

사업부지의 협의 매수가 어려운 점을 예상하여 대체 부지 발굴·선정

□ 기대효과

○ 주거환경정비와 도시기반시설 확충으로 정주여건을 개선하여 살기 좋은 마을 환경 조성

○ 주민커뮤니티활성화 마을일자리 창출로 활력 넘치는 마을조성

○ 성공적인 도시재생 사업의 추진으로 인접 지역으로 도시재생효과 확산

관리번호	2-5-1	공약명	대구근대산업유산 관광자원화
사업구분	임기 내 기반조성	추진부서	관광자원개발과장 고진호 / 관광진흥팀장 권태승 / 주무관 이원익(☎665-4322)

□ 추진목표

○ 일제강점기 대구 최초 공단지역으로 지정되어 대구산업발전의 역사와 함께 해온
제1공단(칠성 ‧ 침산 ‧ 고성동 일대)을 중심으로 특색있는 근대산업유산을 발굴 ․ 활용하여 시민들이 즐길 수 있는 대구의 대표적인 문화관광 공간으로 마련

○ 과거와 현재, 미래가 공존하는 북구 지역 내 산재한 근대산업유산을 활용 및 관광 자원화하여 역사와 문화가 살아 숨 쉬는 근대산업유산 도시로 조성

□ 사업개요

○ 사업구간 : 칠성 ‧ 침산 ‧ 고성동 일대(제1공단 중심)

○ 사업기간 : 2017년 ~ 2022년

○ 소요예산 : 225억원 정도

□ 현재 추진 상황

○ 2017. 8. 18. : 대구 근대산업관광 개발 계획 수립

○ 2017. 9. 4. ~ 12. 20. : 대구 근대산업관광 아카이브 작업 및 콘텐츠 개발
연구 용역 시행

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
계	22,058	-	18	200	375	100	100	21,265
국비	10,932	-	-	-	300	-	-	10,632
시비	5,355	-	-	-	38	-	-	5,317
구비	5,771	-	18	200	37	100	100	5,316

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진
임기내	2018년	◦ 대구 근대산업관광 아카이브 작업 및 콘텐츠 개발 연구용역	5
	2019년	◦ 대구북구 관광종합개발계획 연구용역 - 대구근대산업유산 관광활성화(관광트레일) 기본계획 수립	20
	2020년	◦ 산업관광 콘텐츠개발사업 공모	40
	2021년	◦ 대구근대 산업유산아카이브 구입 등	60
	2022년	◦ 대구근대 산업유산 팸투어	100
임 기 후		◦ 대구근대 산업유산 부지 매입 ◦ 근대산업유산관 조성사업, 근대산업유산 관광트레일 구축사업

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 대구근대산업유산 관광자원화사업은 대규모 예산이 투입될 것으로 예상되어, 어려운 구 재정 여건과 사업의 규모를 감안할 때 區 단위의 사업추진에 어려움 있음

○ 대  책

- 대구 최초의 공업단지로 조성되어 270곳의 근대산업유산이 남아 있는
칠성 ‧ 침산 ‧ 고성동 일대는 최근 북구의 명소로 떠오른 침산동 삼성창조캠퍼스와 더불어 관광메카로서의 성장 잠재력을 충분히 가지고 있어 향후 중구근대골목과 함께 대구를 대표하는 관광지가 될 것이므로, 市단위에서 대구근대산업유산 관광자원화 사업을 추진이 필요

□ 기대효과

○ 대구근대산업의 발상지인 제1공단을 중심으로 기존의 다양한 문화예술공간을 연계하여 새로운 관광영역을 확대하고 지역경제를 활성화시킴

○ 수십 년 전 들어선 공장과 창고 등을 ‘근대산업유산’으로 관광자원화하여, 낡고 칙칙했던 옛 공단의 흔적을 새로운 역사와 문화가 흐르는 공간으로 거듭나게 하여 주민들의 삶의 질을 향상시킴

관리번호	2-5-2	공약명	옥산로 테마거리 조성
사업구분	임기 내 완료	추진부서	관광자원개발과장 고진호 / 도시디자인팀장 김창학 / 주무관 이기진(☎665-2332)

□ 추진목표

○ 도시철도3호선 및 삼성창조캠퍼스 등으로 높은 성장 잠재력을 지닌 옥산로 및 호암로 일대를 명품거리로 조성

○ 근대산업역사, 미래산업비전, 문화예술 공연, 스포츠 등 지역을 대표하는 테마에 맞는 공공디자인을 거리에 입혀 관광자원화 함으로써 지역경제 활성화 및 도시브랜드 가치 향상

□ 사업개요

○ 위    치 : 옥산로 ~ 호암로 (북구청네거리 ~ 삼성창조캠퍼스)

○ 규    모 : B=30m, L=1.3Km

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2021년

○ 사 업 비 : 37억원정도

□ 현재 추진 상황

○ 옥산로 테마거리 조성사업 계획 수립 : 2016. 8. 11.

○ 대구시 창의도시재생지원센터 컨설팅 개최 : 2016. 9. 7.

○ 옥산로 테마거리 조성사업 기본구상 연구용역 시행 : 2017. 2. 10. ~ 7. 14.

○ 옥산로 테마거리 기본 및 실시설계 용역 착수 : 2018. 4. 30.

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
계	3,700	-	150	570	1,680	1,300	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	3,550	-	-	570	1,680	1,300	-	-
구비	150	-	150	-	-	-	-	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진		◦ 옥산로 교통영향분석 용역(2016년) ◦ 옥산로 테마거리 조성 기본구상 용역(2017년)
임기내	2018년	◦ 기본 및 실시설계 용역(진행중)	30
	2019년	◦ 스포츠거리 조성 ◦ 스마트글라스 설치 ◦ 스토리담장 조성 ◦ 로봇, 인공지능기기 설치	50
	2020년	◦ 미디어박스 설치 ◦ 상징 조형물 설치 및 주변경관 개선 ◦ 남침산네거리 모퉁이 인도확장 ◦ 오페라하우스 주변 테마공간 조성	80
	2021년	◦ 고성성당 테마공간 조성 ◦ 인도확장(BAY형 공간 조성) ◦ 아이디어 보도블록 포장 ◦ 전신주 지중화 사업 ◦ 벚꽃길 진입부 상징조형물 설치 ◦ 콘텐츠 활성화	100
	2022년	공사 준공 및 테마거리 활성화
임 기 후

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 테마거리 조성사업은 대규모 예산이 투입될 것으로 예상

- 어려운 구 재정 여건과 사업의 규모를 감안할 때 區 단위의 사업추진에 어려움 있음

○ 대  책

- 근대역사와 문화예술이 살아 숨쉬고 볼거리 ․ 먹거리 ․ 즐길거리 등 성장 잠재력을 충분히 가지고 있는 옥산로 ~ 호암로 거리는 향후 중앙대로와 함께 대구를 대표하는 메인거리가 될 것이므로, 대구시장 공약과 연계사업으로 조성 추진

□ 기대효과

○ 역사와 문화적 가치가 높은 창조문화 거리 조성으로 지역경제 활성화,
도시브랜드 가치 향상 및 주민들의 삶의 질 향상

관리번호	2-6	공약명	태전동 운전면허시험장 이전
사업구분	임기 내 착수	추진부서	기획조정실장 장원수 / 정책평가팀장 신대호 / 주무관 강방록(☎665-2104)

□ 추진목표

○ 운전면허 시험장 이전을 통해 노후된 시설 개선

○ 도심 주거 지역 내 도로 주행 시험으로 인해 발생하는 교통안전문제 해결

□ 사업개요

○ 사업내용 : 대구운전면허시험장 이전

○ 위    치 : 북구 태암남로 38

○ 규    모 : 34,292㎡ (공공청사)

□ 연도별 투자계획 : 비예산

□ 세부추진계획(市 연계)

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진
임기내	2018년 ~ 2019년	운전면허 시험장 이전 건의 협의 채널 구축 · 운영	40
	2020년 ~ 2021년	운전면허 시험장 이전 방안 연구 용역	70
	2022년	운전면허 시험장 이전 합의	100
임 기 후		운전면허 시험장 이전 시행

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 면허 시험장이 기획재정부 소유 재산이며, 관리부서인 경찰청에서 도로교통공단에 위탁운영중인 시설로 이전에 대한 권한이 경찰청과 기획재정부에 있음

- 해당 기관에서는 현재 구체적인 이전계획이 수립되지 않은 상태이며, 면허 시험장 이전을 위한 대체부지 확정 및 이전비용 확보에 상당한 기간이 소요됨

○ 대  책

- 대구시 공약과 연계 및 지역 정치권과 협력하여 면허시험장 이전 T/F 운영 등을 통해 중앙 부처와 조기 이전 합의 도출 노력

□ 기대효과

○ 운전면허 시험장 이전 및 후적지 개발을 통한 지역 내 정주여건 개선 및
칠곡 지역 내 균형 발전 도모

Ⅲ	사고 없이 안전한 도시

관리번호	3-1	공약명	자전거도로 정비를 통한 친환경적 교통체계 구축
사업구분	임기 내 완료	추진부서	건설과장 홍승용/ 팀장 김영섭 / 주무관 박준현(☎665-2917)

□ 추진목표

○ 강북지역과 금호강 자전거 도로와의 단절 구간에 자전거 전용도로를 설치하여
시민들에게 안전한 도로·교통 환경 제공

□ 사업개요

○ 위  치 : 무태네거리 ~ 산격대교(서변동 1801번지 인근)

○ 기  간 : 2018. 4월 ~ 2018. 10월

○ 개  요 : 자전거도로 L=401m, B=1.5~3m

(아스팔트 317m, 데크 84m)

○ 사업비 : 400백만원

□ 현재 추진 상황

○ 2018. 4월 : 공사착공

○ 2018. 7월 : 대구환경공단 부지 일부 무상사용 협의완료

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
계	400	-	400	-	-	-	-	-
국비	200	-	200	-	-	-	-	-
시비	200	-	200	-	-	-	-	-
구비	-	-	-	-	-	-	-	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진		·실시설계 완료
임기내	2018년	·2018. 4월 : 공사착공 ·2018. 7월 : 대구환경공단부지 일부 무상사용 협의 완료 ·2018. 10월 : 공사준공	100
	2019년	-
	2020년	-
	2021년	-
	2022년	-
임 기 후		-

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 특이사항없음

□ 기대효과

○ 자전거이용 활성화 및 안전사고 예방 효과

○ 주민 삶의 질 개선 효과

관리번호	3-2-1	공약명	복현동 주거환경개선사업
사업구분	임기 내 완료	추진부서	건축주택과장 조재환 / 팀장 이조형 / 주무관 김기홍(☎665-2955)

□ 추진목표

○ 공동주택(영구임대주택) 건설 및 정비기반시설 조성

□ 사업개요

○ 사업위치 : 경대로서 19길 20-1일대 (복현동 617-8번지)

○ 사업면적 : 12,455㎡

○ 사업규모 : 아파트 4개동 292세대 및 부대복리시설, 주민공동시설

○ 사업시행자 : 대구도시공사

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
재원별	13,933	160	-	320	13,453	-	-	-
국비	13,613	-	-	160	13,453	-	-	-
시비	192	112	-	80	-	-	-	-
구비	128	48	-	80	-	-	-	-
민간		-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진		정비계획 수립 용역 발주	5
임기내	2018년	정비구역 지정	20
	2019년	사업시행계획인가	40
	2020년	착공, 지구주민 및 일반분양	60
	2021년	골조공사	80
	2022년	준공인가 고시	100
임 기 후

□ 기대효과

○ 무허가 노후 ․ 불량 건축물 밀집 지역의 주거환경개선으로 도시미관 향상 및 정주여건 개선

관리번호	3-2-2	공약명	고성동 주택재건축 사업
사업구분	임기 내 완료	추진부서	건축주택과장 조재환/ 팀장 이조형 / 주무관 배미진(☎665-2954)

□ 추진목표

○ 노후․불량 공동주택 주거환경 개선을 통한 도시미관 향상 및 정주여건 개선

□ 사업개요

○ 사업위치 : 고성동3가 5-139일원(고성광명아파트)

○ 사업규모 : 아파트 8개동(682세대), 지하2층/지상29층, 연면적 102,726㎡

○ 추진기간 : 2006. 6월 ~ 2020. 4월

□ 현재 추진 상황

○ 지하층 및 1층 골조공사 진행 중(2018. 7월 공정률 18.8%)

□ 연도별 투자계획 : 민간사업 추진

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진		지하층 및 1층 골조공사 추진	18.8%
임기내	2018년	공사 추진
	2019년
	2020년	준공(2020년 4월)	100
	2021년
	2022년

□ 기대효과

○ 고성동 일원 주거환경 개선 및 도시미관 제고

관리번호	3-3	공약명	태전 화물자동차 공영차고지 조성사업
사업구분	임기 내 완료	추진부서	교통과장 박쌍도 / 팀장 이숙희(☎665-3041)

□ 추진목표

○ 영세 화물운송업자의 차고지 부족난 해소

○ 지역 화물 물동량의 원활한 수송으로 물류경쟁력의 강화

○ 도로 및 주거지역내 불법주차 완화로 쾌적한 주거환경 조성

□ 사업개요

○ 위치/면적 : 태전동 43번지 일원 / 34,093㎡

○ 사업기간 : 2019년 ∼ 2022년(4년)

○ 주요시설 : 주차면 409면, 관리동, 정비동 등

○ 총사업비 : 300억원(국비 210, 시비 60, 구비 30)

□ 현재 추진 상황

○ 화물자동차 공영차고지 조성 건의(시→구) : 2015. 5. 4.

○ 시장, 구청장·군수 정책협의회에서 건의 : 2016. 2. 25.

○ 시장, 구청장·군수 정책협의회 결과 수용 : 2016. 3. 15.

※ 태전동 부지 적정지로 판단 시구 재정 감안 2018년 이후 추진

○ 타당성조사 및 기본계획 용역 완료 : 2017. 7. 18.

○ 지방재정투자 중앙심사 통과 : 2017. 11. 13.

○ 2018∼2022 중기지방제정계획 반영 : 2017. 12. 13.

○ 2019년 지역발전특별회계 세출예산 신청 : 2018. 3. 5.

○ 실시설계용역 사업비확보 : 2018. 8. 22.

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
계	30,000	60	-	540	9,800	9,800	9,800	-
국비	21,000	-	-	400	6,860	6,860	6,880	-
시비	6,000	-	-	100	1,960	1,960	1,980	-
구비	3,000	60	-	40	980	980	940	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진		· 타당성조사 및 기본계획 용역 완료 · 지방재정투자 중앙심사 통과 · 2018∼2022 중기지방재정계획 반영
임기내	2018년	· 국비확보	10
	2019년	· GB관리계획 수립 · 도시관리계획 변경 · 기본 및 실시설계 용역	30
	2020년	· 토지감정 및 보상	60
	2021년	· 공사착공	90
	2022년	· 공사준공	100
임 기 후

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 사업비의 연차적 확보 필요

○ 대  책

- 대구시 예산부서, 택시물류과 담당자와 기획재정부를 방문하여 사업의 필요성을 설명하는 등 국비 확보에 노력

□ 기대효과

○ 주택가 불법 주·박차 해결로 주민불편 해소 및 도시환경 개선

○ 화물자동차 종사자 편의시설 제공으로 안전운행 도모

○ 물류비용 절감 등 지역 화물운송 산업 발전에 기여

관리번호	3-4-1	공약명	사회재난 선제적 대응체계 구축
사업구분	임기 내 완료 (지속추진)	추진부서	도시안전과장 박영태 / 팀장 배영환 / 주무관 이호철(☎665-2893)

□ 추진목표

○ 구 특성에 맞는 현장대응체계 표준 프레임 마련

○ 재난유형별 현장조치 행동매뉴얼 보완

○ 매뉴얼·가이드라인 교육 및 현장적용 시뮬레이션

□ 사업개요

○ 근     거

-「재난 및 안전관리 기본법」 제34조의5(재난분야 위기관리 매뉴얼 작성·운용)

- 재난현장 대응 표준화 시범사업을 위한 특별교부세 지원

※ 2017년 재난현장 대응 표준화 시범사업 대상자 선정(행정안전부)

○ 기    간 : 2017. 10월 ~ 2018. 11월

○ 사 업 비 : 200,000천원(특별교부세 100%)

○ 계약방법 : 조달의뢰(학술연구용역)

□ 현재 추진 상황

○ 2017.  5.  4. : 재난현장 대응 표준화 시범사업 대상자 선정

○ 2017. 10.  4. : 재난현장 대응 표준화 시범사업 보조금 교부

○ 2018.  2.  4. : 일상감사 요청

○ 2018.  2. 27. : 계약심사 요청

○ 2018.  3. 15. : 용역입찰 의뢰

○ 2018.  5. 21. : 용역계약 → ㈜ 부린

○ 2018.  5. 31. : 착수보고회 실시

□ 연도별 투자계획                                    (단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
계	200	-	200	-	-	-	-	-
국비	200	-	200	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-
구비	-	-	-	-	-	-	-	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진
임기내	2018년	재난현장 표준화 매뉴얼 및 가이드라인 제작	100%
	2019년	지속추진
	2020년	지속추진
	2021년	지속추진
	2022년	지속추진
임 기 후

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 해당사항 없음

○ 대  책

- 해당사항 없음

□ 기대효과

○ 지역특성에 맞는 실질적이고 구체적인 매뉴얼 제작으로 복합재난
발생 시 신속하고 효율적으로 대응

○ 유관기관과 공조 체계를 구축함으로써 골든타임 내 신속한 대처로
주민의 생명과 재산 보호

관리번호	3-4-2	공약명	자연재난 선제적 대응체계 구축
사업구분	임기 내 완료 (지속추진)	추진부서	도시안전과장 박영태 / 팀장 방효석 / 주무관 이영범(☎665-4354)

□ 추진목표

○ 각종 자연 재난에 신속히 대응할 수 있도록 관련 매뉴얼을 현행화하고 정비

○ 매년 폭염피해가 증가하는 추세로 이에 대비한 홍보 및 대응활동

○ 최근 지진에 대한 주민들의 관심을 반영하여 지진 대응체계 구축

□ 사업개요

○ 자연재난 표준행동 매뉴얼 정비 및 배부 완료(80부) : 2018. 7. 19.

○ 폭염 대응체계 구축

- 폭염대책기간 : 2018. 5. 20. ~ 9. 30.

- 무더위쉼터(127개소)및 파라솔(32개소)운영, 재난도우미(283명)지정

- 주요간선도로(50km)살수 : 50백만원(시비47, 구비3)

- 그늘막 파라솔 설치(4개소) : 10백만원(시비10)

○ 지진 대응체계 구축

- 공공시설물 내진성능평가(33개소) : 800백만원(시비400, 구비400)

- 세대별 지진대응패키지 인쇄 및 배부 : 504백만원(시비504)

□ 현재 추진 상황

○ 폭염 대응체계 구축

- 주요간선도로 살수 : 6월 실시시작 ~ 폭염대책기간 만료(9. 30.)까지

○ 지진 대응체계 구축

- 공공시설물 내진성능평가 : 부서별 관련 시설물 내진성능평가 설계중

- 세대별 지진대응패키지 : 사업계획서 추진 중

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
계	1,319	-	1,307	3	3	3	3	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	904	-	904	-	-	-	-	-
구비	415	-	403	3	3	3	3	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진
임기내	2018년	❍ 자연재난 표준행동 매뉴얼 정비 및 배부(매년) ❍ 폭염 대응 체계 구축(매년) ❍ 지진 대응 체계 구축(내진성능평가, 지진대응패키지)	100%
	2019년	❍ 자연재난 표준행동 매뉴얼 정비 및 배부(매년) ❍ 폭염 대응 체계 구축(매년)	100%
	2020년	❍ 자연재난 표준행동 매뉴얼 정비 및 배부(매년) ❍ 폭염 대응 체계 구축(매년)	100%
	2021년	❍ 자연재난 표준행동 매뉴얼 정비 및 배부(매년) ❍ 폭염 대응 체계 구축(매년)	100%
	2022년	❍ 자연재난 표준행동 매뉴얼 정비 및 배부(매년) ❍ 폭염 대응 체계 구축(매년)	100%
임 기 후

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 해당없음

○ 대  책

- 해당없음

□ 기대효과

○ 자연재난에 대한 선제적 대응으로 재난 발생시 주민피해를 최소화

관리번호	3-5	공약명	교통약자 보행환경 개선 사업
사업구분	임기 내 완료 (지속추진)	추진부서	교통과장 박쌍도 / 팀장 정광수 / 주무관 김성훈(☎665-3163)

□ 추진목표

○ 대각선 횡단보도 및 고원식 횡단보도 설치

○ 생활권 이면도로 교통환경 개선

○ 횡단보도 집중조명(투광기) 설치

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018년 ∼ 2022년

○ 총사업비 : 720백만원

○ 사업내용

- 대각선 횡단보도 설치 : 7개소

- 고원식 횡단보도 설치 : 20개소

- 생활권 이면도로 정비 : 5개소

- 횡단보도 집중조명 설치 : 50개소

□ 현재 추진 상황

○ 횡단보도 집중조명 설치 29개소 : 시비 200백만원

○ 고원식 횡단보도 설치 9개소 : 시비 70백만원

○ 생활권 이면도로 정비 1개소 : 시비 50백만원

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
계	720	-	320	100	100	100	100	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	720	-	320	100	100	100	100	-
구비	-	-	-	-	-	-	-	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진		-	-
임기내	2018년	횡단보도 집중조명 설치 29개소, 고원식 횡단보도 설치 9개소, 생활권 이면도로 정비 1개소	100%
	2019년	횡단보도 집중조명 설치 5개소, 고원식 횡단보도 설치 5개소, 생활권 이면도로 정비 1개소	100%
	2020년	횡단보도 집중조명 설치 5개소, 고원식 횡단보도 설치 5개소, 생활권 이면도로 정비 1개소	100%
	2021년	횡단보도 집중조명 설치 5개소, 고원식 횡단보도 설치 5개소, 생활권 이면도로 정비 1개소	100%
	2022년	횡단보도 집중조명 설치 5개소, 고원식 횡단보도 설치 5개소, 생활권 이면도로 정비 1개소	100%
임 기 후		-	-

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 해당없음

○ 대  책

- 해당없음

□ 기대효과

○ 교통안전시설 확충 및 개선을 통한 교통약자 교통사고 위험 감소 및
보행불편 해소

Ⅳ	경제 도시 북구

관리번호	4-1	공약명	안경산업 메카 조성 지원
사업구분	임기 내 완료	추진부서	일자리경제과장 최병욱 / 팀장 송미숙 / 주무관 유정은(☎665-2666)

□ 추진목표

○ 안경 산업 발전을 위한 인프라 구축

○ 최신기술, 제품 및 브랜드 소개를 통한 안경 산업 경쟁력 제고

○ 안경테 코팅업체의 집적화를 통한 노후 시설 개선 및 생산성 향상

□ 사업개요

○ 대구국제안경전 개최

- 사업기간/장소 : 2018년 ∼ 계속사업 / EXCO

- 총사업비 : 3,700백만원(국비 450, 시비 2,750, 민자 500)

- 사업내용 : 안경테, 선글라스, 3D안경, 안광학기기 등 전시

- 주최/주관: 대구광역시/(재)한국안광학산업진흥원

○ 해외시장개척단운영사업

- 사업기간 : 2018년 ∼ 계속사업

- 총사업비 : 2,100백만원(시비 1,750, 민자 350)

- 주요사업 내용

· 해외시장 조사 및 판로 개척

· 현지 수출상담회 개최 및 바이어들과 네트워킹 구축

- 주최/주관: 대구광역시/(재)한국안광학산업진흥원

○ 안경테 표면처리센터 건립

- 위    치 : 북구 침산동 999번지(천일화물부지)

- 사업기간 : 2017년 ~ 2020년

- 총사업비 : 180억원(국비 60, 시비 120)

- 사업규모 : 대지 2,640㎡, 연면적 7,280㎡(지하 1층, 지상3층)

- 주요시설 : 안경테 코팅 제조공장, 청정크린룸, 폐수 처리시설 등

- 주    최 : 대구광역시

○ 아이빌 건립 및 운영

- 위    치 : 북구 3공단로 240(노원동3가)

- 사업기간 : 2014년 ~ 계속사업

- 사업규모 : 대지 3,083.90㎡, 연면적 9,957.61㎡(지하 1층, 지상7층)

- 주요시설 : 임대공장(66개), 임대식당(1개), 첨단장비센터(1개)

○ 안경거리 조성 및 유지

- 사업기간 : 2009년 ~ 계속사업

- 위 치 : 노원네거리 ~ 침산교(1.1㎞)

- 준 공 : 2009. 10. 28.

- 시설물내역

(단위 : 백만원)

구 분	계	안경상징 대형조형물	가로등	안경산업 특구표지판	안경모형 거리전시대	안경특구 옥상광고탑	버 스 승강장	인 도 특화포장	구간포장 조경수 등
개소 / 개	-	1 / 1	96	2 / 2	3 / 6	1 / 1	6 / 6	99	-
사업비	2,000	256	789	20	80	10	200	100	545

□ 현재 추진 상황

○ 안경테 표면처리센터 건립

- 2017.  4월 : 안경테 표면처리센터 건립 기본계획

- 2017. 12월 : 부지 매매중도금 1차 지출(10억)

- 2018.  1월 : 부지 매매중도금 2차 지출(4억9천)

- 2018.  4월 : 안경테 표면처리센터 건립 설계용역 착수

- 2018.  7월 : 안경테 표면처리센터 건립을 위한 도시계획시설 변경결정(안)

○ 아이빌 운영

- 임대현황

· 2017. 12월 : 62개 호실(48개 업체)임대 – 임대율 92.5%

· 2018.  6월 : 63개 호실(53개 업체)임대 – 임대율 94%

- 첨단장비활용현황

· 2017. 12월 : 81개 안경제조업체에서 620건 사용

· 2018.  6월 : 63개 안경제조업체에서 433건 사용

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
계	43,334	15,803	7,827	9,206	5,806	2,346	2,346	-
국비	11,855	5,605	2,490	3,490	90	90	90	-
시비	22,709	8,209	3,980	4,360	4,360	900	900	-
구비	5,320	1,414	782	781	781	781	781	-
민간	3,450	575	575	575	575	575	575	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진		대구국제안경전개최 · 해외시장개척단 지원 및 아이빌 운영	10
임기내	2018년	대구국제안경전개최 · 해외시장개척단 지원 및 아이빌 운영 안경테표면처리센터 건립 부지매입 및 설계용역 시행	40
	2019년	대구국제안경전개최 · 해외시장개척단 지원 및 아이빌 운영 안경테표면처리센터 공사 착공	80
	2020년	대구국제안경전개최 · 해외시장개척단 지원 및 아이빌 운영 안경테표면처리센터 공사 준공	100
	2021년	대구국제안경전개최 · 해외시장개척단 지원 및 아이빌운영	100
	2022년	대구국제안경전개최 · 해외시장개척단 지원 및 아이빌운영	100
임 기 후		안경 산업 육성을 위한 안경 지원 사업 지속적 추진	-

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 안경 산업 지원사업 및 안경테표면처리센터 건립사업이 대구광역시 주관 사업인만큼 국비·시비확보가 우선적 과제임

- 안경 산업 지역의 기반시설 부족과 안경 산업 홍보를 위한 시설물 설치, 산업지역 내 안경축제 등 행사 추진에 다소 어려움이 있음

○ 대  책

- 안경 산업 발전을 위한 지속적인 협력관계 구축을 통한 사업비확보

□ 기대효과

○ 대구국제안경전 개최를 통해 안경 산업 활성화를 위한 협력 토대를 구축하고
안경업체의 마케팅을 지원함으로써 산업경쟁력 향상

○ 지역 안경 산업의 시장개척으로 수출 판로를 확대하고 맞춤형 바이어 매칭으로
지역 안경 산업 수출 증대 및 안경 산업 인프라 구축

관리번호	4-2	공약명	금호워터폴리스 조성틀 구축 -금호워터폴리스 진입도로건설-
사업구분	임기 내 기반조성	추진부서	건설과장 홍승용/ 팀장 구성호 / 주무관 서정현(☎665-2882)

□ 추진목표

○ 금호워터폴리스 산업단지의 개발로 산업단지 내 물류의 활발한 이동과 주변 지역개발 촉진을 위해 도로개설 필요

○ 진입도로의 개설로 인근 산업단지와 엑스코·유통단지 등과의 물류 이동 원활

○ 금호강 수변공원과 단지 간 전면적 연결로 친환경 복합단지로 개발 가능

□ 사업개요

○ 위  치 : 신천동로 종점 ∼ 동구 금호강변도로

○ 기  간 : 2015년 ∼ 2023년

○ 개  요 : 도로건설 폭 25m(4차로), 연장 2.9km

(지하차도 1개소, 교량 1개소, 램프교 1개소)

○ 사업비 : 1,076억원(국비 541, 시비 535)

□ 현재 추진 상황

○ 2017. 8월 ∼ 2018.  6월 : 기획재정부(KDI) 예비타당성조사 진행

○ 2018.  6월 : 기획재정부(KDI) 예비타당성조사 통과

□ 연도별 투자계획

(단위 : 억원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
재원별	1,076	-	-	15	1,061	-	-	-
국비	541	-	-	15	526	-	-	-
시비	535	-	-	-	535	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진		· 상반기 산업단지 진입로 예비 타당성 대상지 선정 신청(市→국토부) · 하반기 예비 타당성 대상사업 최종선정() · 기획재정부(KDI) 예비타당성조사 진행
임기내	2018년	· 2018. 6월 : 예비타당성조사 통과	10
	2019년	· 실시설계용역 실시	30
	2020년	· 공사 착공	60
	2021년 ~ 2022년	· 공사 시행	100
임 기 후		· 공사 준공

□ 문제점 및 대책

○ 대  책

- 산업단지(금호워터폴리스) 개발계획과 연계추진

- 예비 타당성 심사 통과에 따라 원활한 사업 추진을 위해 관련부서 긴밀한 협조

□ 기대효과

○ 금호워터폴리스 진입도로 개설로 산업단지 개발사업의 시너지 효과 극대화

○ 인근 산업단지와 연계한 산업벨트 구축으로 지역경제 활성화 기여

관리번호	4-3	공약명	도청 이전터 활용 -경제 · 행정 융복합 타운 건립 기반 구축-
사업구분	임기 내 기반조성	추진부서	기획조정실장 장원수 / 기획팀장 박상경 / 주무관 김영희(☎665-2115)

□ 추진목표

○ 경북도청 후적지 국가 매입 및 대구시 무상양여 추진

○ 대구시와 연계하여 경제 ․ 행정 융복합 타운 건립 기반 구축

□ 사업개요

○ 위    치 : 북구 연암로 40 일원(142,596㎡)

○ 사업예산 : 부지매입비 2,252억원 정도

○ 사업내용 : 도청 후적지 개발(경제 ․ 행정 융· 복합 타운 건립)

□ 현재 추진 상황

○ 2017. 12월 : 부지매입비 211억 확보

○ 2018. 7. 27. : 부지매입(125,684㎡) 계약 체결

(대외 통상교류관, 교육청 터 제외)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
계	228,500	-	21,100	100,300	104,100	3,000	-	-
국비	225,200	-	21,100	100,000	104,100	-	-	-
시비	3,300	-	-	300	-	3,000	-	-
구비	-	-	-	-	-	-	-	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진
임기내	2018년	부지매입 계약 체결 도청 이전터 개발 기본 계획 수립	30
	2019년	부지매입비 확보 경북도청 후적지 개발 용역 착수	50
	2020년	부지매입비 확보 경북도청 후적지 개발 용역 완료	70
	2021년	부지매입 완료 및 무상양여 경북도청 후적지 개발 설계 착수	80
	2022년	경북도청 후적지 개발 설계 완료	100
임 기 후		· 도청 이전터 개발 사업 착수

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 도청 이전터 개발을 위해 2,252억원 정도의 국비 확보가 필수적임

- 문화체육부와 대구시와의 이전 터 활용방안에 대한 합의가 필요함

○ 대  책

- 대구시 및 중앙정부와 도청 이전터 개발에 대한 지속적인 협조 필요

□ 기대효과

○ 산격동 일원의 도심 공동화 방지 및 지역경제 활성화

○ 도청 이전터 개발을 통한 대구의 미래성장 동력의 중심지로 성장

관리번호	4-4-1	공약명	유통단지 활성화를 위한 엑스코 확장
사업구분	임기 내 완료	추진부서	일자리경제과장 최병욱 / 팀장 김주영 / 주무관 주지만(☎665-2648)

□ 추진목표

○ 종합유통단지 및 MICE 산업의 활성화 방안 발굴을 통한 경쟁력 제고

○ 금호워터폴리스 복합산업단지 개발과 연계하여 시너지 효과 극대화

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 엑스코 제2전시장 확장공사

○ 기    간 : 2016. 12월 ~ 2021. 6월

○ 위    치 : 북구 산격2동 1706번지 일원 (엑스코 옆 기업관 부지)

○ 사업내용 : 부지 37,000㎡, 건축 20,000㎡(전시면적 15,000㎡)정도

○ 사업예산 : 1,895억

- 시    비 : 960억원 (일반 500, 지방채 460)

- 도시공사 : 935억원 (사업준공 후 5년간 분할 상환)

□ 현재 추진 상황

○ 엑스코 확장 전시시설 부지 선정 : 2016. 12월

○ 제2전시장 건립 사전협의 완료 (산업통상자원부) : 2017. 4월

○ 행정안전부 타당성조사 완료(지방행정연구원) : 2017. 5월 ~ 2018. 1월

○ 사업 추진계획 수립 : 2017. 7월

○ 공유재산관리계획 의회승인 : 2017. 10월

○ 계획 설계추진(엑스코) : 2017. 11월 ~ 2018. 3월

○ 지구단위계획변경 완료 : 2017. 12월

○ 타당성조사 용역 및 행정안전부 중앙투자심사 신청 : 2017. 5월 ~ 2018. 1월

○ 실시계획 공람공고 및 주민의견 청취  : 2018. 2. 12. ~ 3. 6.

(대구광역시 공고 제2018-142호)

○ 엑스코 제2전시장 건립 주민설명회 개최

- 일시 : 2. 28.(수) 14:00 / 장소 : 엑스코3층 320호 회의실

※ 2018. 2. 27. IGU(국제가스연맹)에 전시장 계획도면 제출

○ 엑스코 제2전시장 건립 대행사업 투자타당성 검토(안) : 2018. 3. 26.

○ 엑스코 제2전시장 건립 계획설계 용역 완료

- 용역기간 : 2017. 11. 27. ~ 2018. 3. 26.

- 용 역 비 : 금253,000천원 / 발주청 : (주)엑스코

- (주)서한종합건축사사무소

○ 도시계획시설(문화시설)사업 실시계획 작성고시 : 2018. 3. 30.

(대고 제2018-64호)

○ 지방재정투자사업 중앙심사 완료(행정안전부) : 2018. 4. 4.

○ 보상계획 열람공고(동아일보) 및 통지 : 2018. 4. 18. ~ 5. 10.

○ 대구도시공사 대행사업 협약서 법률검토 및 통보 : 2018. 4. 17.

○ 보상협의회 구성(15인, 5.30.) 및 개최(대구도시공사)

- 일시 : 6. 4.(월) 14:00, 장소 : 엑스코 320호

- 토지소유자등 관계인 10인, 감정평가사 2인, 대구시 2인, 도시공사 1인

○ 엑스코 제2전시장 건립 단지조성 설계용역 착수

- 용역기간 : 2018. 5. 2. ~ 2019. 1. 26.

- 용 역 비 : 금115,651천원

- (주)한백엔지니어링 대표 김의식 / 발주청 : 대구도시공사

○ 엑스코 제2전시장 건립공사 설계용역 착수보고회 개최 : 2018. 6. 15.

- 용역기간 : 2018. 5. 28. ~ 2019. 2. 21.(270일)

- 용 역 비 : 금1,475,100천원

- (주)삼우종합건축사사무소 대표 박도권 / 발주청 : 건설본부

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분			연차별 소요예산(초기계획)
			기투자	2018년	2019년	2020년	2021년 이후
계		189,500	-	149,900	11,500	28,100	-
시비	일반	50,000	-	14,900	10,000	25,100	93,500
	지방채	46,000	-	46,000	-	-	-
민간 (대구도시공사)		93,500	-	89,000	1,500	3,000	△93,500

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진		- 엑스코 전시시설 확충 부지확정 - 엑스코 제2전시장 지구단위계획 변경 및 타당성 조사 추진	-
임기내	2018년	- 엑스코 제2전시장 확충을 위한 실시설계 및 교통영향평가등 각종 심의 추진 - 문화재 지표조사 추진 - 엑스코 제2전시장 확충을 위한 감정평가 및 협의보상	20
	2019년	- 엑스코 제2전시장 확충을 위한 실시설계 및 수용취득 - 엑스코 제2전시장확충을 위한 지장물 철거 및 단지조성 - 엑스코 제2전시장 건립 및 건축공사 발주 및 착공	50
	2020년	- 엑스코 제2전시장 건축공사 실시	80
	2021년	- 엑스코 제2전시장 내부시설 설치 및 시험운영	100

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 촉박한 사업추진 일정으로 보상과정 지체 시 사업에 차질 예상

○ 대  책

- 지주들과의 지속적인 상담 등 소통을 통해 협조 요청

□ 기대효과

○ EXCO 대구의 만성적인 전시면적 부족문제 해결을 통해 전시행사의 대형화와 국제행사 유치로 MICE산업 활성화

○ 국내외 산업전시 등을 통해 지역기업의 교역확대 및 산업구조의 고도화

○ 2021년 개최 예정인 세계가스총회의 성공적인 개최

관리번호	4-4-2	공약명	도시철도 엑스코선 추진
사업구분	임기 내 착수	추진부서	건설과장 홍승용/ 팀장 구성호 / 주무관 서정현(☎665-2882)

□ 추진목표

○ 종합유통단지, 금호워터폴리스 등 주요 물류․산업단지 접근성 개선

○ 엑스코 제2전시장 건립과 연계한 대규모 국제행사 유치로 지역 MICE 연관 산업(숙박, 외식, 쇼핑, 관광 등)의 성장과 지역경제 발전에 기여

※ 생산 및 부가가치 유발효과 1조 6,050억원, 고용 및 취업유발효과 2만 3천여명

□ 사업개요

○ 사업구간 : 수성구민운동장역~동대구역~경북대~엑스코~이시아폴리스

○ 기     간 : 2018년 ~ 2027년

○ 개    요 : L=12.4km, 정거장 13개소

○ 사 업 비 : 7,169억원 예상 (국비 4,301, 시비 2,868)

□ 현재 추진 상황

○ 도시철도망 구축계획 수립

- 2016.  6월 : 도시철도망 구축계획(안) 승인 신청

- 2017.  5월 : 전문기관 검토

- 2017. 10월 : 관련부처 협의

- 2018.  3월 : 국가교통(도시교통정책)실무 위원회 심의

- 2018.  6월 : 국가교통위원회 심의

○ 2017.  6월 ~ 12월 : 경제성향상 방안 연구용역 시행

○ 2018.  6월 : 예비타당성조사 대상사업 신청(대구시→국토부)

□ 연도별 투자계획(예정)

○ 예비타당성조사 및 용역설계 후 사업소요 예산 확정

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진		· 2017. 6월 ~ 12월 : 경제성향상 방안 연구용역 시행	3
임기내	2018년	· 2018. 6월 : 예비타당성조사 대상사업 제외 · 2018. 7월 : 도시철도망 구축계획 확정 · 2018. 8월 : 예비타당성조사 대상사업 재신청(대구시→국토부)	5
	2019년	-	-
	2020년	-	-
	2021년	-	-
	2022년	-	-
임 기 후		-	-

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 예타 통과 제외 시 사업추진 불가

○ 대  책

- 예타 통과를 위한 중앙정부, 대구시, 국회의원 등 긴밀한 협조

□ 기대효과

○ 대규모 개발사업으로 인한 교통 혼잡과, 대구 유일의 전시컨벤션 시설인 엑스코에 대한 대량수송 시스템이 해결

○ 지역의 MICE산업 성장에 탄력을 받을 뿐만 아니라, 도시철도의 사각지대를 해소하여 지역 균형발전 가능

○ 산업의 성장으로 고용 및 취업 유발에도 효과적

관리번호	4-5	공약명	중소 벤처기업 육성 지원
사업구분	임기 내 완료 (지속추진)	추진부서	일자리경제과장 최병욱 / 팀장 송미숙 / 주무관 서정구(☎665-2665)

□ 추진목표

○ 우수한 창업아이템과 고급기술을 보유한 신규벤처기업 발굴

○ 경영‧기술교육을 통한 중소기업기술 역량 강화

○ 관세, 경영컨설팅, 기술거래 등 전문가 상담을 통한 기업애로사항 해결

□ 사업개요

○ 북구창업보육센터 운영

- 규  모 : 7개 호실(214㎡)

- 주요내용

‧ 시설공간 무료 제공

‧ 창업가이드라인 제시 및 정부공모사업 참여 지원

‧ 기업교육 및 기업경영지원단 전문가를 통한 컨설팅제공

- 사업비 : 1,000천원

○ 중소기업 경영․기술 교육실시

- 목    적 : 최신 경영정보 및 기술역량 강화를 통한 기업경쟁력 향상

- 주요내용

‧ 경영교육실시(기업지원정책설명회, 고용‧노동교육 등)

‧ 기술교육실시(Auto CAD 교육, MCT 교육 등)

- 사업비 : 4,800천원

○ 기업경영 지원단 운영

- 인   원 : 6명(관세사2, 경영지도사2, 기술거래사2)

- 상담분야

상담분야	세 부 내 용
관세·무역	FTA활용, 원산지규정, 관세환급 등 무역관련 전반적인 사항
경영컨설팅	연구개발 사업계획서 작성상담, 기업부설연구소, ISO 등
기술거래	우수기술 이전·촉진 및 연구개발관련 자금 상담 등

- 사업비 : 7,200천원

□ 현재 추진 상황

○ 창업보육센터 7개 업체 보육 중

- 주요성과

‧ 메디클란트(김명삼 204호) : 2018 WPO(World Package Organization)월드스타
패키징 은상수상

○ 경영․기술교육실시

교 육 명	교육일자	내 용	인원
중소기업 지원정책설명회	2018. 1. 17.	중소기업 지원정책 종합설명회	95
오토캐드(Auto CAD)	2018. 4. 30. ~ 5. 4.	도면작성 기초 및 실습	15
MCT기술교육	2018. 7. 2. ~ 7. 11.	프로그램 교육 및 실습	19
고용노동관련 종합 지원정책 설명회	2018. 7. 4.	개정된 노동관계법 및 현장노무관리 설명회	40

○ 기업경영지원단 운영실적(2018. 7월 현재)

구 분	계	경영컨설팅	관세․무역	기술거래
상담건수	47	5	30	12

○ 2018. 9월 : 한국폴리텍대학과 관학협약 추진

- 산업맞춤형 전문기술교육 실시(오토캐드, MCT, TIA 등)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

구 분		연차별 소요예산(연중)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
재원별	계	11,800	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	-
구비	76,800	11,800	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	-

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 창업보육기업에 대한 지원이 사업공간제공, 정보제공에 한정됨

- 기술교육에 대한 다양한 프로그램 부족

- 기업경영 지원단 운영변경에 따른 홍보 부족

○ 대  책

- 경영지원단을 통한 창업컨설팅 및 기술인증 취득지원

- 한국폴리텍대학과의 관학협업체계를 추진하여 산업맞춤형 기술교육실시

- 관내 기업들의 DB확보 및 언론 매체 등에 지속적인 홍보

□ 기대효과

○ 우수 창업아이템 및 기술을 보유한 창업기업 지원을 통한 벤처기업지원

○ 전문교육기관의 체계적인 교육을 통한 중소기업의 기술경쟁력 향상

○ 기업의 기술역량 강화 및 지적재산권 보호를 통한 경영 안정화

관리번호	4-6	공약명	제3산업단지 재생사업 지속 추진
사업구분	임기 내 기반조성	추진부서	일자리경제과장 최병욱 / 팀장 송미숙 / 주무관 서정구(☎665-2665)

□ 추진목표

○ 산업단지 내 기반시설 확충(도로, 공원, 주차장 등)

○ 기존업종과 유치 업종별 특성을 고려 전략사업구역 개발

○ 서대구공단과 공동개발추진을 위한 협조체계 유지(실무회의, 자문 등)

□ 사업개요

○ 사업면적 : A=1,685천㎡

○ 사업기간 : 2009년 ∼ 2024년

○ 총사업비 : 3,040억원(국비 1,520 시비 1,520)

※ 총사업비 반영(도로부문) : 2,343억원(국비 1,171 시비 1,172)

○ 사업내용 : 업종변경 및 기반시설 확충을 통한 도시형 산업단지로 재생

□ 현재 추진 상황

○ 2018. 4월 : 기반시설(1단계) 사업 공사계약 의뢰(조달청)

- 도로확장 B=15~40m, L=3.5km / 신천대로 IC 1식

○ 2018. 7월 : 노후산업단지 재생사업 활성화 방안 연구용역 시행(대경연)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
재원별	304,000	30,315	6,015	26,000	40,000	60,000	60,000	81,670
국비	152,000	16,315	1,850	13,000	20,000	30,000	30,000	40,835
시비	152,000	14,000	4,165	13,000	20,000	30,000	30,000	40,835

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진		기반시설확충 공사에 따른 용지 보상 블록별 추진위원회 구성을 통한 운영
임기내	2018년	기반시설(1단계) 사업 공사계약 의뢰(신천대로IC) 노후산업단지 재생사업 활성화 방안 연구용역 시행 (대구경북연구원)	22
	2019년	- 기반시설(1단계, 10개 노선 3.5km) 사업 시행, - 전략사업구역 사업시행자 지정 및 사업시행	60
	2020년
	2021년	- 기반시설(2단계, 24개 노선 6.5km) 사업 및 전략사업 시행	100
	2022년
임 기 후		- 기반시설(3단계, 25개 노선 7.8km) 사업 시행 - 민간개발(투자)사업 시행

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 제3산업단지 재생사업 개발 기대심리로 일부 편입 토지 보상협의 지연

- 도심 내 산업단지로 지가가 높아 사업성이 낮음

○ 대  책

- 행정절차(수용재결, 공탁 등) 신속 진행 및 단계별 사업 착공

- 대경연 연구용역 시행으로 사업성 개선방안 마련 중

□ 기대효과

○ 체계적인 재정비를 통해 경쟁력 있는 도시 공간 조성

관리번호	4-7	공약명	농수산물 도매시장 현대화
사업구분	임기 내 착수	추진부서	일자리경제과장 최병욱 / 팀장 정승일 / 주무관 장효임(☎665-2670)

□ 추진목표

○ 물류 효율성 제고 : 노후시설 개선으로 유통환경 변화에 대응 물류 시스템 개선

○ 시급한 부족시설 우선 확충 : 인근 부지확장으로 물류 공간 확대, 경매장 등
필요시설 확충

○ 공영 도매시장의 기능 강화 및 경쟁력 제고 : 생산자와 소비자를 위한
고객 서비스 시설 개선

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2023년

○ 소요예산 : 750억원 예상 (국비 160/ 시비 590억원)

○ 세부추진내용

- 물류 공간 확충 : 북부 화물터미널 및 인근 유휴부지 매입(17,300㎡)

- 교통 체계 개선 : 확장부지 연결 교량 건설, 출입문(6문) 개설 등

- 필요 시설 확충 : 경매장, 잔품처리장, 주차장(지상, 지하), 냉동창고, 편의시설 등

- 시설물 재정비 : 관련상가, 엽채류(상장, 비상장) 잔품처리장, 폐기물처리장 등

- 청정에너지 생산기지 구축 : 유휴공간(옥상 등) 태양광 설치

□ 향후 추진계획

○ 타당성 기본계획수립 용역 : 2018년 하반기

○ 공영도매시장 시설현대화사업 공모신청 : 2018년 하반기

○ 시설현대화사업 T/F팀 편성 ․ 운영 : 2018년 7월 ~ 8월

○ 기본 및 실시계획 수립 : 2018년 ~ 2019년

○ 세부사업 시행 등 : 2019년 ~ 2023년

□ 연도별 투자계획

○ 공모사업 신청 결과에 따라 재원별 사업비 결정

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 기획재정부와 농림축산식품부 간의 예산 협의 중으로 공모사업 신청이 지연되어
국비 조기 확보에 어려움이 있음.

○ 대  책

- 사업 추진을 위한 국비 확보노력 및 시비 확보 방안 마련

□ 기대효과

○ 도매시장의 공익적 기능과 역할에 충실하여 시장을 활성화하고 경쟁력 확보를 도모

○ 협소한 공간문제 및 불합리한 교통체계 등을 개선하여 도매시장을 이용하는
시민들에게 편의를 제공

Ⅴ	행복한 노후 도시

관리번호	5-1	공약명	인생 이모작(Re-Start) 프로그램 운영
사업구분	임기 내 완료 (지속추진)	추진부서	평생교육과장 최순남 / 팀장 김원태 / 주무관 백미라(☎665-2714)

□ 추진목표

○ 경력단절 주민 및 은퇴(예정)자 등 제2의 인생을 꿈꾸는 주민들을 위한
수요자 중심의 프로그램 제공으로 인생 이모작(Re-Start) 계기 마련

○ 평생학습의 일환으로 학습-일 맞춤형 연계 프로그램(자격증 취득과정) 제공

○ 취미활동과 전문성을 겸비한 특성화된 교육을 통해 재능나눔 활동 및 학습형
일자리 기회 창출

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

○ 대    상 : 관내 경력단절 주민 및 은퇴(예정)자 등

○ 내    용 : 인생 이모작 준비를 위한 맞춤형 평생학습프로그램 제공

｛학습형 일자리 창출 자격증 취득 프로그램, 행복북구 Leader's
평생대학원, 행복학습센터(자격증 취득과정) 운영 등｝

○ 사 업 비 : 735백만원 정도

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
계	735	-	110	115	120	125	130	135
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-
구비	735	-	110	115	120	125	130	135
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진		-
임기내	2018년	□학습형 일자리 창출 자격증 취득 프로그램 운영(3개 과정) □행복북구 Leader's 평생대학원 운영 □행복학습센터(자격증 취득) 프로그램 운영(3개 과정)	100%
	2019년	□학습형 일자리 창출 자격증 취득 프로그램 확대 운영(4개 과정) □행복북구 Leader's 평생대학원 운영 □행복학습센터(자격증 취득) 프로그램 확대 운영(4개 과정)	100%
	2020년	□학습형 일자리 창출 자격증 취득 프로그램 확대 운영(5개 과정) □행복북구 Leader's 평생대학원 확대 운영 □행복학습센터(자격증 취득) 프로그램 확대 운영(5개 과정)	100%
	2021년	□학습형 일자리 창출 자격증 취득 프로그램 확대 운영(6개 과정) □행복북구 Leader's 평생대학원 확대 운영 □행복학습센터(자격증 취득) 프로그램 확대 운영(6개 과정)	100%
	2022년	□학습형 일자리 창출 자격증 취득 프로그램 확대 운영(7개 과정) □행복북구 Leader's 평생대학원 확대 운영 □행복학습센터(자격증 취득) 프로그램 확대 운영(7개 과정) □인생 이모작 프로그램 운영 평생학습관 건립(운영)	100%
임 기 후		□만족도(성과평가) 조사를 통한 지속적인 프로그램 운영 체계 구축

□ 문제점 및 대책

○ 평생교육 참여확대 및 활성화로 인해 점점 높아지는 주민들의 학습 욕구에
부응하는 다양한 프로그램을 추진 중에 있으나,

○ 평생교육을 전담할 수 있는 교육인프라(평생학습관)가 구축되지 못해 인생
이모작 프로그램을 수강하는 주민들이 불편함을 호소하고 있음

○ 이에, 2022년까지 특별교부세 등 가용재원을 마련하여 주민들이 편리하고
다양한 인생 이모작 프로그램에 참여할 수 있는 평생학습관 적극 추진

□ 기대효과

○ 학습-일 연계 인생 이모작 사업으로 개인의 역량과 지역사회 활력 강화

○ 자격증 취득 등 맞춤형 전문 교육과정 제공으로 구정 만족도 제고

관리번호	5-2	공약명	보훈회관, 노인종합복지관 건립
사업구분	임기 내 완료	추진부서	주민행복과 과장 남창석 / 팀장 이무상(☎665-2513)

□ 추진목표

○ 보훈대상자에 대한 예우와 사기진작을 위하여 쾌적한 보훈단체 사무실 및
여가활동 공간 제공

○ (사)대한노인회 북구지회 기존건물의 노후화에 따른 쾌적한 공간 제공과
어르신의 문화 복지, 여가선용으로 건강한 노후생활 개선으로 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 위    치 : 북구 칠성남로 26길 27(칠성동2가)

○ 규    모 : 연면적 1,978.19㎡(지하1층, 지상5층)

○ 주요시설 : 보훈회관, 노인종합복지관, 산업문화관

□ 현재 추진 상황

○ 2018. 6월 : 건축 설계 완료

○ 2018. 6월 : 공사 입찰공고 및 계약

○ 2018. 7월 : 공사 착공

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
계	5,065	600	-	4,234	-	-	-	-
국비	500	-	-	500	-	-	-	-
구비	1,365	-	-	1,365	-	-	-	-
구비(교부세)	600	600	-		-	-	-	-
구비(교부금)	2,000	-	-	2,000	-	-	-	-
도활사업비	600	-	-	600	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진		공사 입찰 및 계약
임기내	2018년	공사 착공	65
	2019년	공사 준공	100
	2020년
	2021년
	2022년
임 기 후

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 구비(13억 정도) 확보의 어려움이 예상됨

○ 대  책

- 대구시에 교부금 요청 방안 검토

□ 기대효과

○ 보훈단체 사무실 환경개선 및 집적화로 업무의 효율성 증대

○ 어르신의 문화 복지 및 여가선용의 공간 제공으로 삶의 질 향상

관리번호	5-3	공약명	치매안심센터 건립 운영
사업구분	임기 내 완료	추진부서	건강증진과장 이춘희 / 팀장 이명자 / 주무관 박지성(☎665-3224)

□ 추진목표

○ 치매안심센터 설치 기준에 부합하는 시설 배치(검진실, 교육실, 쉼터 등)

○ 안락하고 편안한 공간 조성으로 이용자들의 편의 증대

○ 치매관리사업의 지속적인 통합관리 서비스를 위한 치매인프라 구축

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2019. 3월

○ 위    치 : 보건복지센터 內 5층 / 구암건강생활지원센터

○ 규    모 : 775.18㎡

※ 보건복지센터 5층 : 651.18㎡, 구암건강생활지원센터 : 124㎡

○ 총사업비 : 1,163백만원(국930, 시163, 구70)

○ 사업내용 : 다양한 보건복지서비스 연계 및 맞춤형 관리를 위한 지역사회 기반시설 확충

□ 현재 추진 상황

○ 리모델링 공사 설계용역 실시 : 2018. 6. 28. ~ 9. 25.(90일간)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
계	1,163	-	1,163	-	-	-	-	-
국비	930	-	930	-	-	-	-	-
시비	163	-	163	-	-	-	-	-
구비	70	-	70	-	-	-	-	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진		-	-
임기내	2018년	‧ 리모델링 공사 설계 완료 : 2018. 9월 중 ‧ 구 일상감사 완료 : 2018. 10월 초 ‧ 시 계약심사 완료 : 2018. 11월 초 ‧ 공사 입찰 완료 : 2018. 12월 중	50
	2019년	‧ 공사 착공 : 2019. 1월 초 ‧ 공사 완공 : 2019. 3월	100

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 보건복지센터 내 북구어린이집 이전 지연에 따른 센터 완공 계획 변경

(2018. 11월 → 2019. 3월)

○ 대  책

- 관련 부서 협의 하에 센터 설립에 차질이 없도록 업무 추진

□ 기대효과

○ 급격히 증가하는 노령인구에 대응한 지역사회 인프라 구축으로 지속적인 치매예방 및 조기관리와 사회경제적 비용 절감

관리번호	5-4	공약명	노년 취약층 지원사업 실시(청바지사업)
사업구분	임기 내 완료 (지속추진)	추진부서	주민행복과장 남창석 / 팀장 김재은 / 주무관 류연하(☎665-2698)

□ 추진목표

○ 가정 형편이 어려운 청소년에게 안정된 복지일자리 제공하여 생계지원

○ 주말동안 노인들의 안부를 확인하므로 고독사 예방

○ 일자리가 필요한 청소년과 안부확인이 필요한 노인을 연계하여 사업시행

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018. 1월 ~ 12월

○ 사 업 비 : 9,019만원 (구비 100%)

○ 사업시행 : 9개동(칠성동, 산격1동, 대현동, 무태조야동, 태전2동, 구암동,
관음동, 읍내동, 국우동)

○ 참여대상

- 대상 : 기초수급자 등 법정저소득 만15~17세 청소년

- 인원 : 36명 (동별 4명 / 2인 1조, 2개조 운영)

- 급여 : 월 200,000원

○ 수혜대상 : 독거노인 등 안부확인이 필요한 자

□ 현재 추진 상황

○ 2017년 7월부터 시행중이며, 9개동 청소년 36명이 월 6회 가정방문하여

안부확인

□ 연도별 투자계획

(단위 : 만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
계	49,799	4,700	9,019	9,020	9,020	9,020	9,020	-
구비	49,799	4,700	9,019	9,020	9,020	9,020	9,020	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진		- 2017. 7월~12월 시행 (청소년 36명 활동, 수혜대상자 239명 안부확인)
임기내	2018년	- 2018. 1월부터 시행중 (청소년 36명 활동, 수혜대상자 250명 안부확인)	100%
	2019년	- 계속 시행
	2020년	- 계속 시행
	2021년	- 계속 시행
	2022년	- 계속 시행
임 기 후

□ 기대효과

○ 저소득 청소년에게 근로를 제공하여 경제적 어려움 해소

○ 청소년 고용에 대한 노동환경 개선 및 사회인식 변화 도모

○ 틈새형 노인복지서비스를 통해 고독사 예방 확대 및 강화

Ⅵ	미래를 책임질 명품 교육 도시

관리번호	6-1	공약명	청소년 문화의집 건립
사업구분	임기 내 완료	추진부서	평생교육과장 최순남 / 팀장 이경주 / 주무관 우영규(☎665-2185)

□ 추진목표

○ 청소년이 주체가 되는 청소년 문화의 요람 조성

○ 청소년의 지도력 향상과 창의력을 고취시키며, 청소년을 비롯한 주민의

여가선용 장소제공으로 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 위 치 : 북구 칠곡중앙대로 561

○ 기 간 : 2017. 3월 ~ 2020. 7월

○ 규 모 : 부지 1,666㎡, 연면적 2,916㎡(지하1층, 지상5층)

☞ 청소년 문화의 집 : 2,011㎡, 주민센터 등 : 905㎡

○ 시 설 : 강의실, 체육실, 프로그램실, 동아리실 등

○ 사업비 : 8,224백만원정도

□ 현재 추진 상황

○ BF(장애물 없는 생활환경) 인증 등 : ~ 2018. 10월

○ 실시 설계용역 추진 : 2018. 5월 ~ 2019. 3월

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
계	8,224	500	1,750	3,710	2,264	-	-	-
국비	5,064	-	1,500	2,300	1,264	-	-	-
구비	3,160	500	250	1,410	1,000	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진		건립 기본계획 수립 및 市 지방재정투자심사 통과
임기내	2018년	설계용역 실시	50
	2019년	문화재 시굴조사 및 공사 착공	75
	2020년	공사준공	100

□ 문제점 및 대책 : 해당없음

□ 기대효과

○ 지역 청소년들에게 다양한 문화 · 체육 · 휴게공간을 제공하고, 주민참여 프로그램 운영을 통한 주민 만족도 제고

<< 조감도>>

조  감  도

관리번호	6-2	공약명	구민의 건강을 업그레이드할 체육프로그램 운영
사업구분	임기 내 완료 (지속추진)	추진부서	문화체육과장 임대환 / 팀장 류금숙 / 주무관 권대혁(☎665-2794)

□ 추진목표

○ 웰빙에 대한 구민의 욕구 총족을 위하여 다양한 체육프로그램을 운영하여 구민의 신체적‧정신적 건강 증진 도모

□ 사업개요

○ 추진시기 : 2018년 ~ 2022년

○ 연사업비 : 655백만원정도

○ 추진방법 : 체육관련 프로그램 조정 및 개발, 각종 대회 개최 및 출전지원 등

□ 현재 추진 상황

○ 생활체육 진흥과 지도 육성 프로그램 육성

- 생활체육교실, 생활체육광장 등 운영

- 여성 ‧ 어르신 ‧ 소외계층 생활체육 프로그램 운영

- 생활체육지도자 배치

○ 대불스포츠클럽 운영

- GX프로그램, 배드민턴, 탁구, 농구, 프리테니스 등

○ 생활체육 저변확대를 위한 대회개최 및 출전지원

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
계	3,930	-	655	655	655	655	655	655
국비	1,122	-	187	187	187	187	187	187
시비	582	-	97	97	97	97	97	97
구비	2,226	-	371	371	371	371	371	371
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진		○ 생활체육 활성화를 위한 프로그램 운영 - 생활체육진흥 프로그램 운영 - 생활체육 지도 육성사업 ○ 생활체육 참여 확산사업 : 각종 생활체육 대회 개최 및 출전지원 ○ 대불스포츠클럽 운영 활성화 지원
임기내	2018년	○ 생활체육 활성화를 위한 프로그램 운영 - 생활체육진흥 프로그램 운영 - 생활체육 지도 육성사업 ○ 생활체육 참여 확산사업 : 각종 생활체육 대회 개최 및 출전지원 ○ 대불스포츠클럽 운영 활성화 지원	100
	2019년	○ 생활체육 활성화를 위한 프로그램 운영 - 생활체육진흥 프로그램 운영 - 생활체육 지도 육성사업 ○ 생활체육 참여 확산사업 : 각종 생활체육 대회 개최 및 출전지원 ○ 대불스포츠클럽 운영 활성화 지원	100
	2020년	○ 생활체육 활성화를 위한 프로그램 운영 - 생활체육진흥 프로그램 운영 - 생활체육 지도 육성사업 ○ 생활체육 참여 확산사업 : 각종 생활체육 대회 개최 및 출전지원 ○ 대불스포츠클럽 운영 활성화 지원	100
	2021년	○ 생활체육 활성화를 위한 프로그램 운영 - 생활체육진흥 프로그램 운영 - 생활체육 지도 육성사업 ○ 생활체육 참여 확산사업 : 각종 생활체육 대회 개최 및 출전지원 ○ 대불스포츠클럽 운영 활성화 지원	100
	2022년	○ 생활체육 활성화를 위한 프로그램 운영 - 생활체육진흥 프로그램 운영 - 생활체육 지도 육성사업 ○ 생활체육 참여 확산사업 : 각종 생활체육 대회 개최 및 출전지원 ○ 대불스포츠클럽 운영 활성화 지원	100
임 기 후

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 체육프로그램 조정 시 기존 소수 이용자의 프로그램 종료 반대 민원

- 종목별 동호인 대회 개최 등 지원에 따른 종목간 형평성 문제 발생

- 대불스포츠클럽 기금 지원(17년 ~ 19년 / 연 3억) 종료 시 운영비 부족

○ 대  책

- 프로그램 조정 시 기 이용자 및 구민 의견을 최대한 반영할 수 있는 사전 조치 강화

- 북구체육회 및 종목별 협회와의 지속적인 유대관계 및 협조 강화

- 대불스포츠클럽 공모사업 신청 ‧ 인력조정 ‧ 풋살장(축구장) 위탁 및 운영에 따른
자체 수입 조달 등 운영비 확보 방안 모색

□ 기대효과

○ 구민의 신체적‧정신적 건강과 체력증진으로 건강수명 향상과 건전한 여가생활 형성

관리번호	6-3	공약명	진로· 진학 지원센터 설립 운영
사업구분	임기 내 완료 (지속추진)	추진부서	평생교육과장 최순남 / 팀장 김미예 / 주무관 김수정(☎665-2184)

□ 추진목표

○ 지역의 초‧중‧고 학생들에게 상시적이고 체계적인 진로탐색 기회와 맞춤형
최신 입시 진학정보를 제공

○ 청소년 개개인의 적성과 재능을 발굴하고 미래를 설계할 수 있도록 지원

□ 사업개요

○ 위    치 : 북구 옥산로 95, 화인탑팰리스 4층 305호(칠성동)

○ 규    모 : 전용면적 173.51㎡(사무실, 상담실, 문화예술활동실 등)

○ 종 사 원 : 3명(센터장 외 2명)

○ 사업내용

- 진로체험영역 : 문화예술 체험활동, 전문기관 연계 자유학년제 진로체험,
찾아가는 진로체험, 토요동아리 지원 및 영어특화 프로그램

- 진로진학영역 : 진로진학 1:1 상담, On/Off Line 자기소개서 코칭,
학부모 ‧ 자녀 상담, 진로 ‧ 진학특강 지원

□ 현재 추진 상황

○ 진로진학센터 설치 완료 : 2018. 2월

○ 진로진학센터 개관 ‧ 운영 : 2018. 3월

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
계	1,706	-	506	400	400	400	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	1,200	-	300	300	300	300	-	-
구비	506	-	206	100	100	100	-	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진
임기내	2018년	- 진로진학 지원센터 설치 및 운영	100
	2019년	- 진로체험프로그램 운영(연중) ‧ 문화예술체험, 전문기관 연계 자유학년제 진로체험 ‧ 찾아가는 진로체험, 토요동아리 지원, 영어특화 프로그램 - 진로진학프로그램 운영(연중) ‧ 진로진학 1:1 상담, On/Off Line 자기소개서 코칭 ‧ 학부모‧자녀 상담, 진로‧진학특강 지원	100
	2020년	”	100
	2021년	”	100
	2022년	”	100
임 기 후

□ 문제점 및 대책 : 해당없음

□ 기대효과

○ 교과수업 및 다양한 자유학기 활동과 연계한 체험활동으로 기존의 암기 위주 교육에서 벗어나 학생들의 실질적 성장과 청소년들이 꿈과 끼를 스스로 찾고 미래를 설계하도록 도움

○ 학생들에게 상시적이고 체계적인 진로탐색 기회와 맞춤형 진학정보를 제공함으로써 자기 주도적 의사결정능력 함양

관리번호	6-4	공약명	보육의 공공성 실현 -국공립 어린이집 확충-
사업구분	임기 내 완료	추진부서	가족복지과장 위연선 / 팀장 권혜경 / 주무관 손수덕(☎665-2548)

□ 추진목표

○ 장기임차 방식의 국공립 전환(사회복지법인, 공동주택 및 민간어린이집)

○ 신축 및 기존어린이집 매입 또는 기부채납

○ 기존 공공시설(학교, 주민센터 등) 리모델링 후 전환

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년(사업자별 요청시기에 따라 보육수요 등을 감안하여                5년간 연차적으로 확충)

○ 사 업 량 : 2018년도 10개소 추가 확충 목표

○ 사 업 비 : 개소당 120백만원(유형에 따라 220백만원)

○ 사업내용 : 어린이집 리모델링 시설비 및 기자재 구입비 지원

□ 현재 추진 상황

○ 금호 B-1 블럭(공공임대) : 국공립 유치 확정 → 위탁운영자 선정완료 →

2018년 9월 ~ 10월 개원 예정

○ 연경 A-3 블럭(행복주택) : 국공립 유치 확정 → 위탁운영자 선정완료

○ 前 도청 어린이집 시설   : 국공립 유치 확정 → 위탁운영자 선정완료

○ 금호 S-1 블럭(기업형임대주택) : 국공립 유치 확정 → 무상임대 협약체결 준비 중

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
계	6,765	3,174	1,191	600	600	600	600	-
국비	2,348	803	345	300	300	300	300	-
시비	1,915	1,142	173	150	150	150	150	-
구비	2,502	1,229	673	150	150	150	150	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진		2017년 2월 금호청라, 부광어린이집 국공립 확충완료
임기내	2018년	2018년 3월 휴포레강북어린이집 국공립 확충완료 3개소 국공립 확충 진행 중	50
	2019년	신축아파트 대상으로 국공립 유치 홍보 사회복지법인 국공립 전환 유도 및 홍보	100
	2020년	“
	2021년	“
	2022년	“
임 기 후

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 공동주택 의무어린이집의 경우 재산권과 관련되어 입주민들 간 의견 합의가 어려운 상황이 많음

- 사회복지법인 전환의 경우 노후 된 시설이 현행 영유아보육법에 맞지 않아 시설 개보수 비용이 많이 소요됨

○ 대  책

- 내부적 원만한 합의를 통한 국공립 유치 신청을 유도 하고 있음

- 기존 시설에 대한 법적 기준 완화가 필요함

□ 기대효과

○ 국공립어린이집 이용률 제고를 통한 공보육 기반 조성

○ 보육의 공공성 강화로 믿고 맡기는 보육 환경 조성

관리번호	6-5	공약명	교육국제화특구 운영
사업구분	임기 내 완료 (지속추진)	추진부서	평생교육과장 최순남 / 팀장 김미예 / 주무관 김수정(☎665-2184)

□ 추진목표

○ 글로벌 창의인재 육성을 통한 지역의 경쟁력 강화

○ 외국어 교육 강화 프로그램 및 청소년 국제교류 활성화로 글로벌 마인드 함양

□ 사업개요

○ 지역주민 외국어교육 프로그램 개발․운영

- 영어, 중국어 등 외국어교육 : 5개 강좌, 북구 주민 150명

- 원어민 화상영어 학습센터 운영

‧ 북구 주민 및 학생, 1,790명, 필리핀 현지 원어민과 1:3 수업

○ 글로벌 창의 인재육성 프로그램 운영

- 대구경북영어마을 체험학습 지원 : 초등5학년 전체 2박3일 입소체험

- 전국 영어콘테스트 개최 : 전국 초등학생(3학년 ~ 6학년 및 중학생)

- ‘영어로 놀자’ 청소년 영어뮤지컬 동아리 지원 : 50명

- 겨울방학 중등 영어캠프 운영 : 중학교 2학년 45명

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
계	4,973	-	1,164	1,153	1,145	1,511	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	796	-	199	199	199	199	-	-
구비	4,177	-	965	954	946	1,312	-	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진
임기내	2018년	○ 지역주민 외국어교육 프로그램 개발·운영 - 영어, 중국어 등 외국어교육 : 5개 강좌, 북구 주민 150명 - 원어민 화상영어 학습센터 운영 ‧ 북구 주민 및 학생, 1,790명, 필리핀 현지 원어민과 1:3 수업 ○ 글로벌 창의 인재육성 프로그램 운영 - 대구경북영어마을 체험학습 지원 : 초등5학년 2박3일 입소체험 - 전국 영어콘테스트 개최 : 전국 초등학생(3~6학년 및 중학생) - ‘영어로 놀자’ 청소년 영어뮤지컬 동아리 지원 : 50명 - 겨울방학 중등 영어캠프 운영 : 중학교 2학년 45명	100
	2019년	”	100
	2020년	”	100
	2021년	”	100
	2022년	”	100
임 기 후

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 지방비로는 교육특구의 국제 경쟁력 강화와 다양한 국제 교육 인프라 구축 사업에 한계가 있는 만큼 성공적인 교육국제화 특구 육성을 위해서는 국비 확보가 필수적임

○ 대  책

- 국비 확보에 총력을 기울이는 한편, 지속적인 구예산 편성으로 북구만의 특색 있고 추진 가능한 사업 개발 · 발굴하여 운영

□ 기대효과

○ 체계적이고 지속가능한 실용영어교육 확대로 국제 경쟁력을 갖춘 글로벌 인재 육성

○ 다양한 국제화 교육 제공으로 지역 주민의 국제화 역량 강화와 다문화가정 및 지역의 소외계층에 균등한 교육기회 제공

Ⅶ	엄마와 아이들을 위한 특별한 약속

관리번호	7-1	공약명	금호강 가족 오토캠핑장 조성
사업구분	임기 내 완료	추진부서	관광자원개발과장 고진호/ 금호강개발팀장 서송학/ 주무관 황보찬귀(☎665-2252)

□ 추진목표

○ 새로운 여가문화 트렌드를 고려하여 구민들의 만족도 높은 여가문화 서비스를 제공

○ 천혜의 자연환경을 갖추고 있는 금호강변 수변공간에 캠핑장 조성을 통해 다양한 볼거리 및 즐길거리를 제공

□ 사업개요

○ 사업위치 / 면적 : 검단동 458-4번지 일원 / A=9,940㎡

○ 사업기간 : 2018년 ∼ 2019년

○ 총사업비 : 10억

○ 사업내용 : 오토캠핑장, 잔디원, 초화류, 다목적광장, 휴게시설, 놀이시설,
화장실, 샤워실, 취사장, 관리동 등

□ 현재 추진 상황

○ 금호강 오토캠핑장 조성 기본계획 : 2017. 1월

○ 실시설계 용역 : 2018. 2. 9. ~ 5. 9.[용역중지(4. 24.) / 부산국토청 사전협의 이행]

○ 실시설계 디자인 및 설계용역 협의 : 2018. 5월 ~ 7월

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
계	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-
국비	500	-	500	-	-	-	-	-
시비	250	-	250	-	-	-	-	-
구비	250	-	250	-	-	-	-	-
민간	-	-	-	--	--	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진		기본계획 수립
임기내	2018년	· 2018. 8월 : 하천점용 허가 신청(부산지방국토관리청) · 2018. 8월 : 공공디자인 심의요구(대구시) · 2018. 9월 : 일상감사 및 계약심사(감사실, 대구시) · 2018.10월 : 공사착공 · 2018.11월 : 캠핑장 운영조례 제정 및 예약시스템 설치 등	60
	2019년	· 2019. 3월 : 공사준공 · 2019. 5월 : 오토캠핑장 개장	100
	2020년
	2021년
임 기 후

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 금호강 둔치에 조성되는 관계로 홍수 등 하천유지관리를 총괄하는 부산지방
국토관리청의 하천점용 허가 승인이 우선 과제임

○ 대  책

- 도심속 가까운 금호강 수변지역에 구민과 관광객을 위한 국민여가 캠핑장 조성이 원활히 이루어지도록, 하천점용 허가 기준에 적합한 실시설계 용역을 통한 부산국토청과의 원활한 협의에 최선을 다하고자 함

□ 기대효과

○ 자연친화적인 수변공간에서 만족도 높은 여가문화 서비스 제공

○ 생태공원 조성에 이어 북구의 관광인프라 구축에 기여

관리번호	7-2	공약명	구암서원 가족 캠프 운영
사업구분	임기 내 완료	추진부서	관광자원개발과장 고진호/ 관광진흥팀장 권태승/ 주무관 김은경(☎665-4324)

□ 추진목표

○ 다문화 및 새터민 가정, 외국인 등에게 한국전통문화 체험 기회 제공하여 한국문화 이해 기반 마련

○ 단절된 가족의 대화 회복, 건강한 가족문화 정착 인간관계 회복, 바람직한 사회 구성원 양성 및 가족캠프를 통하여 가족의 사랑을 확인하고 의미를 되새기는 기회 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 북구 연암공원로17길 20(구암서원)

○ 주요시설 : 초현당, 동재, 서재, 전사청, 연비루, 백인당

○ 사업예산 : 23,000천원(계속)

○ 사업내용 : 전통한옥체험 숙박시설 운영

- 묵향에 마음을 담다 : 가족, 기업인 가족 캠프

- 달빛 어우러짐 : 다문화가정, 새터민가정, 외국인

□ 현재 추진 상황

○ 묵향에 마음을 담다(가족 등)

- 2018. 3월 ~ 6월 8회 445명 참여

○ 달빛 어우러짐(다문화, 새터민, 외국인 등)

- 2018. 3월 ~ 6월 2회 180명 참여

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	135	20	23	23	23	23	23
국비	65	10	11	11	11	11	11
시비	35	5	6	6	6	6	6
구비	35	5	6	6	6	6	6

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진		2017년 향교·서원문화재활용사업 시행	100
임기내	2018년	❍ 서원 빗장을 열다 - 묵향에 마음을 담다 : 3월 ~ 12월 (5회, 가족 15명 이상) - 달빛 어우러짐 : 3월 ~ 12월 (5회, 다문화/새터민/외국인 15명 이상)	100
	2019년	❍ 서원 빗장을 열다 - 선비의 삶, 나를 찾는다 (일반시민, 가족 등) - 3월 ~ 12월 중 15회 이상 / 25인 이상	100
	2020년	“ ※ 세부 프로그램은 수행기관 사정상 변경될 수 있음	100
	2021년	“ ※ 세부 프로그램은 수행기관 사정상 변경될 수 있음	100
	2022년	“ ※ 세부 프로그램은 수행기관 사정상 변경될 수 있음	100
임 기 후

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 사업추진을 위해 예산확보 공모를 매년 신청해야 하는 번거로움이 있음

○ 대  책

- 지방자치단체 공모사업 적극적 응모 및 지원으로 예산 확보

- 향교 ․ 서원문화재의 역사적 의미와 가치를 지역의 인적 ․ 물적 자원과 결합한
적극적인 사업 추진으로 향교 ․ 서원 문화체험 활성화 도모

□ 기대효과

○ 전통 가족관계에 대해 이해하고 현대 사회에서 실천할 수 있는 가족 간의
예절을 습득하여 화목한 가정형성 기여

○ 다문화 및 새터민 가정, 외국인 등이 전통문화를 체험함으로써 한국과
우리 문화에 대한 인식 개선

관리번호	7-3	공약명	엄마와 함께하는 안전체험 순회교육
사업구분	임기 내 완료 (지속추진)	추진부서	도시안전과장 박영태 / 팀장 이복우 / 주무관 이소영(☎4312)

□ 추진목표

○ 현장중심 안전체험 교육 실시로 안전사고 대처 능력 향상 및 학부모 안전 의식 제고

○ 교육효과가 높은 아동기부터 반복적인 안전체험 교육을 통해 안전의 생활화

□ 사업개요

○ 교육대상 : 미취학 아동(만3세 이상) 및 초등학생, 학부모

○ 교육내용 : 화재안전 및 응급처치 등 교육 및 체험

○ 사 업 비

- 강사수당 및 홍보물 제작 : 6,000천원

- 시뮬레이션 소화기(방재훈련용 모의시스템) 구입 : 10,000천원

○ 추진방법

- 교육을 희망하는 어린이집(유치원) 또는 학교를 대상으로 전문 강사가
방문하여 교육 진행

□ 현재 추진 상황

○ 기    간 : 4월 ~ 10월(총 11회)

○ 교육대상 : 각 동 관내 지역 주민(성인)

○ 사 업 비 : 6,160천원(강사비 및 홍보물)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
계	40	-	6	16	6	6	6	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-
구비	40	-	6	16	6	6	6	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진		없 음
임기내	2018년	각 동 안전체험 순회 교육 실시 중	72%
	2019년	시뮬레이션 소화기 구입 및 안전체험 교육 홍보·실시	100%
	2020년	안전체험 교육 홍보·실시	100%
	2021년	안전체험 교육 홍보·실시	100%
	2022년	안전체험 교육 홍보·실시	100%
임 기 후

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 해당사항 없음

○ 대  책

- 해당사항 없음

□ 기대효과

○ 체험형 프로그램을 통한 어린이 스스로 안전의식 터득 기회 제공

관리번호	7-4	공약명	어린이보호구역, 생활안전 CCTV 설치 확충
사업구분	임기 내 완료	추진부서	정보통신과장 최상완 / 팀장 김용배 / 주무관 이재호☎665-4482)

□ 추진목표

○ 설치요구 민원 반영을 통한 지역주민 민원 적극 해소

○ 방범취약지역 내 도로 교차⋅분기지점에 우선적 카메라 설치로 사업 추진
효율 극대화

○ 범죄 및 방범 취약지에 CCTV를 설치하여 안전하고 살기 좋은 도시환경 조성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018년∼2022년

○ 설치대상 : 관내 범죄발생 취약지

○ 목표수량 : 145대

○ 사업예산 : 1,455백만원정도

○ 사업내용 : 관내 방범 취약지역 및 어린이보호구역 CCTV 설치 확충

□ 현재 추진 상황

○ 어린이보호구역, 생활안전 CCTV 설치 확충

- 사업비 : 975백만원정도(설치대수 : 96대)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
계	5,268	3,813	975	120	120	120	120	-
국비	2,044	1,544	500	-	-	-	-	-
시비	2,457	1,737	400	80	80	80	80	-
구비	767	532	75	40	40	40	40	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진
임기내	2018년	생활안전 및 어린이보호 CCTV설치(96대)	100%
	2019년	생활안전 및 어린이보호 CCTV설치(12대)	100%
	2020년	생활안전 및 어린이보호 CCTV설치(12대)	100%
	2021년	생활안전 및 어린이보호 CCTV설치(12대)	100%
	2022년	생활안전 및 어린이보호 CCTV설치(12대)	100%
임 기 후

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 개소당 임대회선 사용료(대당 88,000원/월)가 과다하여 해마다 증가되는 유지보수료로 인한 구재정 부담가중

- CCTV설치 총사업비가 15억정도이며 소요재원 확보에 어려움

○ 대  책

- 관내 CCTV 전체를 네트워크로 연결하는 CCTV 자가통신망 구축

- 구재정을 감안하여 국비 및 재난안전특별교부세 요구

□ 기대효과

○ 방범취약지역에 CCTV를 설치함으로써 범죄예방효과 및 감소로 안전하고 범죄 없는 지역사회 구현

관리번호	7-5	공약명	어린이보호구역 횡단보도 안전강화 및 통행환경 개선
사업구분	임기 내 완료 (지속추진)	추진부서	교통과장 박쌍도 / 팀장 정광수 / 주무관 김성훈(☎665-3163)

□ 추진목표

○ 초등학교 주변 불법주정차 단속 CCTV 설치

○ 초등학교 주변 과속 및 신호위반 단속 CCTV 설치

○ 교통안전시설 확충 및 노후 안전시설 정비

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018년 ∼ 2022년

○ 총사업비 : 1,510백만원

○ 사업내용

- 불법주정차 단속 CCTV 설치 : 20개소

- 과속 및 신호위반 단속 CCTV 설치 : 20개소

- 보호구역 내 안전시설 확충 및 노후 시설 정비 : 25개소

- 초등학교 주변 보도설치 : 4개소

□ 현재 추진 상황

○ 어린이 보호구역 내 안전시설 정비 11개소 : 구비 60백만원

○ 어린이 보호구역 안전시설 강화 5개소 : 시비 75백만원

○ 초등학교 주변 보도 설치 4개소 : 시비 175백만원

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
계	1,510	-	470	260	260	260	260	-
국비	800	-	160	160	160	160	160	-
시비	450	-	250	50	50	50	50	-
구비	260	-	60	50	50	50	50	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진		-	-
임기내	2018년	초등학교 주변 단속CCTV설치 8개소, 어린이보호구역 안전시설 강화 5개소, 초등학교 보도설치 4개소	100%
	2019년	어린이보호구역 내 단속CCTV설치 8개소, 어린이보호구역 안전시설 확충 및 정비 5개소	100%
	2020년	어린이보호구역 내 단속CCTV설치 8개소, 어린이보호구역 안전시설 확충 및 정비 5개소	100%
	2021년	어린이보호구역 내 단속CCTV설치 8개소, 어린이보호구역 안전시설 확충 및 정비 5개소	100%
	2022년	어린이보호구역 내 단속CCTV설치 8개소, 어린이보호구역 안전시설 확충 및 정비 5개소	100%
임 기 후		-	-

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 해당 없음

○ 대  책

- 해당 없음

□ 기대효과

○ 어린이 보호구역 내 교통사고 획기적 감소 및 안전한 통학로 제공

관리번호	7-6	공약명	엄마와 함께하는 스포츠 활동 -고성동 다목적 실내체육관 건립-
사업구분	임기 내 완료	추진부서	기획조정실장 장원수 / 정책평가팀장 신대호 / 주무관 강방록(☎665-2104)

□ 추진목표

○ 시민운동장 복합스포츠 타운 조성사업의 일환으로 다목적 실내체육관 건립

○ 배드민턴, 농구, 핸드볼 등 다종목 경기장으로 활용 및 기존 시민체육관 시설과 차별화된 기능 수행

○ 가족이 함께 할 수 있는 다양한 체육 프로그램 운영

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 다목적 실내체육관 건립

○ 사업위치 : 북구 고성동3가 2(시민운동장 내)

○ 사업규모 : 지하1층 / 지상4층, 연멱적 5,000㎡

○ 사업내용 : 다목적 실내체육관 건립 및 기타 소공원 조성 등

○ 사 업 비 : 190억원

□ 현재 추진 상황

○ 2017. 4월 : 설계공모 공고

○ 2018. 1월 : 설계용역 착수

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
계	19,000	800	1,220	11,980	5,000	-	-	-
국비	5,700	300	1,220	4,180	-	-	-	-
시비	13,300	500	-	7,800	5,000	-	-	-
구비	-	-	-	-	-	-	-	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진		다목적 실내체육관 건립 설계용역 착수
임기내	2018년	설계용역 완료 및 조경공사 착공 및 준공	25
	2019년	건축공사 착공 및 공사 시행	50
	2020년	다목적 실내체육관 준공 및 시설 운영	100
	2021년
	2022년
임 기 후

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 대구시 추진 사업으로 설계 용역 결과 및 예산 확보 결과에 따라 사업 기간 조정 가능성 있음

○ 대  책

- 계획대로 추진할 수 있도록 대구시와 지속적으로 협의

□ 기대효과

○ 다목적 체육센터 준공 후 다양한 체육시설 이용 및 체육 프로그램 운영을 통해 지역주민의 여가선용 인프라 구축

관리번호	7-7	공약명	유아 장난감 도서관 운영
사업구분	임기 내 완료	추진부서	가족복지과장 위연선 / 팀장 조귀애 / 주무관 우성준(☎665-2530)

□ 추진목표

○ 2019년~2022년 유아 장난감 도서관 1개소 이상 운영(직접운영 또는 위탁)

□ 사업개요

○ 시설규모 : 30평 ~ 50평 정도(대여 공간, 세척 공간)

○ 주요시설 : 장난감 · 도서 전시실, 세척실, 대여 데크 공간 등

○ 소요예산 : 550백만원 정도

○ 이용대상 : 북구에 거주하는 만 5세 이하 영유아 학부모

○ 운영방법 : 연회비 납부 후 회원제 운영

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
계	550	-	-	250	100	100	100	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-
구비	550	-	-	250	100	100	100	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진
임기내	2018년
	2019년	유아 장난감 도서관 조성 (장난감 전시실 확보, 장난감·도서 구입, 세척기계 구입 등)	80%
	2020년	장난감 도서관 관리 운영	100%
	2021년	장난감 도서관 관리 운영	100%
	2022년	장난감 도서관 관리 운영 및 추가 조성 검토	100%
임 기 후

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 북구 영유아 보육에 관한 조례를 제정하여 추진 근거 마련

- 장난감 도서관 운영 공간 확보(직접운영 또는 위탁)

- 시설비, 구축비(장난감·도서·세척기계·기자재 구입 등), 운영비 등 구비 확보

○ 대  책

- 관내 아파트 주민공동시설 내 유휴 공간 무상임대

- 동 주민센터 및 신축 작은 도서관에 운영 공간 확보

- 민간 건물 임대 또는 사회복지법인에 운영 위탁

□ 기대효과

○ 영유아의 성장 발달에 적합한 장난감 및 도서를 대여함으로써 육아비용 경감

○ 양질의 보육서비스 제공을 통한 주민 만족도 제고

관리번호	7-8	공약명	어린이급식관리지원센터 운영
사업구분	임기 내 완료 (지속추진)	추진부서	위생과장 최윤식 / 팀장 정미숙 / 주무관 김가영(☎665-2763)

□ 추진목표

○ 어린이 성장 발달에 적합한 균형 잡힌 영양식단을 제안하고 식자재의 위생적인 관리를 통하여 양질의 급식체계를 형성하고 건전한 식생활 교육을 통한 어린이의 균형성장과 위생적인 급식체계 추진

□ 사업개요

○ 북구 어린이급식관리지원센터 현황

- 사 업 비 : 300,000천원(국비 150,000 / 시비 75,000 / 구비 75,000)

- 위탁기관 : 경북대학교 산학협력단

- 센터위치 : 경북대동창회관 501호(대학로 95)

- 센터조직 : 1개반 7명 (센터장1, 팀장1, 팀원5)

○ 북구 강북 어린이급식관리지원센터 현황

- 사 업 비 : 400,000천원(국비 200,000 / 시비 100,000 / 구비 100,000)

- 위탁기관 : 대구과학대학교 산학협력단

- 센터위치 : 대구과학대학교 창업보육센터 내 108호

- 센터조직 : 1개반 9명 (센터장1, 팀장2, 팀원6)

□ 현재 추진 상황

○ 계속 추진사업으로 2센터(북구 어린이급식관리지원센터, 북구 강북 어린이급식관리지원센터)를 운영중

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
계	3,500	-	700	700	700	700	700	-
국비	1,750	-	350	350	350	350	350	-
시비	875	-	175	175	175	175	175	-
구비	875	-	175	175	175	175	175	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진
임기내	2018년	북구 강북 어린이급식관리지원센터 계약만료에 따른 재위탁 또는 수탁업체 변경으로 지속적 업무 추진	100%
	2019년	북구 어린이급식관리지원센터 계약만료에 따른 재위탁 또는 수탁업체 변경으로 지속적 업무 추진	100%
	2020년	어린이 급식소 등록률 확대로 지원 확충	100%
	2021년	어린이 급식소 등록률 확대로 지원 확충	100%
	2022년	어린이 급식소 등록률 확대로 지원 확충	100%
임 기 후		계속 사업 추진으로 어린이 급식소 지원

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 식약처 가이드라인 센터사업 규모별 관리 급식소 충족시는 국‧시비 예산비율에 따른 구비부담 증가 요인이 예상됨

- 어린이 급식소의 등록이 자율이라 센터 등록을 거부하는 급식소가 발생함

○ 대  책

- 어린이급식관리지원센터 홍보 및 등록급식소의 지원을 통하여 등록률을 높임

□ 기대효과

○ 어린이에게 제공되는 식품의 안전과 영양수준을 개선함으로 어린이 건강증진에 기여

관리번호	7-9	공약명	교육경비 보조금 지급
사업구분	임기 내 완료 (지속추진)	추진부서	평생교육과장 최순남/ 팀장 김미예/ 주무관 임선웅(☎2182)

□ 추진목표

○ 관내 학교의 교육환경개선 및 교육경쟁력 강화

○ 우수 인재양성을 통한 명품 교육도시 조성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018년 ~ 계속

○ 추진대상 : 관내 78개 초 ․ 중 ․ 고등학교 및 특수학교

○ 추진내용 : 관내 고등학교 이하 각급 학교에 교육경비보조금 지원

○ 추진방법 : 교육경비보조금 심의위원회 심의를 통해 평가지표 및 지원대상 학교 결정

□ 현재 추진 상황

○ 2018년 지원내역 : 강북고등학교 외 67개교, 999,854천원 지원

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
계	5,450	-	1,000	1,000	1,100	1,150	1,200	-
국비	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-
구비	5,450	-	1,000	1,000	1,100	1,150	1,200	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진
임기내	2018년	교육경비보조금 지원(대상 : 초・중・고 78개교)	100
	2019년	교육경비보조금 지원(대상 : 초・중・고 78개교)	100
	2020년	교육경비보조금 지원(대상 : 초・중・고 78개교)	100
	2021년	교육경비보조금 지원(대상 : 초・중・고 78개교)	100
	2022년	교육경비보조금 지원(대상 : 초・중・고 78개교)	100
임 기 후

□ 문제점 및 대책

○ 관내 고등학교이하 각급 학교에서는 열악한 교육환경 개선을 위해 교육경비
보조금 지원 확대를 요구하고 있어, 지속적인 예산 증액이 필요함

□ 기대효과

○ 관내 학교의 교육환경 개선과 교육경쟁력 강화를 통해 미래 인재를 양성

○ 명품 교육도시 조성으로 교육에 대한 주민만족도 제고

관리번호	7-10	공약명	학교 급식 안전먹거리 지원
사업구분	임기 내 완료 (지속추진)	추진부서	평생교육과장 최순남 / 팀장 김미예 / 주무관 김수정(☎665-2184)

□ 추진목표

○ 우수 식재료를 사용한 양질의 학교급식 제공으로 성장기 학생들의 건강증진 도모

□ 사업개요

○ 지원대상 : 관내 초등학교 38개교

○ 지원일수 : 190일 정도

○ 지원단가 : 1식당 129원 정도

○ 지원학생 수 : 22,621명

○ 지원학교 선정방법

- 대구시에서(시 교육청과 협의) 지원학교 및 지원금액 선정(학교별 차등 지원)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
계	2,208	-	552	552	552	552	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	1,104	-	276	276	276	276	-	-
구비	1,104	-	276	276	276	276	-	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진
임기내	2018년	관내 초등학교 우수식재료 구입비 전부(일부) 지원 : 38개교	100
	2019년	관내 초등학교 우수식재료 구입비 전부(일부) 지원 : 38개교	100
	2020년	관내 초등학교 우수식재료 구입비 전부(일부) 지원 : 38개교	100
	2021년	관내 초등학교 우수식재료 구입비 전부(일부) 지원 : 38개교	100
	2022년	관내 초등학교 우수식재료 구입비 전부(일부) 지원 : 38개교	100
임 기 후

□ 문제점 및 대책 : 해당없음

□ 기대효과

○ 친환경 우수 식재료 제공으로 학교급식의 질을 높여 성장기 학생들의 건전한
심신발달을 도모하고 식재료 소비촉진으로 지역경제 활성화에 기여

관리번호	7-11	공약명	영·유아 및 청소년 교육·문화 프로그램 운영
사업구분	임기 내 완료 (지속추진)	추진부서	평생교육과장 최순남 / 팀장 이경주 / 주무관 우영규(☎665-2185)

□ 추진목표

○ 영유아의 발달 상황에 맞는 음악, 체육, 인지 교육프로그램 운영

○ 청소년의 특기 적성 프로그램 및 진로탐색에 적합한 다양한 프로그램 개발 운영

○ 취약계층 청소년 방과 후 아카데미 운영

□ 사업개요

○ 위 치 : 북구 검단로 71-17(북구 청소년회관)

○ 내 용 : 음악, 미술, 체육, 논술, 과학, 공예 프로그램 등 운영

○ 운 영 : 청소년 방과 후 아카데미, 영 · 유아 및 청소년 교육 · 문화프로그램 운영

□ 현재 추진 상황

○ 영 · 유아 및 청소년 교육 · 문화프로그램 다수 운영

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
계	1,016	-	252	252	256	256	-	-
국비	508	-	126	126	128	128	-	-
시비	254	-	63	63	64	64	-	-
구비	254	-	63	63	64	64	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
임기내	2018년	청소년 방과 후 아카데미 운영 : 2개반 운영 영유아 프로그램 운영 : 37개 강좌 56개반 청소년 프로그램 운영 : 63개 강좌 94개반	100
	2019년	청소년 방과 후 아카데미 운영 : 2개반 운영 영유아 프로그램 운영 : 37개 강좌 56개반 청소년 프로그램 운영 : 63개 강좌 94개반	100
	2020년	청소년 방과 후 아카데미 운영 : 3개반 운영 영유아 프로그램 운영 : 40개 강좌 60개반 청소년 프로그램 운영 : 65개 강좌 98개반	100
	2021년	청소년 방과 후 아카데미 운영 : 3개반 운영 영유아 프로그램 운영 : 40개 강좌 60개반 청소년 프로그램 운영 : 65개 강좌 98개반	100

□ 문제점 및 대책 : 해당없음

□ 기대효과

○ 영 · 유아, 청소년의 교육 · 문화체험 기회 확대를 통한 전인적 인재육성

○ 저소득 청소년의 프로그램 참여 접근성 향상으로 정서적, 사회적 발달에 긍정적 영향