관리번호	1-1-1	공약명	동화천 재해예방사업
사업구분	임기내 완료	추진부서	건설과장 홍승용 / 팀장 전명진 / 주무관 김부식(☎665-2612)

□ 추진목표

○ 치수 · 이수 · 생태 기능 증진

○ 지속적인 하천 유지용수 공급으로 기본 생태계 보호와 생물의 다양성 확보

○ 주민 여가를 즐길 수 있는 친수 공간 제공

□ 사업개요

○ 사업위치 : 북구 동 · 서변동 일원

○ 규    모 : 하천정비 3.42km, 유지용수 1.4km

○ 사업기간 : 2017. 1. ~ 2020. 12.

○ 총사업비 : 14,700백만원

□ 현재 추진 상황

○ 2017.  3. : 용역착수

○ 2017.  8. : 주민설명회 개최(1차)

○ 2017.  9. : 계획(안) 작성

○ 2017. 10. : 주민설명회 개최(2차)

○ 2018.  2. : 지방청협의(최종안) 및 최종설계 검토

○ 2018.  5. : 총사업비 결정[14,700백만원(국50%/시25%/구25%)]

○ 2018.  7. : 주민설명회 개최(3차)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
계	14,700	300	1,200	6,600	6,600	-	-	-
국비	7,350	150	600	3,300	3,300	-	-	-
시비	3,675	75	300	1,650	1,650	-	-	-
구비	3,675	75	300	1,650	1,650	-	-	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진
임기내	2018년	실시설계 완료 및 공사 착공	20
	2019년	동화천 재해예방사업 공사 시행	60
	2020년	동화천 재해예방사업 공사 준공	100
	2021년
	2022년
임 기 후

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 매칭펀드 방식(구비25% 확보)으로 추진됨에 따라 구비 미확보 시 사업추진이 어려움

○ 대  책

- 차질 없는 구비(25%) 확보 필요

□ 기대효과

○ 도심하천의 치수, 이수 기능의 증진으로 홍수예방

○ 하천 유지수 공급으로 다양한 생물이 서식하는 생태하천 조성

○ 주민들에게 여가를 즐길 수 있는 친수 공간 제공과 더불어, 아름다운 하천을 조성