관리번호	1-1-2	공약명	팔거천 재해예방사업
사업구분	임기내 완료	추진부서	건설과장 홍승용 / 팀장 전명진 / 주무관 김부식(☎665-2614)

□ 추진목표

○ 치수 · 이수 · 생태 기능 증진

○ 지속적인 하천 유지용수 공급으로 기본 생태계 보호와 생물의 다양성 확보

○ 주민 여가를 즐길 수 있는 친수 공간 제공

□ 사업개요

○ 사업위치 : 대구광역시 북구 읍내동 ~ 태전동(대동교 ~ 매남교)

○ 규    모 : 하천정비 3.2km, 유지용수 관로 매설 7.46km

○ 사업기간 : 2015. 1. ~ 2020. 12.

○ 총사업비 : 23,792백만원

□ 현재 추진 상황

○ 2011. 6. : 고향의 강 사업 대상 선정(국토교통부 기본계획 수립)

○ 2015. 5. : 실시설계 용역 착수

○ 2016. 5. : 주민설명회(1차) 개최

○ 2016. 9. : 주민설명회(2차) 개최

○ 2016. 12. ~ 2017. 8. : 설계경제성 검토 등 관련 행정절차 이행

○ 2017. 8. : 조달청 계약 요청(2017. 10. 13. : 개찰)

○ 2017. 10. 31. : 공사(1차) 착공

○ 2018.  5. 15. : 공사(2차) 착공

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
계	23,792	4,124	3,800	8,000	7,868	-	-	-
국비	11,896	2,062	1,900	4,000	3,934	-	-	-
시비	5,948	1,031	950	2,000	1,967	-	-	-
구비	5,948	1,031	950	2,000	1,967	-	-	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진
임기내	2018년	팔거천 재해예방사업 1차공사 완료	20
	2019년	팔거천 재해예방사업 2차공사 완료	50
	2020년	팔거천 재해예방사업 공사 준공	100
	2021년
	2022년
임 기 후

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 매칭펀드 방식(구비25% 확보)으로 추진됨에 따라 구비 미확보 시 사업추진이 어려움

○ 대  책

- 차질 없는 구비(25%) 확보 필요

□ 기대효과

○ 도심하천의 치수, 이수 기능의 증진으로 홍수예방

○ 하천 유지수 공급으로 다양한 생물이 서식하는 생태하천 조성

○ 주민들에게 여가를 즐길 수 있는 친수 공간 제공과 더불어, 아름다운 하천을 조성