관리번호	1-2	공약명	서리지 수변공원 관광메카 조성
사업구분	임기내 착수	추진부서	공원녹지과장 이재수 / 공원팀장 김선혜 / 주무관 김정욱(☎665-2864)

□ 추진목표

○ 서리지 일원에 도심 친수공간 조성 및 생태녹지 공간 확충으로 시민들에게 힐링 및 생태 체험 장소를 제공

○ 현재 추진중인 서리지 수변생태공원 조성사업과 연계하여 시너지 효과를 낼 수 있는 모험시설과 가족체험형 시설을 도입을 위한 국가 공모사업에 하여 서리지 수변생태공원을 활성화 하고자 함

□ 사업개요

○ 위    치 : 대구 북구 동호동 73번지 서리지 일원

○ 사업규모 : A=89,673㎡

- 산책로, 가드닝체험장, 암석원, 잔디마당, 숲놀이터, 생태숲, 수변데크 조성 등

○ 사업기간 : 2015~2020년(1단계 ‘15∼‘18, 2단계 ’19∼‘20)

○ 총사업비 : 12,959백만원(국비 2,629/ 시비 4,190/ 구비 6,140)

○ 중앙정부 공모 사업 추진

- 사업내용 짚라인 및 야영장 설치

- 사업규모 : 짚라인(L=350m정도), 야영장(A=10,000㎡정도)

- 사 업 비 : 60억원(짚라인 10억정도, 야영장 50억정도)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
계	18,959	8,901	2,458	800	800		6,000
국비	8,629	1,200	1,029		400		6,000
시비	4,190	2,761	1,029		400
구비	6,140	4,940	400	800				-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 2022년 60억은 공모사업 선정 후 예산확보 가능

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진		기본구상용역 시행(서리지 수변생태공원 활성화)
임기내	2018년	1단계 수변생태공원 기반시설 공사 완료	30
	2019년	2단계 공사 착공 및 준공 수변데크 및 관찰 전망대 조성, 초화류 식재	70
	2020년
	2021년	도시관리계획 (변경)결정 용역 실시	80
	2022년	환경문화 공모사업 응모(짚라인, 야영장 설치 등)	100
임 기 후

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 짚라인 및 야영장 사업비 미확보

- 야영장 조성 부지 확보를 위해 도시관리계획 변경 후 사업 시행 가능

○ 대  책

- 중앙정부 공모사업에 신청하여 사업비 확보 후 추진

- 도시관리계획 변경 결정 추진

□ 기대효과

○ 서리지 수변생태공원 활성화를 통해 서리지가 대구의 대표적인 관광명소로 자리매김

○ 휴일 확대, 가족단위 관광에 따른 정부의 관광 활성화 정책에 부응

○ 모험·체험 등 청소년들에 대한 무한한 도전정신 부여