관리번호	1-3	공약명	금호강과 하중도 친수적 문화휴식 공간조성
사업구분	임기내 기반조성	추진부서	관광자원개발과장 고진호 / 금호강개발팀장 서송학 / 주무관 박창희(☎665-2254)

□ 추진목표

○ 휴식과 충전의 자연 친화적인 공간 조성

○ 친환경 생태정책이 공존하는 새로운 금호강변 어메니티 구축

○ 사람과 새로운 문화를 끌어오는 차별화된 공간 조성

□ 사업개요

○ 사업면적 : A=245,000㎡

○ 사업기간 : 2018년 ∼ 2022년

○ 총사업비 : 178억원

○ 사업내용

- 하중도 개발 : 진입보도교, 전망대, 진출입로, 상징조형물, 조명등,
편의시설 설치 및 주차장 확충 등

- 신천프로젝트 : 신천수변생태공원, 침산낙조체험마당

□ 현재 추진 상황

○ 신천개발 기본계획 수립 : 2016. 11월

○ 금호강 하중도 명소화사업 기본계획 수립 : 2017. 9월

○ 하중도 단위사업별 하천점용허가 : 부산지방국토관리청과 협의중

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
재원별	17,800	-	4,903	4,497	2,800	2,800	2,800	-
국비	4,200	-	-	-	1,400	1,400	1,400	-
시비	13,600	-	4,903	4,497	1,400	1,400	1,400	-
구비	-	-	-	-	-	-	-	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진		기본계획 수립
임기내	2018년	· 하중도개발 단위사업별 하천점용허가 : 협의중(부산국토청) · 신천 역사 · 문화 관광자원화사업(침산낙조체험마당) 기본계획수립 용역	20
	2019년	· 신천 수변생태공원 실시설계 수립(용역비 2억 정도) · 하중도 진출입로, 보도교, 전망대 등 공사 착공	40
	2020년	· 침산낙조 체험마당 및 신천 수변생태공원 설계 용역	50
	2021년	· 하중도 진출입로, 보도교, 전망대 등 공사 준공	80
	2022년	· 침산낙조 체험마당 및 신천 수변생태공원 공사 착공	100
임 기 후		· 침산낙조 체험마당 및 신천 수변생태공원 공사 준공

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 신천개발 프로젝트의 경우 재원조달이 관건이며, 하중도의 경우 부산 지방국토관리청 하천점용 허가 관련 협의가 최우선 과제임

○ 대  책

- 금호강 북구 르네상스 시대를 맞이하여 휴식과 충전을 위한 자연친화적 수변공간 조성을 위하여 재원확보에 최선을 다하고, 또한 하천점용 허가 기준에 맞도록 실시설계 용역시 부산국토청과 원활한 협의가 요구됨

□ 기대효과

○ 산업근대화 시대의 부정의 대명사에서 희망의 아이콘으로 북구 금호강 르네상스를 맞이하여 주민과 관광객들에게 자연친화적 휴식공간 및 볼거리 제공