관리번호	2-1	공약명	칠곡3지구 문화예술거리 조성
사업구분	임기내 완료	추진부서	관광자원개발과장 고진호 / 관광진흥팀장 권태승 / 주무관 이원익(☎665-4322)

□ 추진목표

○ 칠곡3지구 중심상업지구 일대를 지역특성을 고려한 통합적 문화예술 거리로 조성하여 침체된 지역 상권 활성화에 기여

○ 오랫동안 방치되어 범죄발생률이 지속적으로 증가하고 있는 보행자 전용도로에 대한 거리환경개선을 통한 범죄예방과 테마거리 조성

□ 사업개요

○ 사업구간 : 칠곡3지구 중심상업지구 보행자전용도로

○ 사업규모 : B=12m, L=720m

○ 사업기간 : 2017년 ~ 2019년

○ 소요예산 : 30억원 정도

○ 거 리 명 : Blue Velvet Street(블루벨벳 거리)

□ 현재 추진 상황

○ 2016. 11 ~ 2017. 1월 : 문화예술거리 기본구상 연구용역

○ 2017.  6월 : 제1차 추가경정예산 편성(구비 10억원)

○ 2017. 9. 12 : 문화예술거리 조성 주민설명회 개최

○ 2017. 9. 29 : 행정안전부 특별교부세 10억 확보

○ 2018. 4월 ~ 10월 : 기본 및 실시설계 용역

○ 2018. 7월 ~ 8월 : 주민아카데미 운영(5회)

□ 연도별 투자계획                                    (단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
재원별	3,000	2,000	1,000	-	-	-	-	-
국비(특교세)	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-
시비(특교금)	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-
구비	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진		◦ 칠곡3지구 문화예술거리 조성 기본구상 용역(2017년)
임기내	2018년	◦ 기본 및 실시설계 용역(진행중)	30
	2019년	◦디자인거리, 공감마당 조성, 셉테드시스템 도입, 가로간판 정비, 경관가로조명 ◦동천육교 랜드마크, 문화커뮤니티센터, 휴게시설, 키오스크 시스템	100
	2020년
	2021년
	2022년
임 기 후

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 대구시 최초 주민주도 경관협정 사업으로 추진하고 있으며, 경관협정에 대한 주민들의 관심 필요

○ 대  책

- 주민아카데미 운영 및 주민공청회 개최로 거리조성과 경과협정에 대한 주민들의 관심을 증대시킴

□ 기대효과

○ 지역 상업지구 주변을 문화와 감성의 예술거리 브랜드화하여 새로운 젊음의 거리 조성을 통한 상가활성화