관리번호	2-5-2	공약명	옥산로 테마거리 조성
사업구분	임기내 완료	추진부서	관광자원개발과장 고진호 / 도시디자인팀장 김창학 / 주무관 이기진(☎665-2332)

□ 추진목표

○ 도시철도3호선 및 삼성창조캠퍼스 등으로 높은 성장 잠재력을 지닌 옥산로 및 호암로 일대를 명품거리로 조성.

○ 근대산업역사, 미래산업비전, 문화예술 공연, 스포츠 등 지역을 대표하는 테마에 맞는 공공디자인을 거리에 입혀 관광자원화 함으로써 지역경제 활성화 및 도시브랜드 가치 향상.

□ 사업개요

○ 위    치 : 옥산로 ~ 호암로 (북구청네거리 ~ 삼성창조캠퍼스)

○ 규    모 : B=30m, L=1.3Km

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2021년

○ 사 업 비 : 37억원정도

□ 현재 추진 상황

○ 옥산로 테마거리 조성사업 계획 수립 : 2016. 8. 11.

○ 대구시 창의도시재생지원센터 컨설팅 개최 : 2016. 9. 7.

○ 옥산로 테마거리 조성사업 기본구상 연구용역 시행 : 2017. 2. 10 ~ 7. 14.

○ 옥산로 테마거리 기본 및 실시설계 용역 착수 : 2018. 4. 30.

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
계	3,700	-	150	570	1,680	1,300	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	3,550	-	-	570	1,680	1,300	-	-
구비	150	-	150	-	-	-	-	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진		◦ 옥산로 교통영향분석 용역(2016년) ◦ 옥산로 테마거리 조성 기본구상 용역(2017년)
임기내	2018년	◦ 기본 및 실시설계 용역(진행중)	30
	2019년	◦ 스포츠거리 조성 ◦ 스마트글라스 설치 ◦ 스토리담장 조성 ◦ 로봇, 인공지능기기 설치	50
	2020년	◦ 미디어박스 설치 ◦ 상징 조형물 설치 및 주변경관 개선 ◦ 남침산네거리 모퉁이 인도확장 ◦ 오페라하우스 주변 테마공간 조성	80
	2021년	◦ 고성성당 테마공간 조성 ◦ 인도확장(BAY형 공간 조성) ◦ 아이디어 보도블록 포장 ◦ 전신주 지중화 사업 ◦ 벚꽃길 진입부 상징조형물 설치 ◦ 콘텐츠 활성화	100
	2022년	공사 준공 및 테마거리 활성화
임 기 후

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 테마거리 조성사업은 대규모 예산이 투입될 것으로 예상

- 어려운 구 재정 여건과 사업의 규모를 감안할 때 區 단위의 사업추진에 어려움 있음

○ 대  책

- 근대역사와 문화예술이 살아 숨쉬고 볼거리․먹거리․즐길거리 등 성장 잠재력을 충분히 가지고 있는 옥산로~호암로 거리는 향후 중앙대로와 함께 대구를 대표하는 메인거리가 될 것이므로, 대구시장 공약과 연계사업으로 조성 추진

□ 기대효과

○ 역사와 문화적 가치가 높은 창조문화 거리 조성으로 지역경제활성화, 도시브랜드 가치 향상 및 주민들의 삶의 질 향상