관리번호	3-3	공약명	태전 화물자동차 공영차고지 조성사업
사업구분	임기내 완료	추진부서	교통과장 박쌍도 / 팀장 이숙희(☎665-3041)

□ 추진목표

○ 영세 화물운송업자의 차고지 부족난 해소

○ 지역 화물 물동량의 원활한 수송으로 물류경쟁력의 강화

○ 도로 및 주거지역내 불법주차 완화로 쾌적한 주거환경 조성

□ 사업개요

○ 위치/면적 : 태전동 43번지 일원 / 34,093㎡

○ 사업기간 : 2019년 ∼ 2022년(4년)

○ 주요시설 : 주차면 409면, 관리동, 정비동 등

○ 총사업비 : 300억원(국비 210, 시비 60, 구비 30)

□ 현재 추진 상황

○ 화물자동차 공영차고지 조성 건의(시→구) : 2015. 5. 4

○ 시장, 구청장·군수 정책협의회에서 건의 : 2016. 2. 25

○ 시장, 구청장·군수 정책협의회 결과 수용 : 2016. 3. 15

※태전동 부지 적정지로 판단 시구 재정 감안 2018년 이후 추진

○ 타당성조사 및 기본계획 용역 완료 : 2017. 7. 18

○ 지방재정투자 중앙심사 통과 : 2017. 11. 13

○ 2018∼2022 중기지방제정계획 반영 : 2017. 12. 13

○ 2019년 지역발전특별회계 세출예산 신청 : 2018. 3. 5

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
계	30,000	60	-	540	9,800	9,800	9,800	-
국비	21,000	-	-	400	6,860	6,860	6,880	-
시비	6,000	-	-	100	1,960	1,960	1,980	-
구비	3,000	60	-	40	980	980	940	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진		· 타당성조사 및 기본계획 용역 완료 · 지방재정투자 중앙심사 통과 · 2018∼2022 중기지방재정계획 반영
임기내	2018년	· 국비확보	10
	2019년	· GB관리계획 수립 · 도시관리계획 변경 · 기본 및 실시설계 용역	30
	2020년	· 토지감정 및 보상	60
	2021년	· 공사착공	90
	2022년	· 공사준공	100
임 기 후

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 사업비 300억원으로 국비(210억) 확보에 어려움이 있음

○ 대  책

- 대구시 예산부서, 택시물류과 담당자와 기재부를 방문 사업의 필요성을 설명하는 등 국비 확보에 노력

□ 기대효과

○ 주택가 불법 주·박차 해결로 주민불편 해소 및 도시환경 개선

○ 화물자동차 종사자 편의시설 제공으로 안전운행 도모

○ 물류비용 절감 등 지역 화물운송 산업 발전에 기여