관리번호	4-2	공약명	금호워터폴리스 조성틀 구축 -금호워터폴리스 진입도로건설-
사업구분	임기내 착수	추진부서	건설과장 홍승용/ 팀장 구성호 / 주무관 서정현(☎665-2882)

□ 추진목표

○ 금호워터폴리스 산업단지의 개발로 산업단지 내 물류의 활발한 이동과 주변 지역개발 촉진을 위해 도로개설 필요

○ 진입도로의 개설로 인근 산업단지와 엑스코·유통단지 등과의 물류 이동 원활

○ 금호강 수변공원과 단지 간 전면적 연결로 친환경 복합단지로 개발 가능

□ 사업개요

○ 위  치 : 신천동로 종점 ∼ 동구 금호강변도로

○ 기  간 : 2015년 ∼ 2023년

○ 개  요 : 도로건설 폭 25m(4차로), 연장 2.9km

(지하차도 1개소, 교량 1개소, 램프교 1개소)

○ 사업비 : 1,076억원(국비 541, 시비 535)

□ 현재 추진 상황

○ '17. 8. ∼ '18.  6. : 기재부(KDI) 예비타당성조사 진행

○ '18.  6. : 기재부(KDI) 예비타당성조사 통과

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
재원별	1,076	-	-	15	1,061	-	-	-
국비	541	-	-	15	526	-	-	-
시비	535	-	-	-	535	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진		· 상반기 산단진입로 예타대상지 선정 신청(市→국토부) · 하반기 예타대상사업 최종선정(기재부) · 기재부(KDI) 예비타당성조사 진행
임기내	2018년	· 2018. 6월 : 예비타당성조사 통과	10
	2019년	· 실시설계용역 실시	30
	2020년	· 공사착공	60
	2021년 ~ 2022년	· 공사시행	100
임 기 후		· 공사준공

□ 문제점 및 대책

○ 대  책

- 산업단지(금호워터폴리스) 개발계획과 연계추진

- 예타통과에 따라 원활한 사업 추진을 위해 관련부서 긴밀한 협조

□ 기대효과

○ 금호워터폴리스 진입도로 개설로 산업단지 개발사업의 시너지 효과 극대화

○ 인근 산단과 연계한 산업벨트 구축으로 지역경제 활성화 기여