관리번호	4-4-1	공약명	유통단지 활성화를 위한 엑스코 확장
사업구분	임기내 완료	추진부서	일자리경제과장 최병욱 / 팀장 김주영 / 주무관 주지만(☎665-2648)

□ 추진목표

○ 종합유통단지 및 MICE 산업의 활성화 방안 발굴을 통한 경쟁력 제고

○ 금호워터폴리스 복합산업단지 개발과 연계하여 시너지 효과 극대화

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 엑스코 제2전시장 확장공사

○ 기    간 : 2016. 12. ~ 2021. 6.

○ 위    치 : 북구 산격2동 1706번지 일원 (엑스코 옆 기업관 부지)

○ 사업내용 : 부지 37천㎡, 건축 20천㎡(전시면적 15,000㎡)정도

○ 사업예산 : 1,895억(중투심 2021억, 전액 지방비)

- 시    비 : 960억원 (일반 500, 지방채 460)

- 도시공사 : 935억원 (사업준공 후 5년간 분할 상환)

□ 현재 추진 상황

○ 엑스코 확장 전시시설 부지 선정 : ’16.12월

○ 제2전시장 건립 사전협의 완료 (산업통상자원부) : ’17. 4월

○ 행안부 타당성조사 완료(지방행정연구원) : ’17. 5 ~ ’18. 1월

○ 사업 추진계획 수립 : ’17. 7월

○ 공유재산관리계획 의회승인 : ’17. 10월

○ 계획 설계추진(엑스코) : ’17. 11 ~ ’18. 3월

○ 지구단위계획변경 완료 : ’17. 12월

○ 타당성조사 용역 및 행안부 중앙투자심사 신청 : ’17. 5~ ’18. 1

○ 실시계획 공람공고 및 주민의견 청취  : ’18. 2.12~3.6

(대구광역시 공고 제2018-142호)

○ 엑스코 제2전시장 건립 주민설명회 개최

- 일시 : 2.28(수) 14:00 / 장소 : 엑스코3층 320호 회의실

※ 2018. 2.27일 IGU(국제가스연맹)에 전시장 계획도면 제출

○ 엑스코 제2전시장 건립 대행사업 투자타당성 검토(안) : '18.3.26

○ 엑스코 제2전시장 건립 계획설계 용역 완료

- 용역기간 : 2017. 11.27. ~ 2018. 3. 26

- 용 역 비 : 금253,000천원 / 발주청 : (주)엑스코

- (주)서한종합건축사사무소

○ 도시계획시설(문화시설)사업 실시계획 작성고시 : '18.3.30

(대고 제2018-64호)

○ 지방재정투자사업 중앙심사 완료(행안부) : ’18. 4. 4

○ 보상계획 열람공고(동아일보) 및 통지 : ’18. 4.18 ~ 5.10

○ 대구도시공사 대행사업 협약서 법률검토 및 통보 : ’18. 4. 17

○ 보상협의회 구성(15인, 5.30) 및 개최(대구도시공사)

- 일시 : 6. 4 (월) 14:00~, 장소 : 엑스코 320호

- 토지소유자등 관계인10, 감정평가사2, 대구시2, 도시공사1

○ 엑스코 제2전시장 건립 단지조성 설계용역 착수

- 용역기간 : 2018. 5. 2 ~ 2019. 1. 26

- 용 역 비 : 금115,651천원

- (주)한백엔지니어링 대표 김의식 / 발주청 : 대구도시공사

○ 엑스코 제2전시장 건립공사 설계용역 착수보고회 개최 : ’18. 6.15

- 용역기간 : 2018. 5. 28 ~ 2. 21(270일)

- 용 역 비 : 금1,475,100천원

- (주)삼우종합건축사사무소 대표 박도권 / 발주청 : 건설본부

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분			연차별 소요예산(초기계획)
			기투자	2018년	2019년	2020년	2021년 이후
계		189,500	-	149,900	11,500	28,100	-
시비	일반	50,000	-	14,900	10,000	25,100	93,500
	지방채	46,000	-	46,000	-	-	-
민간 (대구도시공사)		93,500	-	89,000	1,500	3,000	△93,500

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진		- 엑스코 전시시설 확충 부지확정 엑스코 제2전시장 지구단위계획 변경 및 타당성 조사 추진	-
임기내	2018년	엑스코 제2전시장 확충을 위한 실시설계 및 교통영향평가등 각종 심의 추진 문화재 지표조사 추진 엑스코 제2전시장 확충을 위한 감정평가 및 협의보상	20
	2019년	엑스코 제2전시장 확충을 위한 실시설계 및 수용취득 엑스코 제2전시장확충을 위한 지장물 철거 및 단지조성 엑스코 제2전시장 건립 및 건축공사 발주 및 착공	50
	2020년	- 엑스코 제2전시장 건축공사 실시	80
	2021년	엑스코 제2전시장 내부시설 설치 및 시험운영	100

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 촉박한 사업추진 일정으로 보상과정 지체 시 사업에 차질 예상

○ 대  책

- 지주들과의 지속적인 상담 등 소통을 통해 협조 요청

□ 기대효과

○ EXCO 대구의 만성적인 전시면적 부족문제 해결을 통해 전시행사의 대형화와 국제행사 유치로 MICE산업 활성화

○ 국내외 산업전시 등을 통해 지역기업의 교역확대 및 산업구조의 고도화

○ 2021년 개최 예정인 세계가스총회의 성공적인 개최