관리번호	4-6	공약명	제3산업단지 재생사업 지속 추진
사업구분	임기내 기반조성	추진부서	일자리경제과장 최병욱 / 팀장 송미숙 / 주무관 서정구(☎665-2665)

□ 추진목표

○ 산업단지 내 기반시설 확충(도로, 공원, 주차장 등)

○ 기존업종과 유치 업종별 특성을 고려 전략사업구역 개발

○ 서대구공단과 공동개발추진을 위한 협조체계 유지(실무회의, 자문 등)

□ 사업개요

○ 사업면적 : A=1,685천㎡

○ 사업기간 : 2009∼2024

○ 총사업비 : 3,040억원(국비 1,520 시비 1,520)

※ 총사업비 반영(도로부문) : 2,343억원(국비 1,171 시비 1,172)

○ 사업내용 : 업종변경 및 기반시설 확충을 통한 도시형 산업단지로 재생

□ 현재 추진 상황

○ 2018.  4. : 기반시설(1단계) 사업 공사계약 의뢰(조달청)

- 도로확장 B=15~40m, L=3.5km / 신천대로 IC 1식

○ 2018.  7. : 노후산단 재생사업 활성화 방안 연구용역 시행(대경연)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
재원별	304,000	30,315	6,015	26,000	40,000	60,000	60,000	81,670
국비	152,000	16,315	1,850	13,000	20,000	30,000	30,000	40,835
시비	152,000	14,000	4,165	13,000	20,000	30,000	30,000	40,835

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진		기반시설확충 공사에 따른 용지 보상 블록별 추진위원회 구성을 통한 운영
임기내	2018년	기반시설(1단계) 사업 공사계약 의뢰(신천대로IC) 노후산단 재생사업 활성화 방안 연구용역 시행(대경연)	22
	2019년	- 기반시설(1단계, 10개노선 3.5km) 사업 시행, - 전략사업구역 사업시행자 지정 및 사업시행	60
	2020년
	2021년	- 기반시설(2단계, 24개노선 6.5km) 사업 및 전략사업 시행	100
	2022년
임 기 후		- 기반시설(3단계, 25개노선 7.8km) 사업 시행 - 민간개발(투자)사업 시행

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 제3산단 재생사업 개발 기대심리로 일부 편입토지 보상협의 지연

- 도심 내 산업단지로 지가가 높아 사업성이 낮음

○ 대  책

- 행정절차(수용재결, 공탁 등) 신속 진행 및 단계별 사업 착공

- 대경연 연구용역 시행으로 사업성 개선방안 마련 중

□ 기대효과

○ 체계적인 재정비를 통해 경쟁력 있는 도시공간 조성