관리번호	4-7	공약명	농수산물 도매시장 현대화
사업구분	임기내 착수	추진부서	일자리경제과장 최병욱 / 팀장 정승일 / 주무관 장효임(☎665-2670)

□ 추진목표

○ 물류 효율성 제고 : 노후시설 개선으로 유통환경 변화에 대응 물류 시스템 개선

○ 시급한 부족시설 우선 확충 : 인근 부지확장으로 물류공간 확대, 경매장 등 필요시설 확충

○ 공영 도매시장의 기능 강화 및 경쟁력 제고 : 생산자와 소비자를 위한 고객 서비스 시설 개선

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018~2023년

○ 소요예산 : 750억원 정도(국비 160/ 시비 590억원)

○ 세부추진내용

- 물류공간 확충 : 북부 화물터미널 및 인근 유휴부지 매입(17,300㎡)

- 교통체계 개선 : 확장부지 연결 교량 건설, 출입문(6문) 개설 등

- 필요시설 확충 : 경매장, 잔품처리장, 주차장(지상, 지하), 냉동창고, 편의시설 등

- 시설물 재정비 : 관련상가, 엽채류(상장, 비상장) 잔품처리장, 폐기물처리장 등

- 청정에너지 생산기지 구축 : 유휴공간(옥상 등) 태양광 설치

□ 향후 추진계획

○ 타당성 기본계획수립 용역 : 2018. 하반기

○ 공영도매시장 시설현대화사업 공모신청 : 2018. 하반기

○ 시설현대화사업 TF팀 편성․운영 : 2018. 7~8월

○ 기본 및 실시계획 수립 : 2018~2019년

○ 세부사업 시행 등 : 2019~2023년

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
계	75,000
국비
시비
구비
민간

※ 공모사업 신청 결과에 따라 재원별 사업비 결정

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 기획재정부와 농림축산식품부 간의 예산 협의 중으로 공모사업 신청이 지연되어 국비 조기 확보에 어려움이 있음.

○ 대  책

- 사업 추진을 위한 국비 확보노력 및 시비 확보 방안 마련

□ 기대효과

○ 도매시장의 공익적 기능과 역할에 충실하여 시장을 활성화하고 경쟁력 확보를 도모

○ 협소한 공간문제 및 불합리한 교통체계 등을 개선하여 도매시장을 이용하는
시민들에게 편의를 제공