관리번호	5-2	공약명	보훈회관, 노인종합복지관 건립
사업구분	임기내 완료	추진부서	과장 남창석 / 팀장 이무상(☎665-2513)

□ 추진목표

○ 보훈대상자에 대한 예우와 사기진작을 위하여 쾌적한 보훈단체 사무실 및 여가활동 공간 제공

○ (사)대한노인회 북구지회 기존건물의 노후와에 따른 쾌적한 공간제공과 어르신의 문화복지, 여가선용으로 건강한 노후생활 개선으로 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 위    치 : 북구 칠성남로 26길 27(칠성동2가)

○ 규    모 : 연면적 1,978.19㎡(지하1층, 지상5층)

○ 주요시설 : 보훈회관, 노인종합복지관, 산업문화관

□ 현재 추진 상황

○ 2018. 6. : 건축 설계 완료

○ 2018. 6. : 공사 입찰공고 및 계약

○ 2018. 7. : 공사 착공

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
계	5,065	600	-	4,234	-	-	-	-
국비	500	-	-	500	-	-	-	-
구비	1,365	-	-	1,365	-	-	-	-
구비(교부세)	600	600	-		-	-	-	-
구비(교부금)	2,000	-	-	2,000	-	-	-	-
도활사업비	600	-	-	600	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진		공사 입찰 및 계약
임기내	2018년	공사 착공	65
	2019년	공사 준공	100
	2020년
	2021년
	2022년
임 기 후

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 구비(13억 정도) 확보의 어려움이 예상됨

○ 대  책

- 대구시에 교부금 요청 방안 검토

□ 기대효과

○ 보훈단체 사무실 환경개선 및 집적화로 업무의 효율성 증대

○ 어르신의 문화복지 및 여가선용의 공간 제공으로 삶의 질 향상