관리번호	5-3	공약명	치매안심센터 건립 운영
사업구분	임기내 완료	추진부서	건강증진과장 이춘희 / 팀장 이명자 / 주무관 박지성(☎665-3224)

□ 추진목표

○ 치매안심센터 설치 기준에 부합하는 시설 배치(검진실, 교육실, 쉼터 등)

○ 안락하고 편안한 공간 조성으로 이용자들의 편의 증대

○ 치매관리사업의 지속적인 통합관리 서비스을 위한 치매인프라 구축

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2019. 3월

○ 위    치 : 보건복지센터 內 5층 / 구암건강생활지원센터

○ 규    모 : 775.18㎡

※ 보건복지센터 5층 : 651.18㎡, 구암건강생활지원센터 : 124㎡

○ 총사업비 : 1,163백만원(국80, 시14, 구6)

○ 사업내용 : 다양한 보건복지서비스 연계 및 맞춤형 관리를 위한 지역사회 기반시설 확충

□ 현재 추진 상황

○ 리모델링 공사 설계용역 실시 : 2018. 6. 28. ~ 9. 25.(90일간)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
계	1,163	-	1,163	-	-	-	-	-
국비	930	-	930	-	-	-	-	-
시비	163	-	163	-	-	-	-	-
구비	70	-	70	-	-	-	-	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진		-	-
임기내	2018년	‧ 리모델링 공사 설계 완료 : 2018. 9월 중 ‧ 구 일상감사 완료 : 2018. 10월 초 ‧ 시 계약심사 완료 : 2018. 11월 초 ‧ 공사 입찰 완료 : 2018. 12월 중	50
	2019년	‧ 공사 착공 : 2019. 1월 초 ‧ 공사 완공 : 2019. 3월	100

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 보건복지센터 내 북구어린이집 이전 지연에 따른 센터 완공 계획 변경

(’18. 11월 → ’19. 3월)

○ 대  책

- 관련 부서 협의 하에 센터 설립에 차질이 없도록 업무 추진

□ 기대효과

○ 급격히 증가하는 노령인구에 대응한 지역사회 인프라 구축으로 지속적인 치매예방 및 조기관리와 사회경제적 비용 절감