관리번호	7-1	공약명	금호강 가족 오토캠핑장 조성
사업구분	임기내 완료	추진부서	관광자원개발과장 고진호/ 금호강개발팀장 서송학/ 주무관 황보찬귀(☎665-2252)

□ 추진목표

○ 새로운 여가문화 트렌드를 고려하여 구민들의 만족도 높은 여가문화 서비스를 제공

○ 천혜의 자연환경을 갖추고 있는 금호강변 수변공간에 캠핑장 조성을 통해 다양한 볼거리 및 즐길거리를 제공

□ 사업개요

○ 사업위치/면적 : 검단동 458-4번지 일원 / A=9,940㎡

○ 사업기간 : 2018년 ∼ 2019년

○ 총사업비 : 10억

○ 사업내용 : 오토캠핑장, 잔디원, 초화류, 다목적광장, 휴게시설, 놀이시설,
화장실, 샤워실, 취사장, 관리동 등

□ 현재 추진 상황

○ 금호강 오토캠핑장 조성 기본계획 : 2017. 1월

○ 실시설계 용역 : 2018. 2. 9. ~ 5. 9.[용역중지(4.24) / 부산국토청 사전협의 이행]

○ 실시설계 디자인 및 설계용역 협의 : 2018. 5~7월

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
계	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-
국비	500	-	500	-	-	-	-	-
시비	250	-	250	-	-	-	-	-
구비	250	-	250	-	-	-	-	-
민간	-	-	-	--	--	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진		기본계획 수립
임기내	2018년	․ 2018. 8월 :하천점용 허가 신청(부산지방국토관리청) ․ 2018. 8월 : 공공디자인 심의요구(대구시) ․ 2018. 9월 : 일상감사 및 계약심사(감사실, 대구시) ․ 2018.10월 : 공사착공 ․ 2018.11월 : 캠핑장 운영조례 제정 및 예약시스템 설치 등	60
	2019년	․ 2019. 3월 : 공사준공 ․ 2019. 5월 : 오토캠핑장 개장	100
	2020년
	2021년
임 기 후

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 금호강 둔치에 조성되는 관계로 홍수 등 하천유지관리를 총괄하는 부산지방
국토관리청의 하천점용 허가 승인이 우선 과제임

○ 대  책

- 도심속 가까운 금호강 수변지역에 구민과 관광객을 위한 국민여가 캠핑장 조성이 원활히 이루어 지도록, 하천점용 허가 기준에 적합한 실시설계 용역을 통한 부산국토청과의 원활한 협의에 최선을 다하고자 함.

□ 기대효과

○ 자연친화적인 수변공간에서 만족도 높은 여가문화 서비스 제공

○ 생태공원 조성에 이어 북구의 관광인프라 구축에 기여