관리번호	1-1	공약명	도심융합특구 조성
사업구분	임기 내 기반조성	추진부서	혁신전략실장 권태승 / 미래개발팀장 박현종 / 주무관 이석범 (☎665-3902)

□ 추진목표

○ 도심에 기업과 인재가 모일 수 있도록 산업‧주거‧문화 등 우수 복합인프라를 갖춘 고밀도 혁신공간 조성

○ 주변지역 연계개발을 통해 도청터 및 주변지역에 새로운 기능을 부여, 도시기능 활성화 및 지속 가능한 발전 도모

□ 사업개요

○ 도심융합특구 조성

- 사업대상지 : 옛 경북도청터 – 삼성창조캠퍼스 – 경북대학교 연계

□ 총 부지면적 : 984,050㎡

옛 경북도청 부지		삼성창조캠퍼스		경북대학교
142,596㎡		90,199㎡		751,255㎡

- 사업기간 : 2021년 ~ 2030년

- 주요사업내용

□ 기업과 청년의 선호에 맞춰 문화‧산업‧주거를 종합한 플랫폼형 개발

‧ 옛 경북도청 부지를 글로벌R&D존, 앵커기업존, 혁신기업존, 문화예술존으로 구분・개발하며, 선도사업으로 혁신기업존 내 스타트업타운’ 우선 조성

□ 도청터 주변지역 연계개발

‧ 도심융합특구 주변지역 교통체계 개선, 산격동 종변경 등 노후화 지역 개발기반 조성, 복현오거리 및 중앙대로 거리개발, 엑스코 및 금호강 연계 개발, 경대 일원 청년공간 조성

□ 현재 추진 상황

일   자

추   진   내  용

2015. 1월

2016. 6월

∙ 도청이전을 위한 도시건설 및 지원에 관한 특별법 개정 시행

‣ 경북도청 후적지를 국가가 매입하도록 관련 규정 신설

‣ 부지매입은 국가, 개발·활용은 지자체로 역할 분담

2017.12월

∙ 부지매입비 211억 확보(문화체육관광부)

2018. 7. 27.

∙ 일부 부지매입 체결(2,112억원 문체부↔경북도)

‣ 계약금 : 2018년 국비예산 211억원

2018.12월

∙ 부지매입비 1,000억 확보(문화체육관광부)

2019.12월

∙ 부지매입비 500억 확보(문화체육관광부)

2019. 12. 24.

· 후적지 개발을 위한 건의사항 대구광역시 전달

- 도시철도 엑스코선 조기 설치

- 구체적이고 실현가능한 후적지 개발 “공약이행 로드맵” 제시

- 대구형 실리콘벨리를 통한 창조캠퍼스 연계 혁신 청년 경제 생태계 실현

- 공공기관 추가 이전 시 경북도청터를 우선 검토대상으로 지정

2020. 3. 11.

· 도청터종합개발 기본구상(안) 수립

2020. 5. 20.

· 「도청터개발추진위원회 구성 및 운영에 관한 조례 제정」

2020. 7. 1.

∙ 도청터개발추진단 부서 신설(2팀)

2020. 8. 27.

∙ 대구시 특별교부금 5억원 확보(용역비)

2020. 9. 15.

∙ 도청터개발추진위원회 구성 및 위촉

2020. 10. 7.

∙ 區 도심융합특구 유치 건의서 및 후보지 자료 대구시 제출

2020. 10. 16.

∙ 대구시 → 국토부 도심융합특구 후보지 추천

※ 사업후보지 : 경북도청 후적지-삼성창조캠퍼스-경북대

(금호워터폴리스 – EXCO 연계)

2020. 12. 22.

∙ 경북도청-삼성창조캠퍼스-경북대학교 일원 도심융합특구 선도지구 지정

2020.12월

∙ 부지매입비 188억 확보(문화체육관광부)

2021. 7. 9.

∙ 「도심융합특구 연계개발 기본계획 수립 용역」 착수(12개월)

2021.12월

∙ 부지매입비 213억 확보(문화체육관광부) ※ 전액확보

2021. 12. 27.

∙ 도심융합특구 특별법 국토교통위원회 전체1차회의 상정

2022. 4. 15. ~ 7. 13.

∙ 용역일시 중지 ※ 정부 및 대구시 정책방향 종합적인 검토

2022. 7. 14.

∙ 용역 재개 ※ 용역 완료일 : 2022. 10. 7

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율 (%)
기 추 진		도심융합특구 관련 용역 착수
임기내	2022년	도심융합특구 관련 용역 완료 및 특별법 제정	5
	2023년	기본계획 수립 및 도심융합특구 조성지구 지정 승인	20
	2024년	국토부 사업시행자 지정 및 실시계획 수립 용역 실시	30
	2025년	실시계획 수립 용역 완료 및 대구시 승인	50
	2026년	도심융합특구 조성 착수	60
임 기 후		도심융합특구 조성 완료	100

□ 특이사항

○ 문제점

- 도심융합특구 특별법이 장기간 국회 계류

- 대구시 신청사 건립이 지연될 시 도심융합특구 조성에 차질 우려

- 도심융합특구와 글로벌문화시설의 공간활용 방안 필요

○ 부서의견

- 도심융합특구 조성 추진 절차에 속도를 낼 수 있도록 지역정치권과 협의해 조속히 특별법이 제정될 수 있도록 유도

- 도심융합특구 조성 추진 절차에 속도를 내고 주민공청회 등을 통해 주민들의 여론을 조성, 조속한 신청사 이전을 대구시에 건의

- 한정된 부지 내 도심융합특구 및 글로벌 문화시설의 합리적인 공간활용을 위해 국토부 및 문체부 간 협의가 필요

□ 기대효과

○ 지역경쟁력 향상 및 지속가능성을 촉진하여 국가 균형발전에 기여

○ 지역여건 변화 및 핵심자원간의 연계를 위한 효율적 도시 교통체계 확립

○ 지역 경쟁력 강화 및 활력 창출을 위한 체계적 도시공간구조 재편