관리번호	2-1	공약명	태전 화물자동차 공영차고지 조성사업
사업구분	임기 내 완료	추진부서	교통과장 서송학 / 교통시설팀장 정광수 / 주무관 박무성(☎665-3163) 운수관리팀장 임예숙 / 주무관 김은정(☎665-3046)

□ 추진목표

○ 영세 화물운송업자의 차고지 부족난 해소

○ 지역 화물 물동량의 원활한 수송으로 물류경쟁력의 강화

○ 도로 및 주거 지역 내 불법 주차 완화로 쾌적한 주거환경 조성

□ 사업개요

○ 위치/면적 : 태전동 43번지 일원 / 33,287㎡정도

○ 사업기간 : 2019년 ∼ 2023년(5년)

○ 주요시설 : 주차면 477면, 관리동, 자주식 철골 주차장 등

○ 총사업비 : 410억원(국비 4, 시비 365, 구비 41)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자 (2022.7)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	41,000	20,905	4,000	16,095	-	-	-	-
국비	400	400	-	-	-	-	-	-
시비	36,500	18,215	3,600	14,685	-	-	-	-
구비	4,100	2,290	400	1,410	-	-	-	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 현재 추진상황

일 자	추 진 내 용
2018. 8.	∙ 국비(지역발전특별회계) 확보
2019. 4.	∙ 화물자동차 공영차고지 조성사업 관련 용역 착수
2019. 7.	∙ 대구시 입지대상시설 자체심사
2019. 8.	∙ 국토부 입지대상시설 중앙심사
2019. 11.	∙ 대구시 도시계획위원회 심의
2020. 1. ~ 2.	∙ 중앙관계기관 협의(국토교통부↔국방부 외 6기관)
2020. 9.	∙ 제21회 중앙도시계획위원회 심의(GB관리계획 변경)
2020. 11.	∙ 제23회 중앙도시계획위원회 재심의(GB관리계획 변경) - 원안가결 ∙ GB관리계획 변경 승인 통보
2020. 11. ~ 12.	∙ GB관리계획 변경 승인 열람공고
2021. 1. ~ 3.	∙ 도시계획시설 결정(안) 관련부서 협의
2021. 4. ~ 5.	∙ 도시관리계획(안) 열람공고
2021. 6.	∙ 대구광역시 도시계획위원회 심의(도시계획시설 결정) - 원안가결 ∙ 도시계획시설 결정 및 지형도면 고시
2021. 7.	∙ 확보예산 교부 및 토지 등 보상추진 계획 수립
2021. 8.	∙ 지방재정 중앙투자심사 결과(조건부가결)
2021. 8. ~ 9.	∙ 토지 및 지장물 등 물건조사 용역 추진
2021. 10.	∙ 토지 및 지장물 등 물건조사 보상물건 확정
2021. 12.	∙ 감정평가 선정 및 감정평가 실시
2022. 2. ~	∙ 손실보상 협의
2022. 4. ~ 5.	∙ 중앙토지수용위원회 공익성 협의
2022. 5. ~ 6.	∙ GB보전부담금 납부(3회차 중 1회차, 2회차)
2022. 6. ~ 7.	∙ 실시계획 작성 고시

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율(%)
기 추 진		◦중기지방재정계획 반영 및 국비 확보, 중앙관계기관 협의 ◦기본 및 실시설계 용역, 도시계획시설 결정 등	40
임기내	2022년	◦ 8월 : 손실보상 협의 진행 설계경제성(VE) 검토(시 건설산업과) ◦ 9월 : 대구시 건설기술심의 ◦10월 : 국유지 매입 및 GB보전부담금 납부 완료 ◦11월 : 수용재결 신청	60
	2023년	◦1월 : 수용개시 및 공탁 공사 착공 ◦12월 : 공사 준공	100

□ 특이사항

○ 문제점

- 예산(추경 및 본예산 등) 미편성 시 보상절차 지연되면 향후 문화재 지표 조사 및 공사 착공 등이 지연으로 이어져 물가 상승분이 반영되어 공사비 인상 등 불가피

○ 부서의견

- 보상 및 수용재결, 공사비 등을 위한 예산확보 필요

□ 기대효과

○ 불법 주․박차로 발생 되는 교통사고 및 소음민원 등 사회적 문제 해결

○ 개별차고지 설치로 인한 중복투자 비용 절감 등 영세 운송사업자의 차고지난 완화

○ 화물운송업 종사자의 안전운행 및 휴식을 통한 교통사고 예방

○ 복리향상에 따른 원활한 화물운송으로 물류 경쟁력 강화 및 경제활성화에 기여

□ 설계도

□ 조감도