관리번호	2-3	공약명	초등학교 앞 안전한 통학길 조성
사업구분	임기 내 완료	추진부서	교통과장 서송학 / 교통시설팀장 정광수 / 주무관 최승완 (☎665-3161)

□ 추진목표

○ 어린이보호구역 개선사업을 통한 지속적인 교통안전시설 개선

○ 옐로카펫, 노란발자국 등 어린이보호구역 내 안전시설 확충

○ 보행안전지도사업(Walking School Bus) 추진을 통한 안전의식 고취

○ 초등학교 주변 과속 및 신호위반 단속, 불법주정차 단속 CCTV 설치

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022년 ∼ 2026년

○ 총사업비 : 3,739백만원

○ 사업내용

- 보호구역 내 안전시설 확충 및 노후 시설 정비 : 15개소

- 옐로카펫, 노란발자국 설치 : 20개소

- 불법주정차 단속 CCTV 설치 : 관내 초등학교 주변 총 40개소 설치

- 과속 및 신호위반 단속 CCTV 설치 : 20개소

- 보행안전지도사업(워킹스쿨버스) : 팔달초교 외 7개교

□ 현재 추진상황

○ 2022년 어린이보호구역 개선사업

- 강북초교, 운암초교, 관문초교, 팔달초교 : 공사 중

- 서변초교, 성북초교, 관천초교 : 발주 준비중

○ 옐로카펫, 노란발자국 : 태현초교 외 4개소 설치 예정

○ 보행안전지도사업(워킹스쿨버스) : 팔달초교 외 7개교 등하굣길 교통안전지도 실시

○ 어린이보호구역 내 불법주정차 단속 CCTV 설치 : 초등학교 주변 29대 설치 완료

○ 과속 및 신호위반 단속 CCTV 설치 예정 : 강북경찰서 8건

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	3,739	-	1,899	460	460	460	460	-
국비	365	-	365	-	-	-	-	-
시비	2,586	-	1,386	300	300	300	300	-
구비	788	-	148	160	160	160	160	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율 (%)
기 추 진		◦2021년 어린이보호구역 개선사업
임기내	2022년	◦초등학교 주변 단속 CCTV 18개소 설치 ◦어린이 보호구역 안전시설 개선 5개소 ◦보행안전지도 사업 지속 시행(8개교) ◦옐로카펫, 노란발자국 설치 : 4개소	30
	2023년	◦초등학교 주변 단속 CCTV 5개소 설치 ◦어린이 보호구역 안전시설 개선 5개소 ◦보행안전지도 사업 지속 시행(8개교) ◦옐로카펫, 노란발자국 설치 : 4개소	50
	2024년	◦초등학교 주변 단속 CCTV 5개소 설치 ◦어린이 보호구역 안전시설 개선 5개소 ◦보행안전지도 사업 지속 시행(8개교) ◦옐로카펫, 노란발자국 설치 : 4개소	70
	2025년	◦초등학교 주변 단속 CCTV 5개소 설치 ◦어린이 보호구역 안전시설 개선 5개소 ◦보행안전지도 사업 지속 시행(8개교) ◦옐로카펫, 노란발자국 설치 : 4개소	90
	2026년	◦초등학교 주변 단속 CCTV 5개소 설치 ◦어린이 보호구역 안전시설 개선 5개소 ◦보행안전지도 사업 지속 시행(8개교) ◦옐로카펫, 노란발자국 설치 : 4개소	100

□ 특이사항

○ 문 제 점

- 어린이보호구역 내 CCTV 설치 시, 주변 상가 및 주민들의 민원 발생이 많음

○ 부서의견

- 어린이교통사고 예방을 위해 어린이보호구역 내 교통안전시설물을 지속적으로 정비·확충하여 안전한 통학로를 조성할 필요가 있음.

□ 기대효과

○ 어린이보호구역 교통안전시설물 정비 및 확충을 통해 안전한 통학로를 조성하여 어린이들의 교통사고를 예방

○ 초등학교 주변 어린이보호구역 불법주정차 CCTV 설치로 고질적인 안전무시 관행 근절 및 어린이들이 안전하게 다닐 수 있는 통학환경 조성