관리번호	2-4	공약명	구수산 스포츠센터 건립
사업구분	임기 내 완료	추진부서	체육진흥과장 배영환 / 체육진흥팀장 박경자 / 주무관 조순이 (☎665-3934)

□ 추진목표

○ 금호강을 경계로 강북지역은 상대적으로 생활체육기반시설이 취약하여

구수산공원에 스포츠센터를 건립하여 지역의 균형있는 발전과 주민들의

건강 증진을 도모하고자 함

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2021. 6. ~ 2026. 6.

○ 위    치 : 읍내동 964번지 일원

○ 사 업 비 : 22,200백만원(국 6,660, 구 15,540)

○ 규    모 : 부지면적 3,080㎡, 연면적 6,552㎡(지하1층 ~ 지상4층)

○ 주요시설 : 수영장, 헬스장, 종합경기장 등

□ 현재 추진 상황

○ 2022. 7. ~ 8. : 공공건축 사업계획 사전검토[건축공간연구원]

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	22,200	-	1,100	1,000	10,050	10,050	-	-
국비	6,660	-	330	300	3,015	3,015	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-
구비	15,540	-	770	700	7,035	7,035	-	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율 (%)
기 추 진		◦‘21. 6월 : 기본계획 수립 ◦‘21. 10월 : 대구시 공유재산심의회(부지 무상사용) ◦‘22. 3월 : 지방재정투자 중앙투자 심사(조건부 추진) ◦‘22. 6월 : 공유재산 관리계획안 의회 동의
임기내	2022년	◦공공건축심의위원회 심의 ◦설계용역 일상감사 및 계약심사 ◦설계 공모	10
	2023년	◦기본 및 실시설계 용역	30
	2024년	◦기본 및 실시설계 용역 ◦공사 일상감사 및 계약심사 ◦착공	40
	2025년	◦공사	80
	2026년	◦준공	100
임 기 후

□ 특이사항

○ 문제점

- 원자재 가격 상승으로 인한 공사금액이 증가하여, 그에 따른 사업비 증액 또는 사업 규모 축소 등 사업 추진에 어려움이 예상됨

○ 부서의견

- 구수산도서관과 스포츠센터가 함께하는 문화체육공간에 대한 비전을 제시

하기 위한 외관 및 공간 계획과 주변 공원과 어울리는 외부 환경계획으로

강북지역의 대표 공원형 복합문화스포츠 공간으로 건립

□ 기대효과

○ 『구수산 스포츠센터』는 강북지역을 대표하는 공공실내체육시설로서의 역할을 기대하고 있으며 이를 통해 지역의 건강한 주민생활환경 개선과 건전한 체육문화환경 마련

○ 강북지역의 부족한 실내체육시설 확충으로 생활체육을 희망하는 지역 주민의 생활체육 수요 충족, 참여기회 확대 등을 통해 정주만족도 및 삶의 질 향상 기대

○ 구수산 민간공원 특례사업을 통해 조성되는 공원과 공원 내 입지하고 있는 구수산 공공도서관과 연계하여 자연, 문화, 체육활동이 공존하는 차별화된 장소성이 제공된 지역의 새로운 랜드마크로서의 역할 기대

○ 특히 사회공공재로서의 기반시설은 운영방안에 따라 사회적 파급효과를 크게 확장 시킬 수 있는 부분으로 지역의 고용창출과 장애인 및 사회취약 계층의 참여기회 확대 등 건전한 지역발전에 기여