관리번호	3-3	공약명	구암동 고분군 명소화
사업구분	임기 내 기반조성	추진부서	관광과장 김순래 / 문화재팀장 황은미 / 주무관 최한태 (☎665-2354)

□ 추진목표

○ 국가지정문화재로 지정된 구암동고분군과 인접한 팔거산성 일대를 보존․정비하여 도심 속의 고대역사문화체험 공간을 마련하여 우리 지역의 역사문화 관광자원으로 활용하고 지역의 역사문화 분야의 교육과 체험산업 육성을 통한 서비스 산업 활성화를 도모하고자 함

□ 사업개요

○ 사업위치 : 북구 구암동 고분군 일원

○ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년

○ 소요예산 : 금19,595,000천원정도

○ 사업내용 : 구암동고분군․팔거산성 복원 정비

- 고분군 내 사유지 매입

- 대형 고분군 및 팔거산성 연차 발굴 및 복원

- 전시체험관, 탐방안내소 신축

- 구암동고분군 수목정비 등

□ 현재 추진 상황

○ 구암동고분군 종합정비계획 수립 완료

○ 구암동고분군 1호분 주변정비사업 완료

○ 구암동고분군 누리길 조성사업 완료

○ 구암동고분군 1호분 봉분 복원사업 완료

○ 구암동고분군 1호분, 56-58호분, 5호분 문화재 정밀발굴조사 완료

○ 구암동고분군 사유지 매입(구암동 산64번지 등 133,236㎡)

○ 구암동고분군 304호분 정밀발굴조사 추진 중

○ 팔거산성 정밀발굴조사 추진 중

○ 팔거산성 국가지정문화재(사적) 승격을 위한 학술용역 추진 중

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	26,476	6,517	2,135	2,324	4,150	6,250	5,100	-
국비	16,826	3,711	1,145	1,610	2,415	4,375	3,570	-
시비	8,267	1,776	915	711	1,460	1,875	1,530	-
구비	1,383	1,030	75	3	275	-	-	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율 (%)
기 추 진		◦구암동 고분군 및 팔거산성 개발 -고대역사문화 체험 특구-
임기내	2022년	◦구암동고분군 사유지 매입사업 ◦구암동고분군 56~58호분 봉분복원 실시설계사업 ◦구암동고분군 304호분 정밀발굴조사 사업 ◦구암동고분군 56호분 기록화 사업 ◦팔거산성 문화재 정밀발굴조사 사업 ◦팔거산성 사적지정 학술조사 용역 사업	25
	2023년	◦구암동고분군 사유지 매입사업 ◦구암동고분군 100호분 문화재 정밀발굴조사 사업 ◦구암동고분군 56~58호분 봉분복원 사업 ◦구암동고분군 5호분 봉분복원 실시설계 사업 ◦팔거산성 내 민묘 이장 사업	40
	2024년	◦구암동고분군 5호분 봉분복원 사업 ◦구암동고분군 수목정비 사업 ◦구암동고분군 안내소 설치 사업 ◦구암동고분군 100호분 복원정비 사업 ◦팔거산성 문화재 정밀발굴조사 사업 ◦구암동고분군 전시체험관 실시설계 사업	60
	2025년	◦구암동고분군 사유지 매입 사업 ◦구암동고분군 수목정비 사업 ◦구암동고분군 전시체험관 건립 사업 ◦팔거산성 문화재 정밀발굴조사 사업 ◦팔거산성 민묘이장 사업	80
	2026년	◦구암동고분군 사유지 매입 사업 ◦구암동고분군 수목정비 사업 ◦구암동고분군 87~89호분 정밀발굴조사 사업 ◦팔거산성 문화재 정밀발굴조사 사업 ◦팔거산성 종합정비계획 수립 사업 ◦팔거산성 민묘이장 사업	100
임 기 후		◦구암동고분군 수목정비사업, 탐방로 정비사업, 방재시설 설치사업 등

□ 특이사항

○ 문제점

- 대부분의 사업이 문화재청의 문화재 보수정비사업 예산으로 추진되므로 다년간에 걸쳐 진행 중

- 문화재 보수정비사업에 포함되지 않는 사업의 사업비 확보 방안 모색 필요

(ex 구암동고분군 체험전시관 건립, 고분전시관 건립 예산 등)

○ 부서의견

- 팔거산성 국가지정문화재 승격과 구암동고분군 종합정비계획에 근거하여 문화유산을 효율적으로 복원하고 관광자원화 하기 위해서는 지속적인 예산 편성이 필요

□ 기대효과

○ 구암동고분군과 팔거산성의 문화재 원형을 복원하여 지역의 역사문화자원 및 관광자원으로 활용하여 지역 경제 활성화에 기여