관리번호	4-2	공약명	산격3동 복합커뮤니티센터 건립
사업구분	임기 내 완료	추진부서	도시재생과장 정상현 / 뉴딜사업2팀장 빈정은 / 주무관 배준호 (☎665-4275)

□ 추진목표

○ 노후된 청사를 개선하여 주민 불편을 해소하고, 문화센터, 체육시설, 경로당 등 다양한 공간이 포함된 복합 청사를 조성하여 주민 행정편의 증진

□ 사업개요

○ 위    치 : 대구 북구 산격동 1393-27번지

○ 규    모 : 지하1층~지상5층 / 연면적 2,989.2㎡

○ 사업기간 : 2020. 6월 ~ 2024. 3월

○ 사 업 비 : 80억원 [국비 42.5, 시비 15.75, 구비 6.75, 자체구비 15]

○ 사업내용 : 행정복지센터, 경로당, 헬스케어, 예비군동대, 마을 카페, 회의실 등

□ 현재 추진 상황

○ 2020. 6.              : 건축설계 공모계획 수립

○ 2021. 1.  ~ 2021. 3.  : 설계공모 공고 및 심사

○ 2021. 5.  ~ 2022. 10. : 기본 및 실시설계 용역

○ 2022. 11. ~ 2022. 12. : 일상감사 및 계약심사

○ 2022. 12. ~ 2024. 3.  : 공사 착공 및 준공 예정

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	8,000	265	1,670	3,000	3,065	-	-	-
국비	4,250	254	-	2,000	1,996	-	-	-
시비	1,575	-	100	700	775	-	-	-
구비	2,175	11	1,570	300	294	-	-	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율 (%)
기 추 진		◦건축설계 공모계획 수립 및 공모	15
임기내	2022년	◦기본 및 실시설계 용역 ◦공사 착공	30
	2023년	◦공사 추진	70
	2024년	◦공사 준공	100
	2025년
	2026년
임 기 후

□ 특이사항

○ 문제점

- 신축 건물 및 규모의 특성상 예산 및 공사 기간이 상당히 소요되며, 국·시비 미확보 시 자체 예산으로 조성하기에는 재정 부담이 크기 때문에 매칭비 예산 확보가 반드시 필요함

○ 부서의견

- 공사 착공 전까지 기존 건물 부지에 안전사고나 민원이 발생되지 않도록 유의해야 하며, 공사기간 동안 소음, 교통 등 각종 민원 발생 대책 마련

□ 기대효과

○ 주민 행정편의 증진 및 양질의 행정서비스 제공 가능

○ 지역문화 공간을 창출하여 주민참여 확대와 삶의 질 향상

○ 주민 간 교류 기회 확대와 주민역량 강화