관리번호	4-4	공약명	무태조야동 복합문화시설 건립
사업구분	임기 내 완료	추진부서	문화예술과장 최순남 / 도서관팀장 김영란 / 주무관 남영보 (☎665-2176)

□ 추진목표

○ 지역민의 도서관 접근성 향상 및 여가활동 지원하고자 함

- 지형적 특징으로 문화복지 공공시설 이용 어려움

○ 문화·복지시설 인프라 확충으로 주민 주거만족도 향상

- 원도심 주민의 지속적 공공도서관 건립요구 및 도남연경지구 인구유입

□ 사업개요

○ 사업위치 : 서변동 1747번지(서변근린공원 內)

○ 사업기간 : 2020. 7. ~ 2024. 2.

○ 사업규모 : 건축면적 553.7㎡, 연면적 2,600㎡

○ 사업내용 : 도서관, 노인복지시설 건립

구 분		시설 내용	면적(㎡)
도서관	지하1층	주차장, 기계실	710
	1 층	어린이자료실, 보존서고, 사무실	540
	2 층	종합자료실, 정기간행물실, 전자자료실	500
	3 층	강좌실, 동아리실, 다목적실, 휴게실	450
노인복지시설	4 층	프로그램실, 상담실	400
연면적			2,600

○ 사업예산 : 7,800백만원(국비 2,640, 시비 1,980, 구비 3,180)

□ 현재 추진 상황

○ 2020. 7. ~ 2021. 11. : 건립계획 수립 및 설계용역 착수

○ 2022. 7. : 실시설계 용역 및 BF 예비인증 진행 중

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	7,800	700	6,000	1,100	-	-	-	-
국비	2,640	200	2,040	400	-	-	-	-
시비	1,980	150	1,530	300	-	-	-	-
구비	3,180	350	2,430	400	-	-	-	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율 (%)
기 추 진		◦사업계획수립, 토지 무상사용 가결(대구시), 설계용역 착수	30
임기내	2022년	◦ 7월 : 공유재산관리계획 수립, BF제도 예비인증 ◦ 8월 : 설계용역 완료, 공유재산심의회 의결 ◦ 9월 : 의회 상정 및 의결, 공사 계약심사 및 계약 ◦10월 : 공사 착공	50
	2023년	◦공사 진행	80
	2024년	◦2월 : 준공 및 개관	100

□ 특이사항

○ 문제점

- 계획수립 당시 2020년 공공건축물 공사비 산정기준에 따라 건축비를 책정하여 향후 공사업체 선정 및 계약 시 자재값 상승에 의한 예산증액이 필요할 수 있음

○ 부서의견

- 2022. 6월 기준 주민 36,159명이 거주하고 북구인구의 8.3%를 차지하는 무태조야동은 공공 문화·복지시설이 전무하다시피 했기에 도서관과 노인복지시설 건립·운영에 주민들의 기대감이 큼. 착공부터 준공까지 건설현장의 안전성을 기하고 완공 후 지역 랜드마크 역할을 충실히 수행할 수 있도록 적극적 관심과 지원이 필요함

□ 기대효과

○ 문화·복지 인프라 확충으로 주민의 주거만족도 향상