관리번호	5-1	공약명	서변가압장 리모델링 및 공공형 실내놀이터 조성
사업구분	임기 내 완료	추진부서	여성아동과장 박천수 / 여성아동팀장 조현경 / 주무관 김명주 (☎665-2079)

□ 추진목표

○ 미세먼지, 폭염 등 기후변화에 안전한 실내놀이터 조성

○ 아동의 놀 권리보장 및 자연환경 인프라와 연계한 놀이공간 확충

○ 도심 속 생활밀착형 공공형 어린이놀이터 조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 대구 북구 서변로3길 2 (서변동)

○ 규    모 : 지하1층/지상1층(대지면적 1,000㎡, 연면적 399㎡)

○ 사업기간 : 2022. 1월 ~ 2023. 1월

○ 사 업 비 : 15억원 정도(특교세, 특교금)

□ 현재 추진 상황

○ 2021. 11.   : 정밀안전진단 용역 시행

○ 2022. 3. 2. ~ 3. 19. : 놀이시설 설계 및 제작ㆍ설치용역 제안 입찰 공고

○ 2022. 3. 30. : 주민설명회 개최

○ 2022. 4. 8. : 협상(계약) 및 용역 시행

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	1,570	1,270	300	-	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-
구비	1,570	1,270	300	-	-	-	-	-
민간	-	-	-	-		-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율 (%)
기 추 진		◦정밀안전 진단 용역	5
임기내	2022년	◦기본ㆍ실시설계 및 구조 정밀안전 진단 ◦인테리어공사 및 놀이시설 제작ㆍ설치, 기타 공사 ◦운영계획 수립 및 관련 조례 제정	75
	2023년	◦시범운영 및 정식 개장	100
	2024년	◦관리 및 운영
	2025년	◦관리 및 운영
	2026년	◦관리 및 운영
임 기 후

□ 특이사항

○ 문제점

- 서변가압장 기초구조 설계도면 부재(분실 추정)로 대형 놀이시설물 설치에 따른 증축 설계 가능 여부를 검토하기 위하여 구조 정밀안전 진단이 추가로 필요하며, 이에 따라 당초 일정 지연 및 소요예산 추가 발생

○ 부서의견

- 안전한 놀이시설 조성을 위해 일정 지연 및 소요예산이 추가 발생하더라도 구조 정밀안전진단 실시

□ 기대효과

○ 가동 중단으로 방치된 시설이 대구 제1호 공공형 실내놀이터로 조성되어  어린이들의 꿈과 재능의 터전으로 재탄생

○ 모든 아이들이 평등하게 무료로 즐길 수 있고, 미세먼지 등 기후변화에도 자유롭게 뛰어 놀 수 있어 어린이의 건강한 성장 도모