관리번호	5-2	공약명	통합 가족센터 건립
사업구분	임기 내 완료	추진부서	여성아동과장 박천수 / 여성아동팀장 조현경 / 주무관 이성호 (☎665-2522)

□ 추진목표

○ 기존에 운영하고 있는 가족센터의 기능을 확대하여 다양한 서비스를 제공하고, 이용자 수요를 고려한 교류·소통 공간 조성

○ 다양한 가족 구성원이 소통하고 창의적인 활동이 가능하며 전 세대를 아우르는 통합적 공간 조성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022. 1월 ~ 2023. 3월

○ 위    치 : 동천동 930-1번지

○ 규    모 : 지하1층/지상5층(연면적 1,661.96㎡)

○ 사업예산 : 54억원 정도(특교세, 국·시·구비)

○ 주요시설 : 가족센터, 공동육아나눔터, 장난감도서관, 다함께돌봄센터 등

□ 현재 추진 상황

○ 2021. 12. : 공사 입찰공고 및 계약

○ 2022.  1. : 공사 착공

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	5,400	2,536.5	2,863.5	-	-	-	-	-
국비	1,500	813	687	-	-	-	-	-
시비	750	406.5	343.5	-	-	-	-	-
구비	3,150	1,317	1,833	-	-	-	-	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추 진 계 획	추진율 (%)
기 추 진		◦공사 착공	25
임기내	2022년	◦골조공사 및 마감공사	70
	2023년	◦공사 준공	100
	2024년
	2025년
	2026년
임 기 후

□ 특이사항

○ 문제점

- 2022년 예산중 시비 114백만원 미확보 상태이며, 원자재값 상승에 따른 사업비의 증가

- 건설경기 악화 등 원자재 수급 불안정에 따른 준공 지연 우려가 있음

○ 부서의견

- 2022년 대구시 2회 추경시 시비 미반영분 반영 요청 완료

- 향후 통합 가족센터의 원활한 운영을 위한 구비 확보가 요구됨

□ 기대효과

○ 다양한 가족을 대상으로 지역 중심의 통합형 가족서비스 제공

○ 보편적인 가족서비스를 제공하기 위해서 욕구나 문제를 해결하는 서비스뿐만 아니라 누구나 편하게 참여하고 이용할 수 있는 소통과 교류의 공간 제공